정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)	행정7급 배태영 과 장 박용우
③정책사업명	국민체육센터(수영장) 건립
④선정기준	다수 주민의 복지증진	⑤사업기간	2012 ~ 2014
⑥주요내용	□ 추진배경 - 농촌지역의 급속한 노령화로 노인건강의 문제가 대두됨에 따라 운동을 통한 체계적인 건강관리가 필요 □ 추진기간 : 2012 ~ 2014 □ 총사업비 : 6,632백만원 □ 주요내용 - 지하1층 : 기계실, 공조실, 전기실, 발전기실 - 지상1층 : 수영장(25m, 6레인), 유아풀, 탈의실 - 지상2층 : 체력단련실, 휴게실 □ 지금까지 추진실적 ❍ 2012 국민체육진흥기금 생활체육시설지원사업 확정: 2012. 2. 24. ❍ 의원간담회 사전 설명 : 2012. 3. 5. ❍ 체육협회 관계자 사전 설명 : 2012. 3. 9. ❍ 수영장 운영 우수사례 벤치마킹 : 2012. 3. 13.~3. 14.(2일간) ❍ 수영장 건립 부지 주민설명회 : 2012. 4. 18. ❍ 지방재정 투융자 심사 완료(자체) : 2012. 7. 3. ❍ 실시설계용역비 등 군 의회 의결 : 2012. 7. 11. ❍ 기본설계 보고회 : 2012. 10. 11. ❍ 공유재산 관리계획 군 의회 의결 : 2012. 11. 19. ❍ 2013. 본예산 반영 : 2012. 12. 17. ❍ 실시설계 최종 보고회 : 2013. 1. 16. ❍ 수영장 건립 실시설계 용역 납품 : 2013. 1. 26. ❍ 전라남도 투융자 심사 : 2013. 3. 29. ❍ 전라남도 계약심사 등 : 2013. 4. 3. ❍ 계약체결 및 착공 : 2013. 7. 2.