정책추진과정 관리카드

정 책 명	삼계면사무소 이전건립 공사
총소요기간	2011 ~ 2013(3년)	예산액	33억원
추진배경	❍ 추진배경 - 50여년이 넘은 면사무소의 불편으로 인한 주민의 건의 ❍ 추진기간 : 2011.2.15 ~ 2013.12.21 ❍ 총사업비 : 330백만원 ❍ 주요내용 - 면사무소 950.99㎡
추진경과	❍ 2011.4. ～ 2011.9. : 공유재산관리계획 및 투융자 심사 ❍ 2011.9. ~ 2012.9. : 도시계획시설결정용역 ❍ 2011.9. ~ 2012.9 : 건축실시설계 ❍ 2012.7. : 토지매입완료 ❍ 2012.10 : 도시계획시설 결정고시 ❍ 2012.12 ~2013.12 : 건축공사추진

관련자 및

업무분담

내    용

❍ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 행정 5급(직급) 김병교(성명)

- 최종 결재자 : 행정 5급(직급) 김충호(성명)

❍ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과장	김병교	행정5급	2011.2~ 2011.07.10	재무과장
과장	김충호	행정5급	2011.07~ 2012.12	재무과장
담당	이덕주	행정6급	2011.2~ 2011.07.10	재산관리담당
담당	손선엽	행정6급	2011.07~ 2012.12	재산관리담당
담당	허지현	시설8급	‘2011.2～ 2012.12.31	담당자
담당	정창래	시설8급	2013.1～ 2013.12	담당자

타 기 관

또    는

민 간 인

관 련 자

❍ 설계자 : 초석 건축사 사무소 이학호

❍ 감리자 : 건상스페이스 건축 박상윤

❍ 시공사 :청림종합건설 현장대리인 김호

기    타