정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)	시설6급 이선형 과 장 임현승
③정책사업명	덕진천 재해위험지구 정비사업
④선정기준	대규모 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2014 ~ 2016
⑥주요내용	□ 추진배경 - 재해발생 원인을 사전제거 홍수를 방어 할 수 있는 통수단면 확보 재해 위험 하천 시공으로 농경지 유실 및 주민피해 예방 □ 추진기간 : 2013.12.27. ~ 2016.12.10 □ 총사업비 : 8,610백만원 □ 주요내용 - 호안정비 L=3.79km - 배수구조물 34개소 - 교량공 10개소 - 하도정비공 22개소 □ 지금까지 추진실적 ❍ 2012. 09. 04. ~ 2013. 06. 30. : 실시설계 용역 ❍ 2013. 05. 01. ~ 07. 05. : 소규모환경영황평가 용역 시행 ❍ 2013. 05. 23. : 소규모환경영향 평가 협의(영산강유역환경청) ❍ 2013. 07. 16. : 비관리청 하천공사 협의(전라남도청) ❍ 2013. 08. 15. ~ 09. 28 : 실시설계 경제성등 검토용역 시행 ❍ 2013. 09. 12. ~ 10. 16 : 문화재지표조사 용역 시행 ❍ 2013. 09. 23. : 전라남도 계약심사 ❍ 2013. 10. 01. ~ : 행정절차 이행(농지전용, 보상업무 등) ❍ 2013. 11. 05. ~ : 보상협의위원회 구축 ❍ 2013. 12. 24. ~ : 사업시행