정책추진과정 관리카드

정 책 명	장성소도읍육성사업(전선지중화사업)
총소요기간	2012. 1. ~ 2013. 12.	예산액	6,448백만원
추진배경	❍ 추진배경 - 기존 전신주가 차지하고 있는 공간을 보행공간으로 전환해서 가로환경 개선을 통해 보행자 왕래를 유도하고 더불어 지역민의 삶의질 향상에 기여 ❍ 추진기간 : 2012. 5. ~ 2013. 12. ❍ 총사업비 : 6,448백만원(군비 3,600 사업자 2,848) ❍ 주요내용 - 전기·통신 선로 지중화 L=2.1㎞(한국전력공사외 7개사)
추진경과	❍ 2008.10. : 장성소도읍육성사업 대상지 확정(행정자치부) ❍ 2012. 1. : 지중화사업 신청(장성군→한전) ❍ 2012. 5. : 지중화사업 대상지 선정(한전) ❍ 2012. 6.~12. : 지중화사업 실시설계(한전, 통신사) ❍ 2013. 3. : 장성 영천지주화사업 한전 본사 승인 ❍ 2013. 4.~5. : 지중화사업 협약(한전, 공가통신, 유선방송, KT) ❍ 2013. 5. : 한전 지중화공사 착공 ❍ 2013. 6. : 공가통신사업자연합회 지중화공사 착공 ❍ 2013. 10. : 관로매설작업 완료 ❍ 2013. 11. : 교통대~쌈지공원구간 전선 절체작업 및 전주 철거작업 완료 ❍ 2013. 12. : 고려시멘트 오거리~교통대구간 전선 절체작업 및 전주 철거작업 완료

관련자 및

업무분담

내    용

❍ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설7급(직급) 정태영(성명)

- 최종 결재자 : 시설5급(직급) 심연섭(성명)

❍ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
군수	김양수		‘12.1.~’13. 12.
부군수	박기열	4급	‘12.1.~’13. 12.
과장	심연섭	5급	‘12.1.~’12. 12.	총괄
과장	김생수	5급	‘13.1.~’13. 12.	총괄
담당	이인섭	6굽	‘12.1.~’12. 7.	담당
담당	윤홍장	6급	‘12.7.~’13. 12.	담당
담당자	정태영	7급	‘12.1.~’13. 12.	담당자

타 기 관

또    는

민 간 인

관 련 자

❍ 한국전력공사 광주전남개발지사

- 변전개발팀 : 한유진 과장

- 시공사 : 거성종합건설 전광열 소장

❍ ㈜KT광산지사

- 담당자 : 조태진 과장

- 시공사 : ㈜그린정보시스템 임채병 상무

❍ 공가통신사업자 연합회

- 드림라인(주) : 서도석 부장

- ㈜LG U+ : 김행호 과장

- SK텔레콤 : 최기우 매니저

- ㈜세종텔레콤 : 이수근 대리

- ㈜중부케이블넷 : 이종희 대표

- 장성삼계케이블 : 안철수 대리

- 시공사 : 남양통신 정대영 이사

기    타