정책추진과정 관리카드

정 책 명	도로 확․포장사업(갈전마을 진입도로)
총소요기간	2012. 3. 12. ~ 2013. 11. 11.	예산액	1,834백만원
추진배경	❍ 추진배경 - 농촌지역의 생활환경을 종합적으로 정비하고 확충하여 농업인의 복지 향상에 기여 - 마을안길이 협소하여 동절기 대중교통 진입이 어려웠던 마을로, 진입도로 확포장공사를 통해 교통인프라를 개선 ❍ 추진기간 : 2012. 3. 12. ~ 2013. 11. 11. ❍ 총사업비 : 1,834백만원 ❍ 주요내용 - 도로확포장 L=828m(B=6~8m), 지방상수도 L=828m
추진경과	❍ 2012. 3.12. : 실시설계 용역 착수 ❍ 2012. 4.13. : 주민설명회 ❍ 2012. 5.10. : 실시설계 용역 완료 ❍ 2012. 5.18. : 사전환경성검토 용역 착수 ❍ 2012. 6.19. : 산지전용 협의 완료 ❍ 2012. 6.19. : 농지전용 협의 완료 ❍ 2012. 7.16. : 사전환경성검토 용역 완료 ❍ 2012. 7.24. : 편입토지 분할측량 완료 ❍ 2012. 8. 8. : 보상금 확정 통보 및 보상 착수 ❍ 2012. 9.10. : 총괄 및 1차분 착공 ❍ 2012.12.31. : 1차분 준공 ❍ 2013. 2.26. : 2차분 착공 ❍ 2013.11.11. : 총괄분 및 2차분 준공

관련자 및

업무분담

내    용

❍ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 시설 8급   김형수

- 최종 결재자 : 군    수   김양수

❍ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
부군수	박기열	행정4급	‘11.01.10.～현재
단 장	유영수	시설5급	‘12.03.～12.12.	미래전략사업단 업무 총괄
과 장	오동길	행정5급	‘13.01.～현재	미래전략과 업무 총괄
담 당	강대익	행정6급	‘12.03.～12.12.	나노바이오 전반 업무
담 당	류현성	행정6급	‘13.01.～현재	나노바이오 전반 업무
담당자	김형수	시설8급	‘12.03.～현재	농촌생활환경 정비사업

타 기 관

또    는

민 간 인

관 련 자

기    타