정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	미래전략과	②담당자 (연락처)	시설8급 김형수 과 장 오동길
③정책사업명	신규마을 조성사업(신평지구 전원마을)
④선정기준	대규모 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2012 ~ 2015
⑥주요내용	□ 추진배경 - 귀농․귀촌을 희망하는 도시민들의 수요가 많아 북이면 신평리 일원에 전원주택 31세대 규모의 공공기관주도형의 전원마을 조성사업 추진 □ 추진기간 : 2012 ~ 2015 □ 총사업비 : 8,300백만원 - 기반시설 18억원, 진입도로 9억원, 주택건축 56억원 □ 주요내용 - 개발면적 : 30,676㎡(31세대) - 사업내용 : 도로, 공원, 상하수도, 오수처리시설 등 □ 지금까지 추진실적 ❍ 2011. 9.30 : 신평지구 전원마을 추진계획 수립 ❍ 2012. 1.12. : 신평지구 전원마을 기본계획수립 용역 착수 ❍ 2012. 2.15. : 신평지구 전원마을 예비입주자 협약 체결 ❍ 2012. 2.27. : 신평지구 전원마을 기본계획수립 완료 ❍ 2012. 2.28. : 신평지구 전원마을 공모신청 ❍ 2012. 6.30. : 신평지구 전원마을 공모 선정 ❍ 2012.10.18. : 신평전원마을 진입도로 확포장공사 착공 ❍ 2013. 3.25. : 신평지구 마을정비구역 지정 열람공고 ❍ 2013. 6.19. : 신평지구 전원마을 실시설계 용역 착수 ❍ 2013.11.30. : 신평전원마을 진입도로 확포장공사 준공 ❍ 2013.12.26. : 신평지구 마을정비구역 지정 승인신청