정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	환경사업소	②담당자 (연락처)	기계운영6급 이동열 소 장 배영식
③정책사업명	개천지구(북일·조양) 소규모하수도 정비사업
④선정기준	주민의 생활에 영향을 미치는 정책	⑤사업기간	2013 ~ 2015
⑥주요내용	□ 추진배경 - 북일면 소재지 및 북이면 조양리 일원 생활하수를 오․우수 분리 차집 처리 주민 보건위생 향상 및 주거환경개선 □ 추진기간 : 2013 ~ 2015 □ 총사업비 : 6,243백만원 □ 주요내용 - 오수처리장 2개소(북일 110톤/일, 조양 35톤/일) - 오수관로 L=9.5㎞(북일 5.4, 조양 4.1) □ 지금까지 추진실적 ❍ 기본 및 실시설계용역 : 2011. 2. 23.~ 2013. 9. 26 ❍ 북일지구 하수처리시설 공법선정 : 2011. 11. 17. ❍ 환경부 2013년 예산내시 : 2012. 10. 10. ❍ 실시설계용역 변경(조양지구 포함) : 2012. 11. 9. ❍ 조양마을 주민설명회 : 2012. 12. 5. ❍ 조양지구 하수처리시설 공법선정 : 2013. 3. 22. ❍ 개천지구(북일ㆍ조양) 설계자문(전라남도) : 2013. 4. 10. ❍ 개천지구(북일ㆍ조양) 재원조달 협의(유역청): 2013. 4. 16. ❍ 재원조달 협의 의견 통보(유역청) : 2013. 6. 13. ❍ 재원조달 협의 조치결과 제출 (유역청) : 2013. 7. 30. ❍ 계약심사 결과통보(전라남도) : 2013. 9. 13. ❍ 설치인가 통보(전라남도) : 2013. 9. 12. ❍ 개천지구(북일ㆍ조양) 사업시행 : 2013. 11. 20.