정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	환경사업소	②담당자 (연락처)	시설6급 장관기 과 장 배영식
③정책사업명	가축분뇨 공공처리시설 설치사업
④선정기준	대규모 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2010. 3.~2014. 7.
⑥주요내용	□ 추진배경 - 가축분뇨의 해양배출이 전면 금지됨에 따라 장성군 일원에서 발생하는 가축분뇨를 경제적이고 효율적으로 처리하여 예상되 는 오염원 증가에 대해 적극 대응하고, 수질오염 총량관리의 일환으로 가축분뇨공공처리시설을 계획하여 축산농가의 애로 사항 해소 및 황룡강 수질보전에 만전을 기하기 위함 □ 추진기간 : 2010. 3. ~ 2014. 7. □ 총사업비 : 15,092백만원(국비10,179 도비376 군비4,537) □ 주요내용 - 위 치 : 장성군 황룡면 강변로 349(환경사업소지내) - 처리용량 : 95톤/일 - 처리공법 : KHTS(고농도 축산폐수 처리공법) □ 지금까지 추진실적 ○ 2007.01.~2007.10. : 타당성 조사용역 추진 ○ 2008.01.09. :‘09년 정부재정 반영 건의 ○ 2008.04.21. :‘09년 국고보조사업 신청 ○ 2008.10.16. :‘09년 국고보조사업 확정 ○ 2008.10. : 투융자심사 완료 ○ 2008.12.03. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○ 2009.06.26. : 가축분뇨공공처리시설 설치승인 ○ 2010.02. : 기본 및 실시설계용역 완료 ○ 2010.03. : 사업착공(총괄 및 1차분) ○ 2010.03. ~ 2010.08. : 1차분 사업추진 및 완료 ○ 2011.02. ~ 2011.12. : 2차분 사업추진 및 완료 ○ 2012.03. ~ 2013.03. : 3차분 사업추진 및 완료 ○ 2013.03. ~ 2014.07. : 4차분 사업시행