1-10

장성읍 시가지 지중화

《 사 업 개 요 》

❍ 위    치 : 장성읍 영천리 일원(주요 간선도로)

❍ 사업규모 : 도로정비 및 지중화사업 L=2.1km, 34억원

구 분	구 간	연장 (㎞)	사 업 비(백만원)					비고
			합 계	도로정비 (군 비)	지 중 화 사 업
					계	한전	군비
합 계		2.1	3,400	1,300	2,100 (100%)	1,050 (50%)	1,050 (50%)
1구간	애플탑~ 장성역	1.0	1,500	500	1,000	500	500
2구간	장성역~ 청운고가	0.5	850	350	500	250	250
3구간	청운고가~ 쌈지공원	0.6	1,050	450	600	300	300

※ 도로정비시만 한전부담금 지원 가능

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 6.(구간별 순차적 추진)

❍ 사업시행 : 한국전력공사(지중화사업), 우리군(도로정비)

□ 그동안 추진실적(추진율 15%)

❍ 사업계획 수립(1구간)                           : 2019. 1.

❍ 지중화 사업 협약(한국전력공사)                 : 2019. 2.

❍ 실시설계 용역                                 : 2019. 1. ~ 5.

□ 앞으로 추진계획

❍ 한전 협의 및 지중화사업 설계(한전) 〈1구간〉    : 2019. 6. ~ 9.

❍ 사업 착공〈1구간〉                             : 2019.10. ~

❍ 사업 계획 수립〈2, 3구간〉                      : 2021. 1. ~

▣ 도시재생과장 김 선 주 / 도시재생담당 이 행 재 / 담당자 김 국 원