1-2

스마트 하이패스 전용 IC 신설

	《 사 업 개 요 》
❍ 위 치 : 장성읍 영천리, 성산리, 월산리 외 ❍ 사 업 량 : 하이패스 IC 신설, 접속도로 L= 1.2Km ❍ 사 업 비 : 80억원(국비 30, 군비 50) ※ 관련부처 : 한국도로공사 기획처(계획수립), 건설처(사업시행)

□ 그동안 추진실적(추진율 10%)

❍ 하이패스 전용 IC 대상지 제출                     : 2018. 12.

- 장성군 (11. 30) ⇒ 전라남도 (12. 11) ⇒ 한국도로공사

❍ 타당성조사 용역비 확보(1회 추경)                  : 2019. 04.

□ 앞으로 추진계획

❍ 하이패스 전용 IC 설치 타당성조사 (한국도로공사)      : 2019.  05. ~ 08.

❍ 하이패스 전용 IC 설치 연결허가  (한국도로공사)       : 2019.  09. ~ 10.

❍ 하이패스 전용 IC 설치 협약체결 (장성군⇔한국도로공사)   : 2019.  11. ~ 12.

❍ 하이패스 전용 IC 설치 실시설계  (한국도로공사)       : 2020.  01. ~ 12.

❍ 하이패스 전용 IC 설치 사업착공  (한국도로공사)       : 2021.  03.

❍ 하이패스 전용 IC 설치 사업준공  (한국도로공사)       : 2022.  12.

▣ 안전건설과장 장 관 기  / 토목담당 정 배 광 / 담당자 김 현 수