1-4

통행불편 진입도로 확포장

《 사 업 개 요 》

연번	공 사 명	위 치	사업량	사업비 (백만원)	비 고
	6개면 8개소		L=4,210m	5,200
1	동화면 통안마을 진입도로	동화면 통안리	L=150m	100	완료
2	삼계면 내계리 염치마을 안길	삼계면 내계리	L=300m	50	완료
3	장성읍 유탕리 진입도로	장성읍 유탕리	L=450m	450	추진중
4	남면 월정리 월계~불정간 도로	남 면 월계리	L=640m	500	추진중
5	삼서 유평리 유정~삼계 신기리 유천간 도로	삼서면 유평 삼계면 신기리	L=1,500m	1,900	추진중
6	삼계면 화산리 남계마을 도로	삼계면 화산리	L=350m	700	추진중
7	서삼면 봉연마을 연결 도로	서삼면 봉연마을	L=620m	1,200	추진중
8	서삼면 세포마을 진입도로	서삼면 세포마을	L=200m	300	추진중

□ 그동안 추진실적(추진율 40%)

공 사 명	사업량	사업비 (백만원)	예산확보 (백만원)	추진실적
6개면 8개소	L=4,210m	5,200
동화면 통안마을 진입도로	L=150m	100	100	- 공사완료
삼계면 내계리 염치마을 안길	L=300m	50	50	- 공사완료
장성읍 유탕리 진입도로	L=450m	450	450	- 실시설계 : 18. 05. ~ 09. - 공사추진 : 18. 06. ~ 19. 06.
남면 월정리 월계~불정간 도로	L=640m	500	500	- 실시설계 : 18. 01. ~ 03. - 공사추진 : 18. 06. ~ 19. 06.
삼서 유평리 유정~ 삼계 신기리 유천간 도로	L=1,500m	1,900	1,000	- 실시설계 : 18. 01. ~ 03. - 공사추진 : 18. 05. ~ 19. 07.
삼계면 화산리 남계마을 도로	L=350m	700	700	- 실시설계 : 18. 11. ~ 12. - 공사추진 : 19. 03. ~ 19. 12.
서삼면 봉연마을 연결 도로	L=620m	1,200	1,200	- 실시설계 : 19. 01. ~ 03. - 공사추진 : 19. 03. ~ 12.
서삼면 세포마을 진입도로	L=200m	300	300	- 실시설계 : 19. 01. ~ 03. - 공사추진 : 19. 03. ~ 12.

□ 앞으로 추진계획

공 사 명	추진계획	비고
동화면 통안마을 진입도로	유지관리
삼계면 내계리 염치마을 안길	유지관리
장성읍 유탕리 진입도로	보상협의 : 18. 10. ~ 19. 06. 공사준공 : 18. 12. ~ 19. 06.
남면 월정리 월계~불정간 도로	보상협의 : 18. 10 ~ 19. 06. 공사준공 : 18. 06. ~ 19. 06.
삼서 유평리 유정~삼계 신기리 유천간 도로	보상협의 : 18. 06 ~ 19. 06. 공사준공 : 18. 05 ~ 19. 07.
삼계면 화산리 남계마을 도로	- 보상협의 : 19. 03. ~ 06. - 공사추진 : 19. 03. ~ 12.
서삼면 봉연마을 연결 도로	- 보상협의 : 19. 03. ~ 06. - 공사추진 : 19. 03. ~ 12.
서삼면 세포마을 진입도로	- 보상협의 : 19. 03. ~ 06. - 공사추진 : 19. 03. ~ 12.

▣ 안전건설과장  장 관기 / 토목담당 정 배 광 / 담당자 김 현 수