1-5

국도24호선 진입로(동화면 남산리) 개설

	《 사 업 개 요 》
❍ 위 치 : 장성군 동화면 구림리, 남평리 지내 ❍ 사업규모 : 진․출입로 L=500m ❍ 사업기간 : 2019. 1.~ 2020. 12. ❍ 사 업 비 : 1,000백만원(국비) ❍ 시 행 처 : 광주국토관리사무소 구조물과

□ 그동안 추진실적(추진율 5%)

❍ 사업건의(장성군⇒광주국토관리사무소)              : 2018. 12.

❍ 현장검토(광주국토관리사무소 구조물과)             : 2019. 03.

□ 앞으로 추진계획

❍ 실시설계 용역                            : 2019. 04. ~ 06.

❍ 행정절차 이행                            : 2019. 07. ~ 12.

❍ 편입토지 보상협의                        : 2020. 03. ~ 06.

❍ 공사추진                                 : 2020. 03. ~ 12.

▣ 안전건설과장 장 관 기 / 토목담당 정 배 광 / 담당자 김 현 수