1-6

제2황룡교 재해위험지구 정비

《 사 업 개 요 》

❍ 위    치 : 장성군 황룡면 월평리, 장산리 지내

❍ 사업내용

구 분	연 장	경 간	교량폭(유효폭)	설계하중	비고
기 존	228m	19	6.65m (5.85m)	DB-13.5 (24.3톤)
신 설	252m	7	13.9m (13.0m)	DB-24.0 (43.2톤)	회전교차로 2개소 신설

❍ 사 업 비 : 120억원 (국비 44, 도비 9, 군비 67)

❍ 사업기간 : 2017. 11. ~ 2019. 12.

□ 그동안 추진실적(추진율 60%)

❍ 실시설계                               : 2016. 06. ~ 2017. 05.

❍ 관계기관 협의                          : 2018. 01. ~ 2019. 05.

❍ 보상협의                               : 2018. 07. ~ 2019. 05.

❍ 교대(2개소), 교각설치(6개소)            : 2018. 10. ~ 2019. 03.

❍ 교량받침 설치                         : 2019. 03.

□ 앞으로 추진계획

❍ 교량거더 제작 및 설치                 : 2018. 09. ~ 2019. 04.

❍ 교량슬래브 타설 및 양생                : 2019. 04. ~ 2019. 05.

❍ 접속도로 및 회전교차로 설치           : 2019. 04. ~ 2019. 11.

▣ 안전건설과장 장 관 기 / 토목담당 정 배 광 / 담당자 김 현 수