3-3

장성군 종합 노인복지관 신축

	《 사 업 개 요 》
❍ 추진기간 : 2018. 8. ~ 계속 (노인복지관 → 노인회관 신축으로 변경 추진) ❍ 소 재 지 : 장성읍 영천리 (미정) ❍ 시설규모 : 지상2층(건축면적 661㎡) - 사무실, 회장실, 프로그램실 3, 강당, 창고 등 ❍ 사 업 비 : 2,000백만원(군비)

□ 그동안 추진실적 (추진율 5%)

❍ 노인회관 신축 사업 추진으로 노인복지관 신축 보류

- 당초 노인복지관 신축에서 노인회관 신축으로 변경 검토

❍ 2019년 1회 추경 예산 상정( → 삭감)  : 2019. 4.

❍ 공유재산 심의( → 부결)              : 2019. 4.

□ 앞으로 추진계획

❍ 신축부지 매입검토                   : 2019. 4. ~ 2019. 5.

❍ 공유재산 및 지방재정 투자심사       : 2019. 6.

❍ 추경 예산 확보                      : 2019. 10.

❍ 실시설계 용역                       : 2019. 11. ~ 2019. 12

❍ 공사 착공 및 준공                   : 2020. 1. ~ 2020. 9.

▣ 주민복지과장 김 명 식  /  노인복지담당 임 동 섭 /  담당자 윤 명 옥