《 사 업 개 요 》

❍ 백양사 보수정비

구분	사업내용	사업비(백만원)	사업기간
	합 계	5,980
국비 (5건)	물외암 인법당 개축	800	2018.~ 2022.
	성보박물관 보수	1,500	2019.~ 2022.
	물탱크, 관로, 배수로 정비 등	1,500	2019.~ 2022.
	교육관 단청	880	2019.~ 2020.
	수각 보수	150	2019.~ 2019.
도비 (2건)	청류암 보수	350	2018.~ 2022.
	백양사 경내 진입도로 개설	800	2019.~ 2022.

❍ 백양사 소장 문화재 승격 및 신규 지정

- 국가문화재(보물) 승격 추진(2건) : 극락전 아미타여래좌상·아미타회상도

- 도문화재 신규 지정(2건) : 소조시왕상 일괄, 청류암 목조아미타여래좌상

4-3

백암산지구 중장기 마스터플랜 실현(백양사 정비)

□ 그동안 추진실적(주진율 10%)

❍ 백양사 보수정비

- 청류암 관음전 보수(135백만원) : 시공업체 선정 준비 중

- 물외암 인법당 개축 등 6건 : 실시설계 중

❍ 문화재 승격 및 신규지정 : 문화재청 및 전라남도에 신청서 제출완료

□ 앞으로 추진계획

❍ 백양사 보수정비

- 물외암 인법당 개축	: 설계완료(′19. 4.) → 착공(′20. 3.)
- 성보박물관 보수	: 실시설계(′19. 2. ~ 9.) → 착공(′20. 3.)
- 물탱크 정비 등 / 교육관 단청 / 수각보수 / 진입도로 개설	: 실시설계(′19. 2. ~ 5.) → 착공(′19. 6)
- 청류암 관음전 보수(135백만원)	: 착공(′19. 5.) → 준공(′19. 7.)

❍ 문화재 승격 및 신규지정 : 문화재청 및 전라남도 현지조사

▣ 문화관광과장 이 기 현 / 문화예술담당 강 대 익 / 담당자 이 미 영