7-10

마을하수도(북이 상공, 삼계 염치) 정비

	《 사 업 개 요 》
❍ 북이면 신월리 상공마을 하수도 정비사업 - 위 치 : 장성군 북이면 신월2리 상공마을 - 가구수 : 40가구, 인구 63명(남 29, 여 34) - 사업량 : 하수관로 L=2.0㎞, 하수처리장 1개소 - 사업비 : 1,500백만원 ❍ 삼계면 내계리 염치마을 하수도 정비사업 - 위 치 : 장성군 삼계면 내계리 염치마을 - 가구수 : 17가구, 인구 40명(남 20, 여 20) - 사업량 : 하수관로 L=1.5㎞, 하수처리장 1개소 - 사업비 : 1,200백만원

□ 그동안 추진실적(추진율 10%)

❍ 하수도정비 기본계획(변경) 용역비 2018년 2회 추경예산 반영

- 용역 사업비 1,800백만원 / 군비 100%

❍ 하수도정비 기본계획(변경)용역 사업수행능력평가(PQ)완료 : 2019. 1.

❍ 용역기간 : 2019. 3. 4 ~ 2020. 3. 2

❍ 용역회사 : ㈜한국종합기술  ㈜ 우영기술단 건축사사무소

□ 앞으로 추진계획

❍ 장성군 하수도정비 기본계획(변경) 용역추진    : 2019. 1. ~ 12.

❍ 장성군 하수도정비 기본계획반영 영산강유역환경청 승인 : 2020.  6.

❍ 하수도분야 국고보조사업 예산신청서 제출(환경부)   : 2020. 12.

❍ 실시설계 및 재원협의(전남도, 영산강유역환경청)     : 2021. 12.

❍ 사업추진                                                   : 2022. 12.

▣ 맑은물관리사업소장 윤 홍 장 / 하수도담당 박 금 석 / 담당자 고 재 훈