7-5

공영주차장 설치

	《 사 업 개 요 》
❍ 사업기간 : 2018 ~ 2019 ❍ 조성면수 : 415면(7개소) ❍ 사 업 비 : 11,840백만원(국비 3,990, 도비 50, 군비 7,800)

사 업 명	사업기간	면적(㎡)	주차면수	사 업 비(백만원)				비고
				계	국비	도비	군비
7개소		13,758	415	11,840	3,990	50	7,800
공영버스터미널 주변 주차장 조성사업	2018 ~ 2019	5,300	120	5,650	2,500	-	3,150	계속 사업
청운동 지역 주차장 조성사업	2018 ~ 2019	2,211	100	3,150	1,490	-	1,660	계속사업
전남제재소 인근 주차장 조성사업	2018	1,432	35	1,250	-	-	1,250	이월사업
부강1차 인근 주차장 조성사업	2017 ~ 2018	1,021	25	350	-	-	350	이월사업
부강2차 인근 주차장 조성사업	2018	1,134	45	640	-	-	640	이월사업
매화연립 앞 주차장 조성사업	2018	1,098	40	750	-	-	750	이월사업
노란꽃잔치 주차장 조성사업	2018	1,562	50	50	-	50	-	이월사업

□ 그동안 추진실적(추진율 50%)

□ 앞으로 추진계획

❍ 공영버스터미널 주변(120면 / 5,650백만원)

- 대상지 확정 및 감정평가 완료                     : 2018.  3.

- 보상금 지급(2,589백만원)                          : 2019.  1.

- 실시설계용역 실시/유)대정                         : 2019.  2.

❍ 청운동 지역(100면 / 3,150백만원)

- 부지매입 보상가 협의 중/ ㈜남영건설               : 2019.  3.

❍ 전남제재소 인근(35면 / 1,250백만원)

- 보상금 지급(1,053백만원)                           : 2018.  8.

- 실시설계 완료(유 삼덕) 및 공사〔(주)대승)〕착공     : 2018. 11.

- 사업계획 변경으로 공사 중지                       : 2019.  3.

❍ 부강1차아파트 인근(25면 / 350백만원)

- 대살지 확정 및 감정평가 완료                      : 2019.  2.

- 보상금 지급(217백만원)                             : 2019.  3.

- 실시설계 완료/ 주)삼광                             : 2019.  3.

❍ 부강2차아파트 인근(45면 / 640백만원)

- 대상지 확정 및 감정평가 완료                      : 2019.  2.

- 보상금 지급(453백만원)                             : 2019.  3.

❍ 매화연립 앞(40면 / 750백만원)

- 대상지 확정 및 감정평가 완료                      : 2018.  3.

- 보상금 지급(660백만원)                             : 2019.  1.

- 실시설계용역 실시/ 주)삼광                         : 2019.  2.

❍ 노란꽃잔치(50면 / 50백만원)

- 실시설계용역 실시                                 : 2019.  2.

- 사업 착공/ 주)리콘                                 : 2019.  3.

▣ 교통정책과장 강 일 권 / 교통복지담당 김 성 진 / 담당자 이 전 수