109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 장성군에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
나노산단 폐수종말처리 시설설치	16,371	12,364	1,913	2,094	2019	2012	80
장산처리구역 하수도 정비	5,700	5,258	442			2014	100
북하지구 지방상수도 조성	7,240	4,357	1,143	1,740	2019	2014	80
이암지구 소규모 마을하수도 정비	3,110	3110				2014	100
장성정수장 시설 개보수	2,000	0	0	2,000	2018	2016	40%
황룡강 생태하천 복원사업	20,000	11,612	8,388		2018	2013	100%
개천 생태하천 복원사업	20,000	12,343	7,657		2018	2013	100%
거마소하천 정비	4,095	4,095			2016	2014	100%
덕산지구 지표수보강개발사업	8,230	1,634	1,026	5,570	2019	2014	40%
아곡 소하천 정비	3,594	3,594			2017	2014	100%
제2황룡교 재가설	12,000		10,200	1,800	2019	2015	25%
청운고가 보수보강	3,000		3,000		2017	2015	100%
장성호 수변 트레킹길 조성	1,900	1,900			2017	2015	100%
개천인도교 설치	2,600		2,600		2017	2016	100%
평림천 생태하천 복원사업	20,000			20,000	2021	2017	10%
장성호 수변 출렁다리 설치	3,000	3,000			2018	2017	100%
황미르랜드 테마공원 조성	3,800	-	-	3,800	2020	2017	5
수양호 수변생태공원 조성	3,600	-	-	3,600	2020	2017	5
전라남도 체육대회 참가	120	-	120	120		2017	100
친환경고품질 장성잔디 명품화	3,000	2,346	513	-	2017	2013	100
잔디재배지 객토지원	5,000	3,018	1,980	-	2017	2015	100
장성테니스장 지붕설치사업	2,800	-	1,420	1,380	2018	2016	100
에너지이용효율화 (지열냉난방시설)	3,400	0	3,400	0	2017	2015	100
향토산업육성 (마을반찬기업 공동마케팅)	3,000	2,550	450	0	2018	2016	95
향토산업육성 (천연조미료 융복합산업화)	3,000	805	1,100	1,095	2019	2016	40
IQF&BQF활용 부가가치 창출기반조성	2,000		0	2,000	2018	2016	0
남창계곡 자연관찰로 조성	3,800	-	-	3,800	2020	2016	5
장성호 생태탐방로 조성	3,000	-	667	2,333	2019	2016	40
군민의 날 체육대회 개최	200	200	-	-	2016	2016	100
황룡시장 주차환경 개선	3,000	3,000			2018	2015	91
장성읍 청운동 공용주차장설치	3,500			3,500	2020	2017	10
장성공영버스 터미널 주변 공영주차장 조성	5,000			5,000	2019	2017	50

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

나노산단 폐수처리시설 설치사업

담당자

맑은물관리사업소

장은철(☎390-8547)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나노일반산업단지 내 기업들의 생산 활동으로 발생되는 오□폐수를 안정

적으로 처리하여 입주업체의 쾌적한 근무여건 조성 및 수질환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015.3.31.~2017.7.7.(1단계), 2017.6.22.~2019.4.30.(2단계)

○ 위 치 : 장성군 남면 삼태리 880-2(나노산업단지 내)

○ 규 모 : 3,000㎥/일(1□2단계 각 1,500㎥/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,371백만원(1단계 12,364백만원, 2단계 4,007백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	16,371	12,364	1.913	898	1,196
국 비	11,249	8,655	500	898	1,196
시 도 비
시군구비	5,122	3,709	1,413	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80 %)

○ 1단계(1,500㎥/일) 사업 준공 : 2017. 7.

○ 2단계(1,500㎥/일) 사업 착수 : 2017. 6.

□ 향후계획

○ 2단계 사업 추진 및 종합시운전 : 2017. 6. ~ 2019. 4.

사업명

장산처리구역 하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소

고재훈(☎390-8551)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장산지구 하수 관거를 정비하여 오·우수를 효율적으로 처리함과 방류 하천의       수질보호와 주민보건 위생향상 및 쾌적한 환경조성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 03. 30. ~ 2017. 03. 26.

○ 위 치 : 장성군 서삼면 장산·대덕·모암리 일원

○ 규 모 : 하수관거 연장 15.1km, 배수설비 293개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,700	5,258	442
국 비	3,990	3,681	309
시 도 비
시군구비	1,710	1,577	133
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 하수관거 연장 15.1km 및 배수설비 293개소 설치완료

○ 사업준공 : 2017. 03. 26.

□ 향후계획

○ 우·오수 사후관리

사업명

북하지구 지방상수도 조성

담당자

맑은물관리사업소

최민수(☎390-8546)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 북부권(북이면, 북하면) 주민들의 식수난 해소

○ 안정적인 생활용수 확보로 농촌 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 3. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 북이, 북하면 일원

○ 규 모 : 상수관로 L=45.0km(D200mm～D16mm)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,240백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,240	4,357	1,143	1,740	-
국 비	5,070	3,050	800	1,220	-
시 도 비	714	409	103	202	-
시군구비	1,456	898	240	318	-
지 방 채					-
민간자본					-
기 타					-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 장성군 수도정비 기본계획 수립 및 변경(2004, 2011)

○ 북하지구 농어촌 지방상수도시설 조성 실시설계용역(2014. 6. ～ 9.)

○ 소규모 환경평가(2014. 10.～ 11.)

○ 사업발주 및 착공(2015. 3.)

○ 사업추진(2015. 3 ~ 2019. 6)

□ 향후계획

○ 통수시험 : 2019. 3. ~ 5.

○ 사업준공 : 2019. 6.

사업명

이암지구 소규모 마을하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소

김범한(☎390-8552)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이암지구 소규모마을하수도 신규시설 확충을 통하여 하수를 효과적으로       처리하여 부근토양 및 수질오염을 예방하고 주민의 안전한 주거 생활과       환경개선으로 보건 위생 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 4. ~ 2017. 6.

○ 위 치 : 장성군 삼계면 덕산리, 수산리 일원(이암, 만화, 반월, 자초마을)

○ 규 모 : 오수관로 4.58km, 압송관로 957m, 배수설비 90, 처리장 1, 중계펌프장 2 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,110	3,110
국 비	2,177	2,177
시 도 비
시군구비	933	933
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 하수관거 연장 5.5km 및 배수설비 90개소 설치완료

○ 2017. 6. 사업 준공

□ 향후계획

○  우·오수 사후관리

사업명

장성정수장 시설 개보수사업

담당자

맑은물관리사업소

이우주(☎390-8565)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1971년 조성 후 47년이 경과한 장성정수장의 시설 개보수를 통해

군민에게 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 장성군 장성읍 오동촌로 20 장성정수장내

○ 규 모 : 장성정수장 시설개보수사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원(군비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000			2,000
국 비
시 도 비
시군구비	2,000			2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 장성정수장 시설개보수사업 타당성조사용역 완료  : 2017. 6.

○ 장성정수장 시설개보수사업 실시설계 완료        : 2018. 4.

○ 계약심사 완료                                  : 2018. 4.

○ 도급업체 선정 및 착공                          : 2018. 6.

□ 향후계획

○ 사업준공                                       : 2018. 12.

사업명

황룡강 생태하천 복원사업

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 식생복원, 동식물 서식처 제공으로 하천 수생태계 건강성 회복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2018(7년)

○ 위 치 : 장성읍 상오리(장성댐) ~ 황룡면 월평리(장진보)

○ 규 모 : L=9.5km

- 어도 11개소, 자연형여울 3개소, 가동보 2개소, 하도정비 L=4.46km,

징검다리, 생태조경 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,000	11,612	8,388
국 비	12,000	6,967	5,033
시 도 비
시군구비	8,000	4,645	3,355
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○황룡강 생태하천 복원사업 준공 : 2018. 1. 31.

□ 향후계획

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

개천 생태하천 복원사업

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 훼손된 하천환경을 효율적으로 복원하여 누구나 찾고, 체험하고 싶어

하는 하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2018(6년)

○ 위 치 : 북이면 원덕교 ~ 황룡강 합류점

○ 규 모 : 17.4km(하천연장 19km)

- 자연형여울 27개소, 가동보1개소, 하도정비 L=4.0km

- 서능복합생물서식처 조성, 하도내 식생복원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,000	12,343	7,657
국 비	12,000	7,405	4,595
시 도 비
시군구비	8,000	4,938	3,062
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 개천 생태하천 복원사업 준공 : 2018. 5. 27.

□ 향후계획

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

거마소하천 정비

담당자

재난안전실 신동혁(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우로 인한 농경지 및 주택침수를 예방함으로써 쾌적한 농촌 환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016(3년)

○ 위 치 : 북이면 신평리 일원(거마천)

○ 규 모 : 2.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,095백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,095	4,095
국 비	2,047	2,047
시 도 비
시군구비	2,048	2,048
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 거마소하천 준공 : 2016. 6. 30.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

덕산지구 지표수보강개발사업

담당자

재난안전실 정태영(☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 농업용수 확보로 농업생산성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 3. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 장성군 동화면 구룡리, 월산리 일원

○ 규 모 : 덕산제 보강, 삼룡제 확장(수혜면적 49.0ha)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,230	1,634	1,026	2,757	2,813
국 비	5,761	1,144	718	1,930	1,969
시 도 비
시군구비	2,469	490	308	827	844
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 덕산제 보강공사 완료

○ 삼룡제 확장공사 추진 중

□ 향후계획

○ 삼룡제 확장공사 추진

○ 용수관로 설치공사 추진

○ 사업준공 : 2019. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

아곡 소하천 정비

담당자

재난안전실 신동혁(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재해위험이 높은 미정비 소하천의 체계적인 정비를 통하여 재해를

사전에 예방하고, 군민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2017.

○ 위 치 : 황룡면 아곡리

○ 규 모 : L=2.1km(호안, 축제공, 제방포장 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,594백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,594	3,594
국 비	1,797	1,797
시 도 비
시군구비	1,797	1,797
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○아곡소하천 정비사업 준공 : 2017. 5. 19.

○

□ 향후계획

○

○

□ 사업변경 내역(해당시)

○

사업명

제2황룡교 재가설

담당자

재난안전실 김현수(☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후교량 재가설로 통행차량의 안전성 확보에 따른 재해 사전예방,

재가설에 따른 인도설치로 보행자의 안전확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1 ~ 2019. 12

○ 위 치 : 장성군 황룡면 월평리, 장산리 지내

○ 규 모 : 교량재가설 L=252m(B=13.5m), 접속도로 L=920m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	12,000		10,200	1,800
국 비	7,900		7,000	900
시 도 비	900		900
시군구비	3,200		2,300	900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 실시설계용역 완료 : 2017. 4.

○ 공 사 착 공       : 2017. 11.

- 교량하부공(교대, 교각) 추진중

□ 향후계획

○ 보상협의 추진     : 2018. 3. ~ 2018. 10.

○ 사 업 준 공       : 2019. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

청운고가 보수보강

담당자

재난안전실 김현수(☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 행차량의 안정성을 확보하여 재해 사전예방 및

노후교량 보수 ․ 보강으로 내화력 증진에 따른 교량 수명연장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 12 ~ 2017. 6..

○ 위 치 : 장성읍 영천리, 기산리 지내

○ 규 모 : 보수보강 1식

- 손상슬래브 보강 A=762㎡, 교좌장치 교체 170EA

- 교면포장 A=3,350㎡ , 표면 및 단면보수 A=1,763㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000		3,000
국 비	500		500
시 도 비
시군구비	2,500		2,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계용역 완료 : 2016. 1. ~ 4.

○ 공 사 추 진       : 2016. 5. ~ 2017. 6

- 교량하부공(교대, 교각) 추진중

□ 향후계획

○ 교량 유지관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

장성호 수변 트레킹길 조성

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수변 트레킹길 조성으로 관광자원 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 12.

○ 위 치 : 장성호 지내

○ 규 모 : 출렁다리, 트레킹길 조성 L=2.3km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계		1,900
국 비
시 도 비
시군구비		1,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 수변 트레킹길 조성사업(L=2.3km) 준공 : 2017. 6.

□ 향후계획

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

개천인도교 설치

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황룡강과 지천의 합류부에 재난발생시 인근 주민들이 대피할 수 있는

이동통로를 설치하여 주민편익을 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 10. 10. ~ 2017. 10. 4.

○ 위 치 : 장성읍 장안리

○ 규 모 : B=3.0m L=99m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,600		2,600
국 비
시 도 비
시군구비	2,600		2,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 개천인도교 설치사업 준공 : 2017. 10. 5.

□ 향후계획

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

평림천 생태하천 복원사업

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평림천 수질오염원을 제거하여 수생태계의 건강성 회복으로 친수 공간 조성 및

군민과 관광객들에게 쾌적한 생태하천 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 삼계면 수옥리 ~ 삼서면 홍정리

○ 규 모 : 호안정비 3.0km, 생태습지 조성 10개소, 교량재가설 5개소

어도 및 여울 18개소, 생태조경공 1식, 부대공 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	20,000			700	19,300
국 비	10,000			350	9,650
시 도 비
시군구비	10,000			350	9,6,50
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10 %)

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2018. 1. ~ 12.

□ 향후계획

○ 실시설계 검토 협의(영산강유역청)            : 2018. 9.

○ 설계 경제성(VE) 검토 추진                  : 2018. 10.

○ 건설기술심의 추진                          : 2018. 11.

○ 생태하천 복원사업 설계심의 위원회 개최     : 2018. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

장성호 수변출렁다리 설치

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기 조성된 트레킹길과 어울리는 아름답고 스릴 넘치는  출렁다리 설치로 장성호를

찾는 탐방객들에게 볼거리 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2018.

○ 위 치 : 장성읍 봉덕리 일원

○ 규 모 : 출렁다리 1식(L=154m, B=1.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000	3,000
국 비
시 도 비
시군구비	3,000	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계 용역              : 2016. 3. ~ 10.

○ 경관심의                   : 2016. 12.

○ 계약심사                   : 2017. 1.

○ 산주 동의 및 관련기관 협의 : 2017. 1. ~ 3.

○ 사업발주                   : 2017. 4.

□ 향후계획

○ 공사준공 : 2018. 6.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

황미르랜드 테마공원 조성

담당자

문화관광과 진철호(☎390-7252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연과 함께하는 다양한 학습 및 체험을 통한 근린생활권 이용자, 외부

지역 및 다양한 계층의 이용자를 유입시킬 수 있는 특색 있는 공간 마련으로

지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 영천, 장안리 일원

○ 규 모 : A=33,675㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800	-	-	500	3,300
국 비	2,280	-	-	300	1,980
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,520	-	-	200	1,320
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본계획 수립                           : 2018. 2.

○ 실시설계 용역(사전재해, 소규모환경) 시행 : 2018. 3.

□ 향후계획

○ 실시설계 용역(사전재해, 소규모환경) 완료 : 2018. 9.

○ 2018년 시행분 공사 착공 및 준공         : 2018. 9. ~ 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

수양호 수변생태공원 조성

담당자

문화관광과 채양기(☎390-7251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 자원인 수양호를 활용하여 수변생태공원을 조성 상무대를 찾는         면회객(방문객) 및 지역주민들에게 편의공간을 제공하여 생태녹색관광을         통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 삼계면 주산리 일원

○ 규 모 : A=40,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,600	-	-	500	3,100
국 비	2,160	-	-	.300	1,860
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,440	-	-	200	1,240
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2018년 시행분 실시설계(사전재해) 완료  : 2018. 5.

○ 계약심사 완료                         : 2018. 6.

○ 공사 착공                             : 2018. 6.

□ 향후계획

○ 2019년 시행분 실시설계 용역 시행     : 2018. 11.

○ 2018년 시행분 공사 분공              : 2018. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

전라남도체육대회 참가

담당자

문화관광과 이전수(☎390-7228)

□ 사업목적 및 필요성

○ 엘리트 체육인 육성과 도민화합 및 Yellow City 장성 대외홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 4. 20 ~ 4. 23/(4일간)

○ 위 치 : 영암군(공설운동장 외 보조경기장)

○ 규 모 : 22개 종목, 310명(선수 210명, 임원 및 행정지원 등 100)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	120	-	120	120	120
국 비
시 도 비
시군구비	120	-	120	120	120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제56회 전라남도체육대회 참가 : 2017. 4.

- 종합 14위(금 1, 은 1, 동 2)

□ 향후계획

○ 제57회 전라남도체육대회 상위입상 목표로 우수선수 발굴

○ 상무대 5개 학교등과 선수 파견 등 간담회 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음.

사업명

친환경고품질 장성잔디명품화

담당자

산림편백과 윤영태 (☎390-7394)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 고품질 잔디 생산기반 조기정착 및 경쟁력 확보

○ 고부가가치 잔디 상품개발을 통한 잔디 가공시장 선점 및 신시장 개척

○ 잔디산업육성 협력시스템 구축을 통한 친환경 고품질 잔디 인프라 확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 장성군 삼서면 석마리 948, 수양리 산136-1 일대

○ 규 모 : 향토산업 경상사업(추진단운영, 역량강화, 홍보마케팅, 연구개발비 등) 4회, 잔디유통및가공시설 3,527㎡, 잔디테마공원 19,600㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3.000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,859	2,346	513	-	-
국 비	1,384	1,173	211	0	-
시 도 비	177	141	36	0	-
시군구비	698	563	135	0	-
지 방 채	0	0	0	0	-
민간자본	600	469	131	0	-
기 타	0	0	0	0	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016년 사업추진단 운영, 역량강화사업, 홍보마케팅 사업 추진

○ 잔디유통 및 가공시설 완료, 잔디테마공원 완료

□ 향후계획

○ 역량강화 및 홍보마케팅 계속 추진

○ 잔디테마공원 운영

개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

- 사업별로 별지 작성

사업명

잔디재배지 객토지원사업

담당자

산림편백과 김성수 (☎390-7070)

□ 사업목적 및 필요성

○ 그동안 판매된 잔디에 흙이 포함되어 반출됨에 따라, 토양환경 악화로

잔디 품질 저하의 원인이 됨

○ 객토를 실시하여 건강한 토양자원을 보충 고품질 잔디 생산기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017

○ 위 치 : 장성군(장성읍, 남, 동화, 삼서, 삼계, 황룡면) 잔디재배지 일원

○ 규 모 : 150.8ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5.000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,998	3,018	1,980	-	-
국 비	2,499	1,509	990	0	-
시 도 비	400	241	159	0	-
시군구비	1,599	966	633	0	-
지 방 채	0	0	0	0	-
민간자본	500	302	198	0	-
기 타	0	0	0	0	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 객토사업 추진완료

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

장성테니스장 지붕설치사업

담당자

문화시설사업소 강대진(☎390-8483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 옥외테니스 경기장은 기상악화(우천,눈,폭염등)시 이용이 불가 하였       으나 돔 경기장을 조성하여 사계절 전천후 경기가 가능 군민의 스포츠        활동에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 8. 14. ~ 2018. 6. 29.

○ 위 치 : 장성군 장성읍 문화로110(장성문화시설사업소내)

○ 규 모 : 건축면적3,517.98㎡, 관람석165석, 코트5면

- 연면적 : 3,230.2㎡

- 사무실 :142.2㎡(3.6×39.5)

- 테니스장 지붕(막구조) : 3,088㎡(77.2×40)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,800	-	1,420	1,380
국 비	750	-	455	295
시 도 비	-	-	-	-
시군구비	2,050	-	965	1,085
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○계약심사(전라남도)                                 : 2017.  5. 11

○공사착공(토목, 사무실 건축, 전기, 통신 등)          : 2017.  8. 14

- 토목공사(옹벽 및 배수로등)완료                   : 2017. 11. 30

- 건축공사(사무실및샤워실)완료                     : 2018.  4. 30

- 전기,소방,통신완료                               : 2018.  6. 21

○철골 막구조 공사완료                              : 2018.  6. 01

○바닥 크레이코트 완료                              : 2018.  6. 27

○테니스장 전체공사 완료                            : 2018.  6. 29

□ 향후계획

○ 무료시범운영                                      : 2018. 7. 31.

○ 무인발매기에서 이용료 납부 후 사용                : 2018. 8. 01. ~

사업명

농업에너지이용효율화(지열냉난방시설)

담당자

농업축산과 서범곤(☎390-8464)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생에너지 이용기술의 농업시설 적용 및 확대보급 기반 구축, 국제 유가‧농자재 가격 상승으로 인한 농가의 경영비 부담 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 04. ~ 2017. 06.

○ 위 치 : 전남 장성군 황룡면 옥정리 638-1 등 8필지

○ 규 모 : 16,638.2㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,400	-	3,400	-	-
국 비	2,040	-	2,040	-	-
시 도 비	68	-	68	-	-
시군구비	612	-	612	-	-
지 방 채	340	-	340	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	340	-	340	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 한국농어촌공사 위(수)탁계약체결 : 16. 4월

○ 설계도서 검토 및 보완 : 16. 6. ~ 9월

○ 기계공사 계약 및 사업 착수, 기성검사(2회) 완료 : 16. 10.~12월

○ 지열히트펌프 구입 : 17. 4월

○ 사업완료보고 : 17. 7월

□ 향후계획

○ 보조금으로 취득한 주요재산 사후관리 : 10년

○ 고품질 토마토 생산 및 농산물 수출 확대

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

향토산업육성(마을반찬기업공동마케팅)

담당자

농업축산과 김병준(☎390-8512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 향토자원인 마을단위 반찬산업을 통합하여 체계를 구축함으로써

지역경제 활성화 및 농가 안정적 소득원 제공에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2017

○ 위 치 : 장성군 남면 마령리 538-17

○ 규 모 : 지상2층, 484.62㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000	2,550	450		0
국 비	1,500	1,275	225
시 도 비	180	153	27
시군구비	720	612	108
지 방 채
민간자본
기 타	600	510	90

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 마을반찬공동마케팅사업 경상보조금 잔여사업비(홍보비 등) 집행

□ 향후계획

○ 라디오 ․ SNS홍보, 안테나샵 운영, 참여업체 역량강화 활동(워크숍, 교육 등)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 없음

사업명

향토산업육성(천연조미료융복합산업화)

담당자

농업축산과 김병준(☎390-8512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 농특산물을 이용한 천연조미료 제품개발, 품질향상 연구, 부문별

연계 시너지 확대를 통한 농가소득 확대 및 고부가가치 산업화 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 장성군 삼서면 우치리 464

○ 규 모 : 지상1층(저온창고, 홍보관), 249㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000	805	1100	775	320
국 비	1,500	430	540	375	155
시 도 비	180	45	64	45	26
시군구비	720	180	280	205	55
지 방 채
민간자본
기 타	600	150	216	150	84

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 저온창고 준공 및 홍보관 설계

○ 시제품개발, BI․CI개발(지니多), 카카오페이지 운영

□ 향후계획

○ 홍보관 준공, 연구실 장비 구입, 가공유통센터 및 저온창고 설치

○ 부산물 활용한 제품개발, 통합패키지 제작, 홈페이지 구축 등

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 없음

사업명

IQF&BQF활용 부가가치 창출기반조성

담당자

농업축산과 김병준(☎390-8512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농특산물 급속냉동을 통한 부가가치 향상 및 농산물 출하 수급시기 조절

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.~ 2018

○ 위 치 : 장성군 북이면 백암리 938-4,5

○ 규 모 : 전처리시설, 가공시설, 포장시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000			2,000
국 비	1,000			1,000
시 도 비
시군구비	200			200
지 방 채
민간자본	800			800
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 군비보조금 추가지원 계획변경으로 인하여 사업추진지연

□ 향후계획

○ 사업계획승인 및 보조금교부결정(군→사업자)

○ 전라남도 계약심사, 입찰 및 계약, 설비 구축

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 없음

사업명

남창계곡 자연관찰로 조성

담당자

문화관광과 진철호(☎390-7252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남창계곡내 사람과 자연이 함께하는 체험공간 조성을 통한 주민소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 전남 장장성군 북하면 신성리 일원

○ 규 모 : 자연관찰로 조성 Ｌ=3.0㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800	-	-	600	3,200
국 비	1,900	-	-	300	1,600
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,900	-	-	300	1,600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 용역(사전재해) 시행             : 2018. 5.

○ 자체 계약심사 완료                      : 2018. 6.

○ 2018년분 공사착공                       : 2018. 6.

□ 향후계획

○ 2019년분 실시설계 용역 시행             : 2018. 11.

○ 2018년 시행분 준공                      : 2018. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

장성호 생태탐방로 조성

담당자

문화관광과 진철호(☎390-7252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성호를 찾는 방문객들에게 볼거리와 편의제공을 통한 지역경제활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 북이면 수성리~북하면 쌍웅리 일원

○ 규 모 : 생태탐방로 조성 Ｌ=3.0㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000	-	667	1,500	833
국 비	1,800	-	400	900	500
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,200	-	267	600	333
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 탐방로 조성 중(Ｌ=1.5㎞)

○ 부대시설(화장실 등)

□ 향후계획

○ 탐방로 조성(Ｌ=1.5㎞)

○ 유지관리 철저

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

군민의 날 체육대회 개최

담당자

문화관광과 이전수(☎390-7228)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민의 날 체육대회 개최로 문화행사와 더불어 군민화합에 기여.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. 29.(1일간)

○ 위 치 : 장성공설운동장 외 보조경기장

○ 규 모 : 10개 종목, 11개 읍·면 5,000여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	200	-	200	-	200
국 비
시 도 비
시군구비	200	-	200	-	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제24회 군민 체육대회 개최 : 2017. 9. 29.

- 종합 순위(1위 장성읍, 2위 황룡면, 3위 동화면)

- 최우수선수상 : 장성읍 박종우(축구)

□ 향후계획

○ 제25회 군민 체육대회 종목선정 및 일정 협의(군체육회, 읍면체육회)

○ 군민 체육대회 추진 종목별 대표자회의 개최(3회)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

황룡시장 주차환경개선

담당자

경제교통과 박하영(☎390-7353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서민경제의 한 축인 전통시장의 어려움 극복과 활로 모색을 위한 시장 시설 개선 및 활성화 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 12. ~ 2018. 9.

○ 위 치 : 전남 장성군 황룡면 월평리 153-4(황룡시장 일원)

○ 규 모 : 주차장 96면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000	1,709	1,291
국 비	1,800	1,025	775
시 도 비
시군구비	1,200	684	516
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 상인 및 이해관계자 설명 및 사업 준비        : 2015. 9. ~

○ 공유재산 관리계획 심의(군의회) 및 투자심사	: 2015. 12.

○ 부지 매입 및 보상 완료(12가구/1,612백만원)   : 2016. 12.

○ 황룡시장 주차환경개선사업 실시설계 용역     : 2017. 1. ~ 6.

○ 황룡시장 주차환경개선사업 추진              : 2017. 8. ~

□ 향후계획

○ 황룡시장 주차환경개선사업 완료              : 2018. 9.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장성읍 청운동 공영주차장 설치

담당자

경제교통과 전준봉(☎390-7369)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공실버주택 건립에 보건소 주차장이 편입되면서 보건소 이용 및 인근 아파트 등에 거주하는 주민들이 불편함을 호소함

○ 공공실버주택 완공전에 주차장 조성 필요성 제기

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 청운동(공공실버주택 신축부지 및 보건소 주변)

○ 규 모 : 주차장 25~30면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3500			650	2,850
국 비	1,750			240	1,510
시 도 비
시군구비	1,750			410	1,340
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 읍 영천리(산림조합 옆 고물상부지) 매입추진 : 매도의사 없음

○ 사업대상지 변경            : 2018.  4.

○ 토지소유자 매도확약서 징구 : 2018.  4.

○ 감정평가 실시              : 2018.  5.

○ 편입토지 보상협의 중       : 2018.  6. ~

□ 향후계획

○ 실시설계                  : 2018.  9.

○ 사업추진                  : 2018. 10. ~ 11.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장성공영버스터미널 주변

공영주차장 조성

담당자

경제교통과 전준봉(☎390-7369)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성공영버스터미널 주변은 불법주차로 인한 상시 교통 혼잡 구간으로 인근 상가 및 주민 불편 호소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 8.

○ 위 치 : 구 삼양주차장

○ 규 모 : 주차장 100면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000			2,650	2,350
국 비	2,500			1,000	1,500
시 도 비
시군구비	2,500			1,650	850
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 감정평가 및 토지보상   : 2018. 3.

- 토지보상 협의 완료    : 5필지,  4,500㎡, 3,616백만원

○ 실시설계용역           : 2018. 4.

□ 향후계획

○ 잔여부지 매입             : 2019. 1. ~ 2.

○ 사업추진                  : 2019. 3. ~ 8.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음