109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 장성군에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
덕산지구 지표수 보강개발사업	8,230	5,761	2,660	2,757	2,813	2020	2014	99
제2황룡교 재해위험지구정비	12,000	12,000	-	-	-	2019	2015	100
IQF&BQF활용 부가가치창출기반조성	2,000		1,624	376		2019	2016	80
향토산업육성 (천연조미료융복합산업화)	3,020	1,595	967	458		2020	2016	86
장성공설운동장 건립	22,900	10,240	3,334	9,326	-	2020	2016	72
남창계곡 자연관찰로 조성	3,800	600	400	-	-	2020	2016	100
수양호 수변생태공원 조성	3,600	500	1,334	1,766	-	2020	2017	50
장성읍 청운동 공용주차장설치	3,150	3	1572	1,575	0	2020	2017	55
장성공영버스 터미널주변공영주차장조성	6,350	2,603	1,289	2,457	0	2020	2017	60
평림천 생태하천 복원사업	20,000	-	700	4,000	15,300	2022	2017	50
상무평화공원 수경시설 등 조성	3,600	-	300	1,668	1,632	2021	2018	10
홍길동 꽃길축제	280		280			2019	2019	100
황룡강 가동보 설치	2,800	-	1,733	1,067	-	2019	2019	60
파크골프장 조성	1,000		-	1,000		2020	2019	5
북이 모현~상공간 도로확포장공사	2,300	-	1,300	1,000		2020	2019	70
장성군 의회청사 건립	9,400	-	-	2,200	7,200	2020	2019	-
북이면 행정복지센터 건립	3,200	-	355	445	2,400	2021	2019	10
장산지구 지표수 보강개발사업	9,000	350	350	1,000	7,650	2024	2019	10

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

덕산지구 지표수 보강개발사업

담당자

안전건설과 전준봉(☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 농업용수 확보로 농업생산성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 3. ~ 2020. 8.

○ 위 치 : 장성군 동화면 구룡리, 월산리 일원

○ 규 모 : 덕산제 보강, 삼룡제 확장(수혜면적 49.0㏊)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,230	2,660	2,757	2,813
국 비	5,761	1,862	1,930	1,969
시 도 비
시군구비	2,469	790	827	844
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 덕산제 보강공사 완료

○ 삼룡제 확장공사 완료

○ 송수관로 매설 완료

○ 기타 부대공사 추진 중

□ 향후계획

○ 기타 부대공사 완료

○ 사업준공 : 2020. 8.

사업명

제2황룡교 재해위험지구 정비사업

담당자

안전건설과 김건우(☎390-7448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후교량 재가설로 통행차량의 안전성확보 및 재해 사전예방

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2019(2년)

○ 위 치 : 장성군 황룡면 월평리, 장산리 지내

○ 규 모 : 교량재가설 L=252m(B=13.9m), 도로확포장 L=920m(B=11.5~12.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 120,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	12,000	12,000	0
국 비	4400	4400
시 도 비	900	900
시군구비	6700	6700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 교량 하부공(교대, 교각) 설치            : 2018. 10. ~ 2019. 3.

○ 교량상부공(거더, 슬래브) 설치           : 2019.  4. ~ 2019. 6.

○ 접속도로, 회전교차로 및 부대시설 설치  : 2019.  7. ~ 2020. 5.

○ 공사준공                               : 2020.  5.

사업명

IQF&BQF활용 부가가치 창출기반조성

담당자

농식품유통과 김병준(☎390-8456)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농특산물 급속냉동을 통한 부가가치 향상 및 농산물 출하 수급시기 조절

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.~ 2019.

○ 위 치 : 장성군 북이면 백암리 938-4,5

○ 규 모 : 급속냉동 기계장비 구입 및 설비 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000		1,624	376
국 비	1,000		771	229
시 도 비
시군구비	600		463	137
지 방 채
민간자본	400		390	10
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 81%)

○ 보조금교부결정

○ 전라남도 계약심사, 입찰 및 계약 완료

○ 수입기계장비 발주 완료

○ 기성금 지급

□ 향후계획

○ 기계장비 구입 및 설치 준공 및 사업비 정산

□ 사업변경 내역

○ 사업비의 재원비율 변경

구분	당초	변경	비고
계	2,000	2,000
국 비	1,000	1,000
군 비	200	600
민간자본	800	400

사업명

향토산업육성(천연조미료융복합산업화)

담당자

농식품유통과김병준(☎390-8456)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 농특산물을 이용한 천연조미료 제품개발, 품질향상 연구, 부문별

연계 시너지 확대를 통한 농가소득 확대 및 고부가가치 산업화 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2019.

○ 위 치 : 장성군 삼서면 우치리 일원

○ 규 모 : 경상보조 – 사업단구성운영, 역량강화 및 지역연계 협력기반 조성, 제품개발, 브랜드 이미지 창출 및 마케팅 강화

자본보조 – 장성 천연조미료 가공유통 시설지원, 장성 천연조미료 전문판매장 건립지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,020백만원 (인센티브 사업비 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,020	1,595	967	458
국 비	1,520	701	432	341
시 도 비	180	118	63	0
시군구비	720	492	273	0
지 방 채
민간자본	600	285	198	117
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 86%)

○ 가공공장, 저장시설 기계설비 구입, 저장시설 신축공사 등

○ 아열대채소를 활용한 상품개발 및 메뉴 개발, 온·오프라인 판매, 특허출원 등

□ 향후계획

○ 저장시설 준공, 가공공장 기 계설비 구입 등

○ 온라인 홍보, 판매망 구축 및쿠킹클래스 기자재 구입, 패키지 제작 등

사업명

장성공설운동장 건립

담당자

미래성장개발과 김형수(☎390-7403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육시설 확충을 통한 군민 건강증진 및 삶의 질 향상과 각종 대회 유치를

통한 지역경제 발전 및 군민화합에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년(6년간)

○ 위 치 : 장성군 장성읍 기산리 일원

○ 규 모 : 74,911㎡(경기장 20,640㎡ 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	22,900	10,240	3,334	9,326	-
국 비	6,000	2,200	1,000	2,800	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	16,900	8,040	2,334	6,526	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 72%)

○ 타당성 조사 및 기본계획 수립         : 2015. ~ 2016.

○ 군 관리계획(변경) 및 하천실시계획    : 2016.

○ 기본 및 실시설계                    : 2016. ~ 2018.

○ 사업 착공                           : 2018. 4.

□ 향후계획

○ 견실시공으로 공설운동장 준공        : 2020. 11.

□ 사업변경 내역

○ 21,700백만원 ⇒ 22,900백만원(감정평가결과 토지매입비 상승)

사업명

남창계곡 자연관찰로 조성

담당자

미래성장개발과 김형수(☎390-7403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남창계곡내 사람과 자연이 함께하는 체험공간 조성을 통한 주민소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년(3년간)

○ 위 치 : 장성군 북하면 신성리 일원

○ 규 모 : 자연관찰로 조성 L=3.0㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,000	600	400	-	-
국 비	500	300	200	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	500	300	200	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사 준공   : 2020. 6.

사업명

수양호 수변생태공원 조성

담당자

미래성장개발과 김용성(☎390-7404)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 자원인 수양호를 활용하여 수변생태공원을 조성 상무대를 찾는          면회객(방문객) 및 지역주민들에게 편의공간을 제공하여 생태녹색관광을         통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년(3년간)

○ 위 치 : 전남 장성군 삼계면 주산리 일원

○ 규 모 : 수변생태탐방로 Ａ=7,438㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,600	500	1,334	1,766	-
국 비	1,100	300	800	-	-
시 도 비	883	-	-	883	-
시군구비	1,617	200	534	883	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2018~2019년 시행분 공사 완료  : 2020. 6.

- 주차장, 소공원, 데크산책로 612m

□ 향후계획

○ 공사 준공                      : 2020. 12.

사업명

장성읍 청운동 공용주차장설치

담당자

경제교통과 전유진(☎390-7376)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심지역의 주차난 완화 및 주민불편사항 해소와 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020(3년)

○ 위 치 : 장성읍 영천리 청운동 일원

○ 규 모 : 1,843㎡ (주차면수 53면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,150	3	1,572	1,575
국 비	1,490	1	1,163	326
시 도 비
시군구비	1,660	2	409	1249
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 편입부지 보상 협의 및 보상금 지급

○ 실시설계용역 추진중

□ 향후계획

○ 공사추진

□ 사업변경 내역

○ 사업 규모 변경(1,046㎡⇒1,843㎡)

사업명

장성공영버스터미널 주변 공영주차장 조성

담당자

경제교통과 전유진(☎390-7376)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심지역의 주차난 완화 및 주민불편사항 해소와 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020(3년)

○ 위 치 : 장성읍 버스터미널 일원

○ 규 모 : 5,804㎡ (2개소, 주차면수 115면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,350	2,603	1,289	2,457
국 비	2,500	1,000	1,252	248
시 도 비
시군구비	3,850	1,603	37	2,209
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 편입부지 보상 협의 및 보상금 지급

○ 터미널 제1주차장 실시설계용역 완료 및 공사계약

○ 터미널 제2주차장 감정평가완료

□ 향후계획

○ 터미널 제1주차장 공사추진

○ 터미널 제2주차장 보상협의 및 공사추진

□ 사업변경 내역

○ 사업 개소 증가에 따른 사업규모 변경(4,500㎡⇒5,804㎡)

사업명

평림천 생태하천 복원사업

담당자

안전건설과 정광철(☎390-7497)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평림천 수질오염원을 제거하여 수생태계의 건강성 회복으로 친수 공간 조성 및

군민과 관광객들에게 쾌적한 생태하천 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2022.

○ 위 치 : 삼계면 수옥리 ~ 상도리

○ 규 모 : 생태거점 3개소, 생태호안 3.7km, 교량 5개소, 가동보 4개소,

여울 6개소, 탐방로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,000		700	4,000	15,300
국 비	10,000		350	2,000	7,650
시 도 비
시군구비	10,000		350	2,000	7,6,50
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50 %)

○ 평림천 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역 설계

□ 향후계획

○ 평림천 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역 준공 2020. 3

○ 평림천 생태하천 복원사업 착공 2020. 4

○ 평림천 생태하천 복원사업 준공 2022. 8

사업명

상무평화공원 수경시설 등 조성

담당자

미래성장개발과 김용성(☎390-7404)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기 조성된 상무평화공원 내 수경시설 등을 반영하여 공원을 찾는 방문객과       지역주민에게 힐링 할 수 있는 공간 제공

○ 상무대 등 방문객의 만남과 휴식, 편의의 장소로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2021.(3년간)

○ 위 치 : 장성군 삼계면 주산리 일원

○ 규 모 : 41,275㎡(바닥분수, 생태연못, 야생초화원, 체험놀이터 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,600	-	300	1,668	1,632
국 비	1,830	-	180	834	816
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,770	-	120	834	816
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019년 균특 예산 확보         : 2018. 4.

○ 지방재정투자심사 완료(자체)   : 2018. 6.

○ 실시설계 용역 완료           : 2019. 9.

□ 향후계획

○ 공사 준공                    : 2020. 12.

사업명

장성홍길동축제

담당자

문화관광과 김평호(☎390-7242)

□ 사업목적 및 필요성

○ 성공적인 축제 개최로 찾아오고 싶은 관광장성 이미지 제고

○ 축제 개최를 통한 관광객 유치로 지역민 소득증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. 24. ~ 2019. 5. 29.

○ 위 치 : 장성 황룡강변 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	280		280
국 비			-
시 도 비
시군구비	280		280
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 봄꽃정원 포토존, 체험부스, 주무대, 지역향토식당 등 운영

사업명

황룡강 가동보 설치

담당자

안전건설과 오원태(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황룡강변은 현재 봄, 가을 축제의 장소로 활용되고 있으며 하천의 이수ㆍ치수 기능에 문화공간을 조성하여 군민의 여가 생활을 증기는 도심하천 기능부여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2020(2년)

○ 위 치 : 황룡면 장산리 663-1번지 일원

○ 규 모 : 황룡강 가동보 설치사업(L-110m, H-1.8m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,800		1,733	1,067
국 비
시 도 비
시군구비	2,800		1,733	1,067
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 황룡강 가동보 설치사업 공사중

□ 향후계획

○ 황룡강 가동보 설치사업 준공

사업명

파크골프장 조성

담당자

문화관광과 강대영(☎390-7229)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육시설 확충을 통한 건전한 여가활동 및 군민 건강증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 황룡면 월평리 200-29 일원(장진보 일원)

○ 규 모 : 파크골프장 18홀(A-22,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,000			1,000
국 비	300		-	300
시 도 비
시군구비	700		-	700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 파크골프장 실시설계                            :  2019. 1. ~ 12.

○ 소규모환경영평가서 제출 및 부동의 공문 회신    : 2019. 10. ~ 12.

○ 황룡강 하천기본계획 전략환경영향평가 협의      : 2020. 2. ~ 4.

○ 영산강유역환경청 친수지구 지정 협의            : 2020. 5.

○ 하천점용허가 신청(9,827㎡)                       : 2020. 7.

○ 파크골프장 조성 우수사례 벤치마킹              : 2020. 7.

□ 향후계획

○ 규모 조정 및 조성공사 실시                     : 202. 8. ~ 10.

- (기존) 18홀 ⇒ (변경) 9홀

□ 사업변경 내역

○ 규모 조정 : 18홀 ⇒ 9홀

사업명

북이 모현~상공간 도로확포장공사

담당자

안전건설과 김건우(☎390-7448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 농촌지역의 기초생활환경을 정비하여 지역 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2020(2년)

○ 위 치 : 장성군 북이면 모현리, 신월리 지내

○ 규 모 : 교량재가설 L=60m(B=9m), 도로확포장 L=626m(B=8m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,300	0	1,300	1,000
국 비	0		-	-
시 도 비	0		-	-
시군구비	2300		1,300	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 구조물 철거 및 교량재가설         : 2019. 11. ~ 2020. 8.

□ 향후계획

○ 구조물 및 배수로 설치             : 2020. 8. ~ 2020.  9.

○ 도로확포장 및 접속도로 추진       : 2020. 9. ~ 2020. 11.

○ 공사준공                          : 2020. 11.

사업명

장성군 의회 청사 건립

담당자

재무과 김태국(☎390-7274)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 의회는 1991년 출범하여 27년 동안 군청사를 사용하고 있으며, 사무공간이 협소하고 군민을 위한 편의시설 제공에 어려움이 있어 공공적 가치를 구현하고 지역성을 대표하는 상징적인 거점으로 지역민 누구나 이용하는 시설로 불편함을 없애고 사회적 약자를 배려하는 편의시설 설치계획이 적극적으로 반영된 군의회청사를 건립하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1080-11 외 13필지

○ 규 모 : 지하 1층 ~ 지상 3층, 부지면적 2,006㎡, 연면적 2,848.7㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,400백만원

단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
시군구비	9,400	-	-	2,200	7,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 의회청사 신축 타당성 및 기본계획 수립 용역         : 2019.  1. 27.

○ 공유재산 관리계획 의회 승인 및 재정투자심사 완료   : 2019.  1. ~  3.

○ 신축부지 매입예산 1,000백만원 확보(제2회 추경)      : 2019.  9.

- 의회 신축에 따른 주민설명회 개최(2회)             : 2019. 10. ~ 11.

□ 향후계획

○ 신축 부지 감정 평가 추진                           : 2020.  1. ~  2.

○ 신축 부지 협의 취득 추진                           : 2020.  2. ~ 12.

○ 군 관리계획 결정 변경                              : 2020.  7.

○ 신축부지 매입예산 추가확보                         : 2020.  9.

○ 공공건축 사업계획 사전 검토 승인(국토교통부)        : 2021.  1. ~  3.

○ 설계공모 및 실시설계                               : 2021.  3. ~  9.

○ 의회 청사 신축 공사                                : 2021.9. ~ 2022.12.

사업명

장성군 북이면 행정복지센터 건립

담당자

재무과 김태국(☎390-7274)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 북이면사무소는 1976년에 신축되어 시설의 노후화로 행정수요 증가에 따른 대민서비스 및 업무 수행에 필요한 행정공간이 부족한 실정으로 시대적 변화에 능동적으로 대응하고 지역주민들의 행정편의 개선을 위하여 신축 필요성이 대두되고 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 장성군 북이면 사거리 587-28 외 3필지

○ 규 모 : 2층, 부지면적 2,440㎡, 연면적 998㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
시군구비	3,200	-	355	445	2,400

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 공유재산 관리계획 의회 승인 및 재정투자심사 완료   : 2019.  1. ~ 3.

○ 신축부지 매입(2필지)                                : 2019. 12.

□ 향후계획

○ 신축부지 매입(국유지 1필지)                        : 2020. 1.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 승인(국토교통부)        : 2020. 2. ~ 5

○ 공공건축 기획·심의(군 건축위원회)                  : 2020. 5.

○ 설계공모 추진                                     : 2020. 6. ~ 8.

○ 군 관리계획 결정 변경                             : 2020. 7.

○ 실시설계 용역                                     : 2020. 8. ~ 12.

○ 행정복지센터 공사 시행                            : 2021. 1. ~ 12.

사업명

장산지구 지표수 보강개발사업

담당자

안전건설과 전준봉(☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사업대상 저수지 장산제는 1969년, 임곡제는 1945년에 설치되어 시설노후 및       저수용량 부족으로 수자원 확보를 위한 개발이 시급한 상황

○ 본 사업이 완료되면 현재 부족한 장산제, 임곡제의 저수용량이 세 배 가량(317%)       현저히 증가할 것으로 예상(41천톤 → 130천톤)되어 안정적 농업용수 공급을       통한 지역경제 발전과 복리증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 전라남도 장성군 서삼면 장산리 일원

○ 규 모 : 저수지 신설 2개소(장산제, 임곡제)

이설도로 2조 500m, 용수간선·지선 10조 5.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,000	350	350	1,000	7,650
국 비	6,300	-	-	700	5,600
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,700	350	350	300	2,050
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 장산지구 기본 및 실시설계 용역 추진    : 2019. 09. ~ 2010. 10.

○ 장산지구 전략환경영향평가 협의         : 2019. 09. ~ 2020. 07.

○ 장산지구 소규모환경, 사전재해등 관련 용역 추진  : 2019. 09. ~ 2020. 07.

○ 장산지구 기본계획 승인                 : 2020. 8..

□ 향후계획

○ 장산지구 시행계획 승인 및 사업발주     : 2020. 08. ~ 2020. 10.

○ 장산지구 사업추진                      : 2020. 11. ~ 2024. 12.

10-2. 지방채 발행사업

우리 장성군에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2019년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 해당사항 없음

10-3. 민간투자사업

우리 장성군에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2019년	2020년	2021년 이후
BTL		해	당	없	음
BTO		해	당	없	음

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 : 해당사항 없음