109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 장성군 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
제2황룡교 주변 경관개선 사업	4,000	-	3,000	-	1,000	2022	2020	10
군도17호선 개설사업	13,000	-	800	-	12,200	2023	2020	5
장성 하이패스 IC 설치공사	11,000	-	700	2,500	7,800	2022	2020	10
장성군 의회청사 신축	9,400	-	1,309	434	7,657	2022	2019	10
북이면 행정복지센터 신축	3.200	355	171	42	2,632	2022	2019	30
축령산지구 추암호 수변생태탐방로조성	5,800	-	550	800	4,450	2022	2019	5
노인회관 신축	2,016	100	13	1,903	-	2022	2019	70
황룡강 가동보 설치	3,300	1,733	1,567	-	-	2020	2019	100
청운지하차도 확장사업	39,000	-	961	15,039	23,000	2023	2019	35
황룡강지방정원조성	9,000	-	550	1,000	7,450	2023	2019	40
다목적복지회관건립	8,000	-	16.9	1,313	6,187	2022	2019	40
장성호 수변길 활성화사업	5,500	-	550	1,000	3,950	2022	2019	30
장산지구 지표수 보강개발사업	9,722	-	1,000	3,000	5,722	2024	2019	20
북이 모현~상공간 도로확포장공사	2,350	1,350	1,000	-	-	2020	2019	100
황룡강물빛 공연장 설치	4,000	-	300	1,600	2,100	2022	2019	20
황미르랜드 테마공원 조성사업	3,800	3,000	1,915	800	-	2021	2017	50

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

제2황룡교 주변 경관개선 사업

담당자

안전건설과 오원태(☎390-7448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 매년 100만 명이 찾고 있는 황룡강 주변에 친수공간을 조성하여 주민 및 방문객들에게 힐링 공간 제공을 통한 방문객 유인으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 장성군 황룡면 월평리 제2황룡교 일원

○ 규 모 : Ａ=7,500㎡ (경관조형물, 수변산책로, 소공원, 쉼터 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000		3,000	-	1,000
국 비
시 도 비				-
시군구비	4,000		3,000	-	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 조경수 이식 완료

○ 토공작업 중

□ 향후계획

○ 한전주 지중화

○ 수변산책로 및 소공원 조성 등

사업명

군도17호선 개설사업

담당자

안전건설과 오원태(☎390-7448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성호를 찾는 방문객들에게 접근성 확보와 교통 편리성을 제공하고

개발 여건을 개선하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 5. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 장성군 장성읍 용강리 ~ 북이면 수성리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=8.0km, B=8.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,000	-	800	-	12,200
국 비
시 도 비
시군구비	13,000	-	800	-	12,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 군도17호선 도로확포장공사 실시설계 용역 시행 중

□ 향후계획

○ 실시설계 완료 후 예산확보하여 사업 시행

사업명

장성 하이패스 IC 설치공사

담당자

안전건설과 오원태(☎390-7448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성ＩＣ를 이용 거리가(10㎞) 멀어 교통 불편을 초래하고 있어, 장성 하이       패스 IC 설치를 통해 접근성 향상과 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.~ 2022.

○ 위 치 : 장성읍 영천리, 유탕리 일원

○ 규 모

- 접속도로(국도1호선 교차로 등) 구간(장성군 시행) : 0.46㎞

- 고속도로공사 구간(도로공사 시행) : 1.4㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,000	-	700	2,500	7,800
국 비
시 도 비
시군구비	6,700	-	700	2,500	3,500
지 방 채
민간자본
기 타	4,300				4,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

≪장성군≫

○ 하이패스 ＩＣ설치 사업(접속도로) 추진      : 2021. 3. ~ 2021. 10.

○ 보상완료(4.2억) 및 조감도 설치 2개소        : 2021. 5.

≪한국도로공사≫

○ 하이패스 ＩＣ설치 사업(고속도로) 실시설계용역 추진 : 2021. 4. ~ 2022. 4.

□ 향후계획

≪장성군≫

○ 하이패스 ＩＣ설치 공사(접속도로) 시행 추진   : 2021. 7. ~ 2021.10.

- 주택 등 철거(6동)

- 교차로 설치(가·감속차선을 위한 옹벽 시공)

≪한국도로공사≫

○ 하이패스 ＩＣ설치 사업(고속도로) 실시설계용역 추진 : 2021. 7. ~ 2022. 4.

- 측량 및 영향평가 시행(환경 및 재해)

사업명

장성군 의회 청사 신축

담당자

재무과 김성용(☎390-7274)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군의회 1991년 출범하여 27년 동안 군 청사를 사용하고 있어 의정활동을       위한 법적 공간이 부족한 실정으로 군의회청사 신축으로 상징성 확보         및 합리적인 의사결정이 진행될 수 있도록 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 2. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1080-11 외 13필지

○ 규 모 : 지상3층 지하1층, 부지면적 2,006㎡, 연면적 2848.7㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,400	-	1,309	434	7,657
국 비
시 도 비
시군구비	9,400	-	1,309	434	7,657
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 공유재산 관리계획 의회 승인 및 재정투자심사   : 2019. 1. ~ 3.

○ 군 관리계획 결정(공공청사)                     : 2020. 7.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 승인(국토교통부)    : 2021. 4.

○ 건축기획업무 심의 완료(공공건축심의위원회)     : 2021. 4.

○ 건축 설계공모 공모 및 당선작 선정             : 2021. 5. ~ 2021. 6.

○ 의회 신축부지 취득(14필지 중 9필지)            : 2020. 3. ~

□ 향후계획

○ 신축부지 협의 취득(5필지)                      : 2021. 8. ~

○ 기본 및 실시설계용역 추진                     : 2021. 7. ~ 2021. 12.

○ 의회 청사 신축공사 추진                       : 2022. 2. ~ 2022. 12.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 8,200백만원 → 현재 9,400백만원

사업명

북이면 행정복지센터 신축

담당자

재무과 김성용(☎390-7274)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1976년 신축 이래 40년 넘게 이용하여 사무실공간 부족 및 시설의 노후화로       이용주민에게 불편을 초래하고 있어 군민들의 다양한 욕구와 행정기능의       환경변화에 적극 대응하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 4.

○ 위 치 : 장성군 북이면 사거리 587-28 외 3필지

○ 규 모 : 지상2층, 부지면적 2,440㎡, 연면적 998㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,200	355	171	42	2,632
국 비
시 도 비
시군구비	3,200	355	171	42	2,632
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 공유재산관리계획 의회 승인 및 재정투자심사   : 2019. 1. ~ 3.

○ 신축부지 매입 완료                           : 2020. 1.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 완료(국토교통부)   : 2020. 4.

○ 건축기획업무 심의 완료(공공건축심의위원회)    : 2020. 5.

○ 군 관리계획 결정(공공청사)                    : 2020. 7.

○ 기본 및 실시설계 용역 완료                   : 2020. 8. ~ 2021. 5.

□ 향후계획

○ 장애물 없는 생활환경 예비인증                : 2021. 8 ~

○ 행정복지센터 신축 공사 추진                  : 2021. 8. ~

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 2,900백만원 → 현재 3,200백만원

사업명

축령산지구 추암호 수변생태탐방로 조성

담당자

미래성장개발과 김형수(☎390-7403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 추암호수 생태 탐방로 및 쉼터 조성으로 축령산과 연계한 전국적인 관광

명소화 육성

○ 관광객과 지역주민을 연계하여 신규 소득 창출사업 발굴

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)

○ 위 치 : 장성군 서삼면 추암리 일원

○ 규 모 : Ｌ=2.0㎞ (탐방로, 소공원, 화장실, 주차장, 소교량 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,800	-	550	800	4,450
국 비	2,900	-	275	400	2,225
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,900	-	275	400	2,225
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 기본계획 수립                              : 2018. 12.

○ 지방재정투자심사 완료                      : 2019. 3.

○ 기본 및 실시설계 용역 추진                 : 2020. 4. ~ 10.

○ 사전재해 및 소규모환경영향평가 용역 추진   : 2020. 4. ~ 12.

○ 공사 착공                                  : 2021. 5.

□ 향후계획

○ 공사 준공                                  : 2022. 12.

사업명

노인회관 신축

담당자

주민복지과 윤신정☎061-390-7316)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화되고 접근성이 떨어진 노인회관을 신축 이전 하여 복지 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. ~ 2022. 4.

○ 위 치 : 장성읍 영천리 899-6번지 외 4필지, 1,459㎡(442평)

○ 규 모 : 1동 2층, 철근콘크리트구조, 연면적 760㎡(230평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,016백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,016	100	13	1,903
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 장성군 공유재산 관리계획 승인                    : 2019. 9.

○ 노인회관 건립 기본 및 실시설계용역 계약          : 2019. 11.

○ 장성군 노인회 사전 설명회                        : 2020. 8. 21.

○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료           : 2021. 1.

○ 기본 및 실시설계용역, 계약심사(군 감사계) 완료    : 2021. 2.

□ 향후계획

○ 공사추진                                  : 2021. 4. ~ 2021. 12.

○ 노인회관 신축 운영 사전 준비              : 2021. 4.~

사업명

황룡강 가동보 설치

담당자

안전건설과 김건우(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황룡강변은 현재 봄, 가을 축제의 장소로 활용되고 있으며 하천의 이수․

치수 기능에 문화공간을 조성하여 군민의 여가 생활을 증기는 도심하천

기능부여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12. ~ 2020. 5.

○ 위 치 : 장성군 황룡면 장산리 지내

○ 규 모 : 보설치 L=110m, H=1.8m(가동보 L=51m*2SP, 어도 L=8m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,300	1,733	1,567
국 비
시 도 비
시군구비	3,300	1,733	1,567
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업 착공                                 : 2019. 12. 16.

○ 사업 준공                                 : 2020. 5. 30.

사업명

청운지하차도 확장사업

담당자

도시재생과 고형우(☎390-7431)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호남선철도 개설로 인하여 단절된 장성읍의 시가지 교통흐름을 원활히 하고  황룡강 이용객의 교통량 분산 및 접근성을 높이고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 6. 25. ~ 2023. 6. 24.

○ 위 치 : 장성읍 영천리~기산리 일원

○ 규 모 : 지하차도 2차로(총연장L=726m, 지하차도L=565m, 폭B=10~35m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,000백만원(장성군31,000, 철도공단 8,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	39,000		961	15,039	23,000
국 비	8,000			3,000	5,000
시 도 비
시군구비	31,000		961	12,039	18,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○기본 및 실시설계용역 착수(㈜다산컨설턴트 외 2개사)        : 2020.  4.

○한국철도시설공단과 장성군 업무협약체결                     : 2020.  7.

○장성군 발주분(연결도로) 착공 및 건설관리용역 착수       : 2021.  6. 25.

□ 향후계획

○철도공단 발주분(비개착구간) 착공 및 건설관리용역 착수 : 2021. 10.

○공사 준공                                            : 2023. 6.

사업명

황룡강 지방정원 조성사업

담당자

산림편백과 정진숙(☎390-7382)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황룡강의 생태하천자원을 바탕으로 사시사철 방문하는 문화 관광명소 육성 및       옐로우시티 장성의 브랜드 가치를 높이는 지역 랜드마크 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023.

○ 위 치 : 장성 황룡강 일원

○ 내 용 : 지방정원 조성

- 주제정원 : 황룡정원, 푸른물빛정원, 청백리정원, 검은숲정원, 홍담정원

○ 규 모 : 226,719㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,000		550	1,000	7,450
국 비	-		-	-	-
시 도 비	4,950		302.5	550	4,097.5
시군구비	4,050		247.5	450	3,352.5
지 방 채	-		-	-	-
민간자본	-		-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 황룡강 국가정원 기본계획 및 타당성 검토 용역 준공 : 2020. 4.

○ 2021년 균특전환사업(황룡강 지방정원) 사전심의 완료 : 2020. 5.

○ 소규모 환경영향평가 용역 추진         : 2019. 12. ~ 2020. 12.

○ 재해영향성 검토(행정계획)용역 추진     : 2019.  6. ~ 2020. 12.

○ 지방정원 조성사업 기본 및 실시설계 추진 : 2020.  2. ~ 2021.  8.

○ 지방정원 조성사업 기본 및 실시설계 최종보고회 : 2021. 3. 11.

○ 사전재해영향성 검토(개발사업) 용역 추진 : 2021.  5. ~ 2021. 11.

□ 향후계획

○ 계약심사(전라남도)                    : 2021. 9.

○ 지방정원 조성사업 착공 및 추진        : 2021. 10. ~ 2022. 12.

사업명

다목적복지회관건립(생활SOC복합화)

담당자

주민복지과 임희정(☎390-7051)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존에 운영하고 있는 건강가정지원센터와 다문화가족지원센터의 기능을       확대하여 지역중심의 보편적 가족서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022.(3년)

○ 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 1487-10, 33

○ 규 모 : 부지 3,012㎡ / 건물 3,040㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	0	16.9	1,313	6,187
국 비	1,500	0	16.9	313	687
시 도 비
시군구비	6,500	0	0	1,000	5,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 실시설계 완료 및 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 추진 중

□ 향후계획

○ BF인증 완료후 전남 도계약심사 추진 : 2021. 11. 예정

○ 공사 착공 : 2022. 1월 예정

사업명

장성호 수변길 활성화사업

담당자

안전건설과 김건우(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 자원인 장성호에 수변길 및 쉼터 등을 조성하여 장성호를 찾는

관광객들에게 힐링 공간을 제공하여 지역 경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2022.

○ 위 치 : 장성군 장성읍 용곡리 일원(장성호)

○ 규 모 : 수변길 조성  L= 3.0㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,500		550	1,000	3,950
국 비	2,750		275	500	1,975
시 도 비
시군구비	2,750		275	500	1,975
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021 장성호 수변길 활성화 추진               : 2021. 5. ~ 2022. 3.

□ 향후계획

○ 2022 장성호 수변길 활성화 추진

사업명

장산지구 지표수 보강개발사업

담당자

안전건설과 신동혁(☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농업용수가 부족한 서삼면 장산리 일대에 수원공 시설의 확장 및 보강으로           안정적인 영농생산기반 조성을 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024.

○ 위 치 : 장성군 서삼면 장산리 일원

○ 규 모 : 장산제 및 임곡제 확장 1식, 용수관로 정비 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,722백만원(군비, 70%는 지방전환사업비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,722	-	1,000	3,000	5,722
국 비
시 도 비
시군구비	9,722	-	1,000	3,000	5,722
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 사업발주 및 계약                   : 2021. 1. ~ 2.

○ 1차분(2021년) 착공 및 추진          : 2021. 3. ~

□ 향후계획

○ 1차분 사업추진 및 준공             : 2021. 8. ~ 2022. 3.

○ 잔여분 사업추진 및 준공            : 2022. 3. ~ 2024. 3.

사업명

북이모현~상공간도로확포장공사

담당자

안전건설과 오원태(☎390-7448)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 농촌지역의 기초생활환경을 정비하여 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2020.

○ 위 치 : 장성군 북이면 모현리

○ 규 모 : 도로확포장 L= 626m, B=8.0m, 교량재가설 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,350	1,350	1,000	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	2,350	1,350	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업 착공                                        : 2021. 11.

○ 사업 준공                                        : 2022. 12.

사업명

황룡강 물빛공연장 설치

담당자

안전건설과 김건우(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황룡강을 찾는 관광객 및 군민들에게 장성군만의 개성 있는 야간경관을

창출하여 색다른 볼거리 제공으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 장성군 장성읍 기산리

○ 규 모 : 멀티미디어 분수 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000		300	1,600	2,100
국 비
시 도 비	2,000		150	800	1,050
시군구비	2,000		150	800	1,050
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계 용역 추진중

□ 향후계획

○ 사업 착공                                        : 2021. 11.

○ 사업 준공                                        : 2022. 12.

사업명

황미르랜드 테마공원

조성사업

담당자

안전건설과 김건우(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광인프라 확대 일환으로 추진하는 사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2021.(4년)

○ 위 치 : 장성읍 영천·장안리 일원

○ 규 모 : 테마공원 조성 Ａ=36,553㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,800	3,000	1,915	800
국 비	900	900	740
시 도 비	1,150	750	341	400
시군구비	1,750	1,350	834	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 공사 발주 및 추진    : 2019. 12. ~ 2021.  9.

- 옹벽블럭 L=419m, 조경석 L=427m, 인도교 1개소, 미로원 282m,

호빗의동굴 1개소, 황토포장 A=1,335㎡ 등

□ 향후계획

○ 사업준공                                        : 2021. 9.

10-2. 지방채 발행사업

우리 장성군에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2020년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 장성군에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후
BTL		해	당	없	음
BTO		해	당	없	음

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 : 해당없음