도시가스 공급사업 추진

경제적이고 안전하며 친환경적인 도시가스 공급으로 군민의 주거문화를

향상하고 관내 기업들의 에너지 비용 절감에 따른 가격 경쟁력 확보로

지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : ’09년 ~ ’11년(3년)

※ ’12년부터 단독주택 및 추가수요처 공급 계획

❍ 공급지역 : 5개 읍면(장성,동화,삼서,삼계,황룡), 황룡행복마을

❍ 공급대상 : 3,537개소(공동주택3,371, 산업체36, 행복마을110, 기타20)

❍ 사업규모 : 공급배관 38.3km(’09 : 0.55, ’10 : 13.24, ’11 : 24.51)

❍ 사 업 비 : 163억원(특교세5, 도비4, 군비40, 사업자109.5, 행복마을4.5)

□ 사업추진 현황

❍ 도시가스 사업자 지정(해양도시가스) : ‘09. 1월

❍ 도시가스 공급 기본설계안 설명회 개최 : ‘09. 7. 31

❍ 도시가스 사업허가(전라남도) : ‘09. 8. 17

❍ MOU 체결 : ‘09. 12. 16

❍ 전자종합농공단지 내 배관매설 : 550m

❍ 도시가스 공급사업 기공식 : ‘10. 3. 9.

❍ 배관 매설(장성오거리~철도횡단~황룡시장, 947m) : ‘10. 5월

□ 앞으로 추진계획

❍ 2010년도 공급배관 매설 : 12.29km

▪ 황룡행복마을 내, 장성 G/S ~ 장성제일교 : 9월 ~ 11월

▪ 삼계VS(발산리) ~ 삼계농협 : 10 ~ 11월

▪ 환경사업소 ~ 회사촌, 황룡시장 ~ 영천주공 1□2차 ~ 노인병원 : 10 ~ 12월

❍ 2011년도 공급배관 매설 : 24.51km

▪ 유진기업 ~ 환경사업소, 회사촌 ~ 농공단지, 장성역 ~ 부강 2차

청운고가~장성역~장성군청~부강2차, 삼계농협~삼서□두월

❍ 2011년 하반기 : 도시가스 공급

□ 한국가스공사 천연가스 주배관 경로

□ 장성군 도시가스 공급경로