동화전자종합 농공단지 조성

농공단지의 조성으로 지역경제 활성화 및 중소기업체의 공업입지를 공급하여 농촌지역의 균형발전과 농외소득원 개발을 통한 소가소득 증대

□ 사업개요

□ 위    치 : 장성군 동화면 남평리 산13-15번지 일원

□ 사업기간 : 2006. 6월 ~ 2009. 5월(3년)

□ 규     모 : 282,526㎡(85,464평) - 산업시설 176,061, 부대시설 106,465

□ 사 업 비 : 203억원(국비 64, 도비 3, 군비 8, 지방채 128)

□ 유치업종 : 전기□전자산업 등 25개업체 (1,000명 고용)

□ 사업추진 현황

❍ 농공단지 지정(‘06. 02. 02) 및 변경지정 : 2007. 11. 6.

❍ 토사반출 812천㎥중 787천㎥ 완료(97%) : 2009. 6. 30

❍ 물탱크 기초 및 제수변등 설비 완료    : 2009. 6. 30

❍ 농공단지 분양 접수 및 분양 심의 완료  : 2009. 7. 27

□ 앞으로 추진계획

❍ 확정측량, 분양업체 지번부여 및 분양대금 완납업체 등기이전

: 2010. 8월까지

❍ 기본관리계획 수립 및 승인(전남도) : 2010. 9월

❍ 잔여필지 수시분양 완료 : 2010. 12월까지

❍ 관리사무소 신축 및 입주업체 협의체 구성 : 2010. 12월까지

□ 조감도