장성건널목 입체화사업

□ 호남선 고속전철 운행에 따른 건널목 사고예방 및 열차안전

운행 확보

□ 황룡 5일시장 활성화 및 농산물 수송원활과 소득증대 기여

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 호남선 장성~임곡간 장성건널목 입체화 공사

□ 위    치 : 장성군 장성읍 삼월동

□ 사업개요 : L=410m(인도포함 지하통로박스 230m, 접속도로 L=180m)

※ 호남선 통과구간 : FRONT JACKING 공법

□ 사 업 비 : 188억원(장성군 47, 한국철도시설공단 141)

□ 사업기간 : 2008. 6. 30 ~2010. 9. 17

□ 사업시행 : 한국철도시설공단

□ 감리회사 : (주)한국철도기술공사  시공회사 (주)대명건설

□ 사업추진현황

□ 2008. 6. 24 : 계약체결

□ 2008. 6. 30 : 공사착공

□ 2008.   7월 : 공사착수후 현황조사 및 유관기관 협의추진

□ 2008.  10월 : 기존 장성건널목 차량통제

□ 2008.  11월 : 기존 장성건널목 절체 및 임시건널목 설치

□ 2009.  1 ~ 2월 : 선로변 지하매설물 및 건널목횡단 한전지중선 이설

한국통신 지중관로 이설

□ 2009.  3 ~ 4월 : 철도하부공사 F/J공 함체 제작 및 굴착추진

□ 2010. 5월      : 지하차도BOX 및 램프구간(U타입)구조물 시공완료

□ 2010. 5. 30    : 철도횡단 하부도로 임시개통

□ 앞으로 추진계획

□ 2010. 6 ~ 8월 : 주민요구사항 검토 및 해결

⇒ 인도부 캐노피설치 방음벽 추가설치 가로수 식재 등

□ 2010. 8월   : 지하차도 인도 등 부체도로 마무리

□ 2010. 9. 17 : 공사 완료예정

□ 효 과

□ 도로기능 개선 및 지역발전 도모

□ 조감도