도시가스 공급사업 추진

경제적이고 안전하며 친환경적인 도시가스 공급으로 군민의 주거

문화를 향상하고 관내 기업들의 에너지비용 절감에 따른 가격경쟁력

확보로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : ’09년 ~ ’11년(3년)

※ ’12년부터 단독주택 및 추가수요처 공급 계획

❍ 공급지역 : 5개 읍면(장성, 동화, 삼서, 삼계, 황룡), 황룡행복마을

❍ 공급대상 : 3,537개소(공동주택3,371, 산업체36, 행복마을110, 기타20)

❍ 사업규모 : 공급배관 38.3km

❍ 사 업 비 : 163억원(특교세5, 도비4, 군비40, 사업자109.5, 행복마을4.5)

□ 사업추진 현황

❍ 도시가스 사업자 지정(해양도시가스) : 2009. 1. 30

❍ 도시가스 사업허가 : 2009. 8. 17

❍ MOU체결 : 2009. 12. 16

❍ 도시가스 공급사업 기공식 : 2010. 3. 9

❍ 보조금 지급 : 35억원(2009년 11억원, 2010년 9억원, 2011년 15억원)

❍ 공급배관 매설 : 30.8km(2009년 0.55km, 2010년 12.21km, 2011년 18.04km)

□ 앞으로 추진계획

❍ 공급배관 매설 : 7.5km

▪ 장성읍 시가지 내 저압배관 : 3.4km

▪ 금광아파트 ~ 렉스프로폴(삼서 두월) : 4.1km

❍ 요금 인하를 위한 도시가스 수요처 지속 발굴

❍ 도시가스 공급 및 점화식 개최 : 2011. 10월말 예정

□ 한국가스공사 천연가스 주배관 경로

□ 장성군 도시가스 공급경로