장성 소도읍 육성사업

□ 장성읍을 자주적 생산능력을 갖춘 지역 거점 도시로 육성하여

주변 농촌에 활력을 불어 넣어 균형 발전을 유도

□ 지방소도읍 육성지원법에 근거하여 생활기반시설 정비 및 확충

□ 사업개요

❍ 사업내용

∙ 중심시가지 활성화 사업추진

- 중심광장 연결도로(소로1-7), 장성역 교차로 및 대로(대로3-5) 확포장사업

- 주차장 정비사업 : 2개소

- 장성공원 근린공원정비

∙ 한옥문화 체험관 부지 조성

❍ 사업기간 : 2008년 ~ 2013년(6개년)

❍ 사 업 비 : 142억원(국비 50, 도비 10 군비 82)

- 2011까지 확보액 : 96억원(국비 40, 도비 5, 군비 51)

□ 사업추진 현황

❍ 대상지 선정                                   : 2008. 10.

❍ 타당성 검토 및 기본계획수립용역 완료          : 2010.  3.

❍ 사업계획 변경승인(행정안전부)                 : 2009. 11.

❍ 근린공원 및 주차장 보상추진                   : 2010.  1. ~

❍ 근린공원 진입부정비 및 주차장(2개소) 조성사업 추진 : 2010.  5.~12.

❍ 중심광장 연결도로(소로1-7) 시행                : 2011.  2. ~

❍ 장성역 교차로 및 대로(3-5) 보상추진            : 2011.  2. ~

□ 앞으로 추진계획

❍ 장성역 교차로 및 대로(3-5) 편입지장물 철거     : 2011.  9. ~

❍ 주차장 정비사업 시행                          : 2012.  3. ~

❍ 장성역 교차로 및 대로(3-5) 사업시행            : 2012.  8. ~

□ 위치도