유평지구 농어촌 뉴타운 조성

□ 도시거주 30～40대를 유치하여 농촌성장 핵심인력으로 육성

□ 농촌 정주여건 개선으로 귀농예정자에 대한 정착율 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 삼서면 유평리 148-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2009 ~ 2011(3년)

❍ 규    모 : 168,818㎡(51,067평)

❍ 사 업 비 : 437억원(국비121, 융자133, 군비183)

❍ 사업내용 : 200호(분양 70호/100㎡, 임대 70호/85㎡, 60호/100㎡)

□ 사업추진 현황

❍ 주택임대․분양 계약 완료(200세대)               : 2011. 4. 11.

〔지역별 현황〕

합계	광주	장성	경기	서울	전북	전남	충남	경북	충북	강원
200명	108명 (54%)	36명 (18%)	31명 (15.5%)	8명 (4%)	3명 (1.5%)	6명 (3%)	4명 (2%)	1명 (0.5%)	1명 (0.5%)	2명 (1%)

〔연령별 현황〕

합 계	25~29세	30~34세	35~39세	40~44세	45~49세	50~55세
200명	3명	19명	23명	48명	51명	56명
100%	1.5%	9.5%	11.5%	24%	25.5%	28%

❍ 기반조성 및 주택건설공사(공정율 43%)            : 2011. 8. 30.

- 건축, 전기, 통신공사 : 기초공사 129동, 골조공사 100동

- 토목 기반시설       : 주택 택지조성 80%, 우․오․상수공사 10%

□ 앞으로 추진계획

❍ 골조공사 및 기반시설 공사 완료                : 2011. 12. 31.

❍ 도로포장 및 건축 마감공사                     : 2012.  2. 28.

❍ 입  주                                        : 2012.  3.  1.

조  감  도