도시가스 공급사업 추진

경제적이고 안전하며 친환경적인 도시가스 공급으로 군민의 주거

문화를 향상하고 관내 기업들의 에너지비용 절감에 따른 가격경쟁력

확보로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2012년(4년) ※ 2012년 삼계․삼서구간 매설

❍ 공급지역 : 5개읍면(장성, 황룡, 동화, 삼계, 삼서), 황룡행복마을

❍ 공급대상 : 3,537개소(공동주택3,371, 산업체36, 행복마을110, 기타20)

❍ 사업규모 : 배관 38.3km(’09/0.55, ’10/11.66, ’11/20.79, ‘12/5.3)

❍ 사 업 비 : 163억원(특교세5, 도비4, 군비40, 사업자109.5, 행복마을4.5)

□ 사업추진 현황

❍ 도시가스 공급배관 매설(20.79km)         : 2011. 1. ~ 11.

- 장성읍 시가지, 장성읍 ~ 부강 2차 아파트

- 안평 G/S ~ 장안리 ~ 공설운동장 고가

- 황룡시장 ~ 영천 1,2차 아파트

- 황룡면 월평리 준공업단지, 회사촌

❍ 도시가스 공급(1,444개소)                   : 2011. 10. 20.

- 공동주택 1,339세대/19개, 기업체 9개소, 음식점□단독주택 등 96개소

- 2012년까지 추가수요처에 지속 공급

❍ 에너지 대량수요처 도시가스 사용협의 : 2개소(렉스프로폴,삼계 금광아파트)

❏ 앞으로 추진계획

❍ 삼계·삼서 도시가스 공급배관매설(5.3.km) : 2012. 6 ~ 9

❍ 삼계·삼서 도시가스 공급(4개소)          : 2012. 10

❍ 2단계 공급 수요조사 및 경제성 분석     : 2012. 6. ~ 9

❏ 위치도

- 한국가스공사 천연가스 주배관 경로 -