권역별 마을종합 정비사업

농촌마을의 경관개선,생활환경정비 및 소득기반 확충 등을

통하여 희망과 활력이 넘치는 살기좋은 농촌마을을 조성

❏ 사업개요

❍ 사업기간 : 2010년 ~ 2015년

❍ 사 업 비

- 삼서권역 : 3,380백만원(국비 2,366, 도비 51, 군비   963)

- 편백권역 : 5,400백만원(국비 3,780, 도비 81, 군비 1,539)

- 햇살권역 : 5,000백만원(국비 3,500, 도비 75, 군비 1,425)

❍ 사업위치 및 규모

구 분	사 업 위 치	사 업 규 모
삼서권역	삼서면 대곡리, 수양리 일원	․ 기초생활확충 : 다목적센터 조성, 태뫼산 산책로 조성 ․ 지역경관개선 : 수양제수변 꽃길조성, 사과나무길 조성 등 ․ 지역역량강화 : 역량강화(S/W)
편백권역	서삼면 모암리, 대덕리,추암리 일원	․ 기초생활확충 : 도농교류센터 건립, 종합복지회관 건립, 건강관리실 리모델링, 마을회관 건립, 마을안길 및 돌담 정비 ․ 지역소득증대 : 편백수련관 건립, 편백체험장 건립 ․ 지역경관개선 : 빨래터 복원, 권역안내판 설치 ․ 주민역량강화 : 역량강화(S/W)
햇살권역	북이면 오월리, 조양리,수성리 일원	․ 기초생활기반확충 : 다목적센터 건립, 마을회관 건립, 마을쉼터 조성 ․ 지역소득증대 : 생태습지체험학습장 조성,전통예절관 건립 ․ 지역경관개선 : 전통테마마을광장 정비, 권역안내도 ․ 주민역량강화 : 역량강화(S/W)

❏ 사업별 추진현황

❍ 삼서권역 사업

- 위(수)탁계약 체결(한국농어촌공사 장성지사)        : 2011.  5.

- 기본계획 용역 착수                               : 2011.  6.

- 주민설명회 및 전문가 자문회의                    : 2011.  9.

- 기본계획 승인                                    : 2011. 12.

- 1단계 다목적센터 실시설계 착수                  : 2012.  4.

❍ 편백권역 사업

- 기본계획 수립 및 승인                            : 2011.  1

- 실시설계 착수                                    : 2011.  4.

- 1년차 편백체험관(추암) 및 진입도로 시행계획 수립 및 승인  : 2011. 12.

- 1년차 편백체험관(추암) 및 진입도로 착공           : 2011. 12.

❍ 햇살권역 사업

- 기본계획 승인                                    : 2009. 12.

- 실시설계 및 인허가 협의                          : 2011.  4.

- 사업 착공                                        : 2011.  6.

․ 2011년분 : 다목적센터 건립, 전통 테마마을 광장 정비

- 권역주관 기공식 개최(구 조양초교, 150명)          : 2011.  9.

- 사전환경성검토 협의                              : 2011. 10

- 3년차 사업 착공                              : 2012.  2.

․ 다목적센터(조양), 전통예절관(송산), 생태습지체험학습장

❏ 앞으로 추진계획

❍ 삼서권역 사업

- 실시설계 최종 보고회 개최                        : 2012.  8.

- 실시설계완료 및 인허가 협의                      : 2012.  9.

- 계약심사 및 시행계획 전남도 승인                 : 2012. 10.

❍ 편백권역 사업

- 실시설계완료 및 인허가 협의                      : 2012. 7.

- 편백체험장(괴정)종합복지회관(주암)편백수련관(모암) 착공    : 2012. 7.

- 건강관리실(증암),도농교류센터(주암),마을회관(세포),빨래터복원(주암) : 2013.1

❍ 햇살권역 사업

- 2년차  : 전통 테마마을 광장 정비, 다목적센터(조양) 1차분 준공  : 2012.  6.

- 3년차 : 다목적센터(조양), 전통예절관(송산) 준공    : 2012. 12.

❏ 조감도

- 삼서권역 -

- 편백권역 -

- 햇살권역 -