11-1. 투융자심사 대상사업

우리 장성군에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
장성하수종말처리시설 고도처리 개선공사	12,909	4,403	8,506		2013	2010	85
장성하수종말처리시설 방류수 재이용사업	2,800	1,791	1,009	-	2013	2010	90
서부권, 읍지역 상수도시설 확충사업	8,700	3,250	2,000	3,450	2015	2010	60
농어촌테마공원 조성사업	6,000	3,230	1,800	970	2014	2010	60
피톤치드 체험 랜드 조성사업	4,500	1,600	2,300	600	2014	2011	40
사거리전통시장 시설현대화	5,000	1,293	3,707		2013	2011	70
월평처리구역 하수관거 정비사업	16,733	1,673	2,258	12,802	2015	2011	30
삼계면 공공도서관 건립공사	1,915		1,915		2013	2011	10
임권택 시네마공원 조성사업	4,500	3,200	500	800	2014	2011	70
사가지구 지표수 보강개발사업	6,900	500	2,000	4,400	2015	2012	25
북부공공도서관 조성사업	2,340		2,340		2013	2012	30
농협물류센터 진입도로 개설공사	2,200		2,200		2014	2012	10
공공청소년 수련관 건립	6,000		1,250	4,750	2015	2012	15
나노산단 폐수종말 처리시설 설치사업	18,372		1,151	17,221	2015	2012	6
개천지구 소규모 하수도정비사업	6,243		3,285	2,958	2015	2012	10

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명	장성하수종말처리시설 고도처리 개선공사	담당자	환경사업소 김양진 (☎390-7536)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 기존 처리방식으로는 강화된 방류수질 기준을 준수하지 못함에 따라 고도처리 시설로 개선함으로써 강화된 방류수질 기준을 준수하고 방류수역인 황룡강 및 영산강의 수질보전.. □ 사업개요 ○ 기간 : 2011 ～ 2013 ○ 위치 : 환경사업소 지내 ○ 시공사 : 동광건설(주) ○ 사업규모 : 시설용량 11,000톤/일 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 :12,909 백만원 (국비 9,036, 도비 495, 군비 3,378 ) ○ 지금까지 집행액 : 12,909 백만원 (국비 9,036, 도비 495, 군비 3,378 ) - 2012년까지 : 4,403백만원 - 2013년 : 8,506백만원 □ 추진상황 ○ 추진단계 : 생물반응조 2계열 구조물 시공 중 ○ 추진율 : 85% □ 향후계획 ○ 고도처리 개선사업 종합시운전(1, 2계열) ○ 사업준공 : 2013. 12.

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	장성하수종말처리설 방류수 재이용사업	담당자	환경사업소 김양진 (☎390-7536)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 방류수를 재이용하여 농업용수 확보 및 하천유지용수 등 수자원을 재활용하기 위함. □ 사업개요 ○ 기간 : 2012 ～ 2013 ○ 위치 : 남면 덕성리 지내 ○ 시공사 : 에스와이건설(주) ○ 사업규모 : 시설용량 4,000톤/일 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 :2,800 백만원 (국비 1,960, 도비 167, 군비 673 ) ○ 지금까지 집행액 : 2,800 백만원 (국비 1,960, 도비 167, 군비 673 ) - 2012년 : 1,791백만원 - 2013년 : 1,009백만원 □ 추진상황 ○ 추진단계 : 송수관로 통수능력 시험 실시 중 ○ 진 도 : 90% □ 향후계획 ○ 여과기 시운전 및 통수관로 통수시험 실시 ○ 사업준공 : 2013. 9.

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	서부권(동화,황룡), 읍지역 상수도시설 확충사업	담당자	경관도시과 강홍권 (☎390-7522)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 국가 수도정책의 체계적 발전, 용수의 효율적 이용 및 수돗물의 안정적 공급 □ 사업개요 ○ 기간 : 2011 ～ 2016 ○ 위치 : 동화면, 황룡면, 서삼면 일원 ○ 시공사 : 광신건설(주)외 5개사 ○ 사업규모 - 배수지 2개소(1,500m3, 400m3), 송·배수 및 급수관로 : 118.648km □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 8,700백만원(국비 6,090 도비 800 군비 1,810) ○ 지금까지 집행액 : 5,250백만원(국비 3,675 도비 525 군비 1,050) - 2011년 : 250백만원(국비 175 도비 25 군비 50) - 2012년 : 3,000백만원(국비 2,100 도비 300 군비 600) - 2013년 : 2,000백만원(국비 1,400 도비 200 군비 400) ○ 향후 소요액 : 3,450백만원국비 2,415 도비 345 군비 690) - 2014년 : 2,250백만원(국비 1,575 도비 225 군비 450) - 2015년 : 1,200백만원(국비 840 도비 120 군비 240) □ 추진상황 ○ 배수지 완료 ○ 송배수관로 70%, 급수관로 30% ○ 추진율 : 60% □ 향후계획 ○ 현재 개인지하수 및 마을별 생활용수(관정)을 이용하고 있는 지역까지 확대 공급

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	유평지구 농어촌테마공원 조성	담당자	미래전략과 김건우(☎390-7464)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 농촌특유의 특성화된 사과테마공원을 조성하여 도시민에게 자연친화적인 휴식․레져․체험공간 제공으로 도농교류 확대 및 농촌주민의 소득원의 거점 확보 □ 사업개요 ○ 기간 : 2011.1 ～ 2014.12 ○ 위치 : 삼서면 유평리 일원 ○ 시공사 : ㈜신상건설 ○ 사업규모 : 사과테마공원조성(A=81,377㎡) - 다목적센터 1동, 화장실 1동, 저온저장고 1동 등 - 잔디마당, 사과시험포, 하우스, 텃밭, 영농지원센터 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,000백만원(국비 3,000, 시군구비 3,000) ○ 지금까지 집행액 : 3,230백만원 (국비1,615, 군비1,615) - 2011년 : 200백만원(국비100, 군비100) - 2012년 : 3,030백만원(국비1,515, 군비1,515) ○ 향후 소요액 : 2,770백만원 (국비1,385, 군비1,385) - 2013년 : 1,800백만원(국비900, 군비900) - 2014년 : 970백만원(국비485, 군비485) □ 추진상황 ○ 테마공원 조성사업 착공 : 2012. 4. 30. - 기반조성 및 다목적센터 등 건축물 시공중 ○ 추진율 : 60% □ 향후계획 ○ 테마공원 조성사업 준공 : 2014. 12.

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	피톤치드체험랜드 조성사업	담당자	문화관광과 황력봉(☎390-7252)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 홍길동 테마파크, 필암서원, 축령산 휴양림 등을 찾는 관광객의 증가로 주변에 숙박 및 체험, 휴양의 공간이 부족하므로, ○ 폐교(월평초교 황룡분교) 부지에 편백나무 피톤치드와 효소를 활용하여 관광객 및 지역주민 휴식의 공간으로 활용 □ 사업개요 ○ 기간 : 2011 ～ 2014 ○ 위치 : 황룡면 아곡리 46번지 ○ 시공사 : 태오건설(주) 대표 류창열 ○ 사업규모 : 연면적 1,210㎡(366평) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4500백만원(국비 2700, 군비 1800) ○ 지금까지 집행액 : 1,600백만원 - 2011년 : 600백만원(군비), 2012년: 1,000백만원(국비600, 군비 400) ○ 향후 소요액 - 2013년 : 2,300백만원(국비: 2,900백만원 1,400, 군비 900) - 2014년 : 600백만원(국비 400, 군비 200) □ 추진상황 ○ 연수시설 및 숙박시설 리모델링 준공 : 2013 .3. 29 ○ 추진율 : 40% □ 향후계획 ○ 피톤치드·편백효소액 체험장(목욕장) 실시설계 : 2013. 8. 26. ○ 피톤치드·편백효소액 체험장(목욕장) 공사발주 : 2013. 9. 20.

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	사거리전통시장 시설현대화	담당자	지역경제과 손진영(☎390-7353)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 노후화된 장옥을 전통과 현대적 디자인이 결합된 형태의 적정규모 재건축 으로 고객 편의성 증대와 시설현대화사업 추진으로 외부 고객과 주민의 이용 편의성 제고 □ 사업개요 ○ 기간 : 2012. 2. ～ 2013. 12. ○ 위치 : 북이면 사거리 699외 28필지 ○ 시공사 : (주)세진건설 ○ 사업규모 : 8,718㎡, 건축규모 2,054㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 5,000백만원(국비 3,200, 시군구비 1,800) ○ 지금까지 집행액 : 2012년 1,293백만원(국비 816, 군비 477) ○ 향후 소요액 : 2013년 3,707백만원(국비 2,384, 군비 1,323) □ 추진상황 ○ 사거리 전통시장 시설현대화사업 지원 신청 : 2011. 2. 16. ○ 시설현대화 연구용역 실시(시장경영진흥원) : 2011. 6. 8. ~ 2012. 30. ○ 지방재정 투융자사업 심사(도) : 2011. 10. 18. ○ 도 공공디자인 위원회 심의 : 2013. 1. 25. ○ 기본 및 실시설계 용역 : 2013. 4. 8. ○ 도 계약 심사(건축, 토목, 기계) : 2013. 5. 27. ○ 건축, 토목 등 공사 계약 : 2013. 6. 24. ○ 추진율 : 70% □ 향후계획 ○ 준공 : 2013. 12.

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	월평처리구역 하수관거 정비사업	담당자	환경사업소 전준봉 (☎390-7145)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 영산강 상류 황룡강과 연접한 황룡면 소재지가 하수관거 정비사업이 이루어지지 않아 483가구, 840톤의 하수가 황룡강에 방류되고 있어 ○ 4대강 수질개선사업 중인 영산강의 수질 악화가 우려됨에 따라 하수 관거 및 배수시설 정비가 절실함. □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012 ~ 2015 ○ 위 치 :황룡면 지내 ○ 시공사 : 남해종합개발 ○ 사업규모 : 하수관거정비 16.7㎞ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 16,733백만원(국비 11,713, 군비 5,020) ○ 지금까지 집행액 : 3,931백만원 - 2012년 : 1,673백만원(국비 1,171 군비 502) - 2013년 : 2,258백만원(국비 1,581 군비 677) ○ 향후 소요액 : 12,802백만원(국비 8,961 군비 3,841) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%) ○ 오수관로 L=1.6㎞ ○ 추진율 : 30% □ 향후계획 ○ 오수관로 L=11.3㎞, 우수관로 L=3.8㎞

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	삼계면 공공도서관 건립공사	담당자	문화관광과 이승석(☎390-7225)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 장성 삼계지역 군민들의 지식정보 욕구 충족 및 다양한 문화활동이 가능한 평생 학습공간 마련을 위한 인프라 구축 □ 사업개요 ○ 기간 : 2012 ～ 2013 ○ 위치 : 삼계면 사창리 427-7번지 외2필지 ○ 시공사 : (주)건도 대표 김종훈 ○ 사업규모 : 연면적 627.36㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 1,915백만원(광특 1,532, 군비 383) ○ 지금까지 집행액 : 1,041백만원(광특 833, 군비 208) - 2013년 : 1,041백만원(국비 833, 군비 208) ○ 향후 소요액 : 874백만원 - 2013년 : 874백만원(국비 699, 군비 175) □ 추진상황 ○ 지붕공사완료 내부수장공사 중 : 2012. 12. 31 ～ 2013. 10. 31. ○ 추진율 : 70% □ 향후계획 ○ 삼계공공도서관 건축공사 준공 : 2013. 10. 31

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	임권택시네마공원 조성사업	담당자	문화관광과 황력봉(☎390-7252)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 천혜의 관광자원인 장성호의 자연환경과 어울리는 휴양․휴식의 관광지개발로 인근 관광명소인 백양사, 남천계곡, 축령산휴양림, 금곡영화마을 등과 연계된 관광지개발로 관광인프라 확충 □ 사업개요 ○ 기간 : 2011 ～ 2014 ○ 위치 : 북하면 쌍웅리 산 68-1번지 ○ 시공사 : 진호건설(주) 대표 최경애 ○ 사업규모 : 연면적 1147㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4500백만원(국비 2,700, 군비 1,800) ○ 지금까지 집행액 : 3,200백만원 - 2011년 : 2,000백만원(국비 1,200 군비 800) - 2012년 : 1,200백만원(국비 700, 군비 500) ○ 향후 소요액 : 1,300백만원 - 2013년 : 500백만원(국비 300, 군비 200) - 2014년 : 800백만원(국비 500, 군비 300) □ 추진상황 ○ 시네마공원 실시설계 : 2012. 3. 20 ～ 2013. 8. 31 ○ 공사착공 : 2012. 12. 28 ～ 2014. 12.27 ○ 추진율 : 70% □ 향후계획 ○ 공사 준공 : 2014. 12. 27

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	북부공공도서관 조성사업	담당자	문화관광과 이승석(☎390-7225)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 장성 북부지역 군민들의 지식정보 욕구 충족 및 다양한 문화활동이 가능한 평생 학습공간 마련을 위한 인프라 구축 □ 사업개요 ○ 기간 : 2013 ～ 2013 ○ 위치 : 북이면 사거리 634번지 외 2필지 ○ 시공사 : 용성종합건설(주) 대표 양병도 ○ 사업규모 : 연면적 609.3㎡(184평) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,340백만원(광특 1600, 군비 740) ○ 2013년 집행액 및 소요액 : 2,340백만원(광특 1,600, 군비 740) □ 추진상황 ○ 북부공공도서관 건립공사 착수 : 2013. 7. 29 ○ 원목 치목작업 등 토목공사 ○ 추진율 : 30% □ 향후계획 ○ 북부공공도서관 건축공사 준공 : 2013. 12..

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	사가지구 지표수 보강개발사업	담당자	안전건설과 김희영(☎390-7445)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 농촌용수가 부족한 지역의 수원공(저수지, 양수장, 취입보 등)의 시설을 확장 보강하여 안정적인 영농생산기반 조성으로 소득증대 기여 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012 ～ 2015 ○ 위 치 : 북이면 사거리 ○ 시 공 사 : ㈜예진종합건설 ○ 사업규모 : 저수지 확장 2개소(조산제, 복룡제) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,900백만원(국비 4,830 군비 2,070) ○ 지금까지 집행액 : 2,500백만원 - 2012년 : 500백만원(국비 350 군비 150) - 2013년 : 2,000백만원(국비 1,400 군비 600) ○ 향후 소요액 : 4,400백만원 - 2014년 : 2,000백만원(국비 1,400 군비 600) - 2015년 : 2,400백만원(국비 1,680 군비 720) □ 추진상황 ○ 사업착수 : 2012. 12. 18 ○ 조산제 여수토 공사중 ○ 추진율 : 25% □ 향후계획 ○ 사업적극 추진하여 공사기간내 사업 마무리

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	농협물류센터 진입도로 개설공사	담당자	친환경농정과 박래철(☎390-7378)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 농협물류센터 건립에 따른 농협물류 공급과 원활한 차량통행을 위한 진입도로 신설과 확장이 필요 ○ 장성읍 IC부터 농협물류센터까지 교통 혼잡과 사고위험 예방 □ 사업개요 ○ 기간 : 2012. 10. ～ 2014. 6. ○ 위치 : 장성군 장성읍 유탕리 지내(보해양조 앞) ○ 사업량 : L=1,020m, B=16 ~22.5m - 진입도로 : L=455 (진입도로 175m 단지내 280m) - 가감속도로 : L=565m (진입도로 175m 구국도1호선 175m) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,200백만원(군비1,100, 도비1,100) ○ 소요액 : 2,200백만원 - 2013년 이후 : 2,200백만원(군비1,100, 도비1,100) □ 추진상황 ○ 실시설계 중 : 2013. 4. ～ 2013. 8. 보상계획 열람공고 : 2013. 8. ○ 추진율 : 10% □ 향후계획 ○ 공사계약심사, 실시계획인가 : 2013. 9. ○ 보상협의 착수, 공사발주 : 2013. 9. ○ 공사준공 : 2014. 6.

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	공공청소년수련관 건립	담당자	주민복지과 임동섭(☎390-7319)
□ 필요성 및 기대효과 ○ (필요성) 청소년의 건전한 인격형성 및 자아개발을 도모하고 창의적 능동적인 청소년육성 ○ (효과) 다양한 교육․문화․체육활동을 통해 공동체 의식 함양, 올바르고 건전한 민주시민으로 성장 □ 사업개요 ○ 사업기간 : 2013. ～ 2015. ○ 위 치 : 장성읍 영천리1469-4 / 3필지 6,043㎡(1,831평) ○ 주요시설 : 상담실, 동아리실, 강당, 청소년상담복지센터 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,000백만원(광특4,800 군비1,200) ○ 지금까지 집행액 : - ○ 향후 소요액 : 6,000백만원 - 2013년 : 1,250백만원(국 1,000, 군 250) - 2014년 : 2,500백만원(국 2,000, 군 500) - 2015년 : 2,250백만원(국 1,800, 군 450) □ 추진상황 ○ 건립부지 확정 및 지방재정투융자 심사완료 : 2012. 9. ○ 공유재산관리계획 의결승인 : 2013. 7. ○ 건립부지 확정 및 감정평가 실시 : 2013. 7. ○ 추진율 : 15% □ 향후계획 ○ 건립부지 매입 : 2013. 9. ○ 청소년수련관 벤치마킹 및 건립위원회 선정 : 2013. 9. ○ 실시설계 용역 발주 : 2013. 10.

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	나노산단 폐수종말처리시설 설치사업	담당자	환경사업소 김양진 (☎390-7536)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 산업단지 내 생산활동으로 인하여 발생되는 오․폐수를 위생적이고 안정적으로 처리하여 인근 방류수역의 수질보전.. □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013 ～ 2015 ○ 위 치 : 진원면 산동리, 남면 삼태리 일원(산업단지 내) ○ 용 역 사 : (주)동호(기본 및 실시설계용역 중) ○ 사 업 량 : 3,000톤/일 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 :18,372 백만원 (국비 12,037, 군비 5,159 원인자 부담금 1,176 ) ○ 지금까지 집행액 : 1,151 백만원 - 2013년 : 1,151백만원 ○ 향후 소요액 : 17,221 백만원 □ 추진상황 ○ 추진단계 : 기본 및 실시설계 용역 중 ○ 추진율 : 6%(용역진도율 : 70%) □ 향후계획 ○ 행정협의 - 재원협의(영산강유역환경청), 설계경제성 검토 실시 - 지방건설심의(전라남도) - 지방계약심사(전라남도) ○ 사업발주 : 2013. 12. □ 사업변경 내역 ○ 토지계획 변경으로 인한 시설용량 조정 등 - 당 초 : 17,425백만원 → 변 경 : 18,372백만원

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	개천지구(북일ㆍ조양) 소규모 하수도정비사업	담당자	환경사업소 이동열 (☎390-7536)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 본 지역은 영산강 상류 북일면 소재지 및 북이면 조양마을 생활하수를 오ㆍ우수 분리하여 차집 처리를 통해 공공수역의 수질보전 및 위생적인 마을환경 조성으로 주민의 삶의 질 향상에 기여 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013. 9 ～ 2015. 2. ○ 위 치 : 북일면 신흥ㆍ박산리, 북이면 조양리 일원 ○ 사업규모 - 오수처리시설 : 145㎥/일(북일 110, 조양 35) - 하수관거 : L=9.5㎞ (북일 5.4, 조양 4.1) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,243백만원(국비 4,370, 군비 1,873) ○ 2013년 사업비 : 3,285백만원(국비 2,300, 군비 985) ○ 향후 소요액 : 2,958백만원(국비 2,070, 군비 888) □ 추진상황 ○ 사업추진에 따른 행정절차 이행중 ○ 추진율 : 10% □ 향후계획 ○ 총괄 및 1차분 발주 : 2013. 9.