농협 장성물류센터 건립사업

○ 농업경제 물류 인프라 및 수도권과 호남권 공급체인망 구축

○ 생활물자, 영농자재 등 농산물 물류 공급능력 확대

❏ 사업 개요

❍ 위    치 : 장성읍 유탕리 일원(보해양조 앞)

❍ 사업규모 : 부지 99,189㎡(2만7천평), 건축면적 47,474㎡(1만5천평)

- 3개 물류센터(농산물 6,477㎡, 농자재 16,531㎡, 생활물자 24,466㎡)

❍ 사 업 비 : 902억원(생활물자 493, 농산물 159, 농자재 250)

❏ 사업추진 현황

○ 장성군과 농협중앙회 간 MOU체결            : ‘12. 2.  8

○ 군 관리계획 수립, 용역시행                  : ‘12. 3. 28

○ 장성군과 농협중앙회 간 보상매입 위·수탁 협약  : ‘12. 9. 23

○ 보상계획 공고 및 열람안내           : ‘12. 12. 24 ~ ’13.  1.  8

○ 토지소유자, 관계인 등 주민설명회 개최       : ‘13. 1. 29

○ 토지소유자 등 보상협의 및 계약체결          : ‘13. 5. 27 ~

○ 협의매수 및 등기이전                        : ‘13. 6.  5 ~

○ 도시관리계획 변경 결정(전라남도)             : ‘13. 6. 13

❏ 앞으로 추진계획

○ 사업시행자지정(장성군→농협중앙회)           : ‘13. 9.

○ 부지조성 및 기반시설 정비 공사               : ‘13. 9. ~ ’14. 4.

○ 건축공사 착공                                : ‘14. 5. ~ ’15. 2.

○ 농협 물류센터 개장                           : ‘15. 상반기

위  치  도