신평지구 신규(전원)마을 조성사업

농촌지역에 쾌적하고 다양한 형태의 주거공간을 조성하여 도시민의    농촌 유입을 촉진함으로써 농촌지역 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 장성군 북이면 신평리 315-1번지 외 1필지

❍ 면    적 : 28,078㎡(31세대)

❍ 총사업비 : 83억원(국비 13, 도비 2억, 군비 68)

- 기반시설 18억원, 진입도로 9억원, 주택건축 56억원

- ‘13년까지 예산확보 : 12억(국비2, 도비 2, 군비 8)

❍ 조성기간 : 2012 ~ 2016

❍ 개발방식 : 공공기관 주도형

□ 사업추진 현황

❍ 신규전원마을 기본계획 수립 용역 완료	:	‘12. 2. 28
❍ 신규전원마을 공모신청(농식품부)	:	‘12. 3. 5
❍ 신규 전원마을 공모선정(농식품부)	:	‘12. 6. 30
❍ 기반시설 실시설계 용역 착수	:	‘13. 5. 21

□ 앞으로 추진계획

❍ 마을정비구역 지정신청(전남도)	:	‘13. 9.
❍ 기반시설 실시설계 용역 완료	:	‘13. 10.
❍ 전원마을 택지 분양 착수	:	‘13. 10.
❍ 기반시설 조성사업 착공	:	‘13. 11.
❍ 기반시설 조성사업 준공	:	‘14. 10.

위  치  도

조  감  도