월평처리구역 하수관거 정비사업

영산강 상류 황룡강과 연접한 황룡강 소재지 합류식 하수도를 분류식으로 정비하여 영산강 공공수역의 수질보전 및 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 장성군 황룡면 지내

❍ 사 업 량 : 오수관로 L=12.9km, 우수관로 L=3.8km, 배수설비 L=15.0km

❍ 총사업비 : 16,733백만원(국비 11,713 군비 5,020)

❍ 시 공 사 : 남해종합개발

❍ 사업기간 : 2012 ~ 2015

□ 사업추진 현황

❍ 2012년도(1차분) 사업 추진           : ‘12.  7. ~ ’13.  4.

- 사업량 : 오수관로 매설 L=741m(D=200~600㎜)

- 사업비 : 1,673백만원(국비 1,171  군비 502)

- 공정율 : 100%

❍ 2013년도(2차분) 사업 추진           : ‘13.  3. ~ ’13. 12.

- 사업량 : 오수관로 매설 L=880m(D=400~600㎜)

- 사업비 : 2,258백만원(국비 1,581  군비 677)

- 공정율 : 85%

□ 앞으로 추진계획

❍ 사업량 : 오수관로 매설 L=11.3㎞(D=200~600㎜)

우수관로 매설 L= 3.8㎞(관로 1.6㎞, 박스 2.2㎞)

❍ 사업비 : 12,802백만원(국비 8,961  군비 3,841)

위  치  도