덕진천 재해위험지구 정비사업

❍ 덕진천은 미 개수하천으로 통수단면 및 교량규모 부족(계획고 미달, 연장부족)으로 집중호우시 제방 범람으로 마을 및 농경지 피해가 잦은 하천으로 재해위험지구로 지정(2010.5.17) 관리되었음

❍ 하천 통수단면 확장, 호안정비,교량 재가설 등을 통하여 농경지 및 주택침수 등 피해예방

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2012. ~ 2016.

❍ 위    치 : 장성읍 상오리, 덕진리 일원

❍ 사 업 비 : 15,291백만원(국비 9,175,  군비 6,116)

❍ 사업규모 : 교량 5개소 재가설, 축제 및 호안정비 2.17㎞

□ 추진실적

❍ 사전설계검토 및 지방건설기술 심의            : 2013.  8. 20.

❍ 전라남도 계약심사                            : 2013.  9. 23.

❍ 분할측량 추진                                : 2013.  9. 26.

❍ 설계 경제성 검토                             : 2013.  9. 28.

❍ 보상계획 열람공고                            : 2013. 10.  8.

❍ 문화재 지표조사 등 행정절차 이행             : 2013. 10. 26.

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 투자현황 (단위 : 백만원)
	합 계	‘12년 이전	‘13년	‘14년	‘15년 이후
사업비	15,291	300	2,000	5,753	7,238

□ 기대효과

❍ 재해위험시설 정비로 재해를 사전에 예방

위  치  도