【붙임4】개별 투․융자 심사 사업 추진현황

사업명

피톤치드 체험랜드 조성사업

담당자

문화관광과 황력봉(☎390-7252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 홍길동테마파크 및 축령산 휴양림을 찾는 관광객들이 매년 늘어남에

따라 주변에 숙박, 체험 및 휴식공간이 부족함에 따라,

○ 편백나무 피톤치드 및 효소액을 활용한 찜질체험 및 휴식공간을 제공

하고 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2014

○ 위 치 : 장성군 황룡면 아곡리 46-1번지 일원

○ 규 모 : 1차공사 – 교실 리모델링 공사, 지상1층, 연면적 500㎡

2차공사 – 피톤치드효소액 체험장, 지상2층, 연면적 941㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원(국비 2,400  군비 2,100)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,500	1,600	2,300	600	-
국 비	2,400	600	1,400	400
시 도 비
시군구비	2,100	1,000	900	200	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 76 %)

○ 1차 공사 - 교실리모델링공사(수련,숙박시설 조성) : ‘12. 6. ~ ’13. 3.

○ 2차 공사 - 피톤치드효소액체험장(목욕장) : ‘13. 12. ~’14. 8.

□ 향후계획

○ 피톤치드효소액 체험장 준공 : ‘14. 9.

○ 피톤치드효소액 체험장 개장 : ‘14. 10.

사업명

삼계 공공도서관 건립

담당자

문화관광과 오진숙(☎390-7226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 도심지역으로부터 원거리에 위치한 삼계지역은 교육․문화시설

인프라가 열악함은 물론 문화적 혜택으로부터 소외된 전형적인 농촌지역임

○ 지역 주민과 학생들에게 학습공간 및 다양한 정보와 문화를 향유할 수 있는 생활밀착형 공공 도서관 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2013

○ 위 치 : 장성군 삼계면 사창리 427-7

○ 규 모 : 1동 2층, 629.16㎡(190평), 어린이열람실,성인열람실,서고,커뮤니티실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,600  군비 400)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,000	43	1,957		-
국 비	1,600	34	1,566
시 도 비
시군구비	400	9	391		-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 삼계 도서관 개관 : 2013. 12.

사업명

임권택시네마테크 조성사업

담당자

문화관광과 황력봉(☎390-7252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계적인 영화감독 임권택 감독과 연계한 「시네마공원」을 조성하여

장성호관광지의 상징성을 강화하고 영화의 상영·체험·교육 등 다양한

콘텐츠를 개발하여 관광인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. ~ 2015.

○ 위 치 : 장성군 북하면 쌍웅리 산68-1번지 일원(A=14,650㎡)

○ 규 모 : 본관동 - 지상4층, 연면적 1,523㎡

캠프동 - 지상1층, 연면적 306㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원(국비 2,700  군비 1,800)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,500	3,160	500	250	590
국 비	2,700	1,900	300	150	350
시 도 비
시군구비	1,800	1,260	200	100	240
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 87%)

○ 1차공사 : 본관동 - ‘12. 12. ~ ’14. 3.

○ 2차공사 : 캠프동 - ‘13. 12. ~ ’15. 6.

□ 향후계획

○ 2차공사인 캠프동 공사기간 연장

- ‘15년 예산 미확보(국비350백만원)에 따라 사업기간 연장

사업명

북부 공공도서관 건립

담당자

문화관광과 오진숙(☎390-7226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 도심지역으로부터 원거리에 위치한 북부지역은 교육․문화시설

인프라가 열악함은 물론 문화적 혜택으로부터 소외된 전형적인 농촌지역임

○ 지역 주민과 학생들에게 학습공간 및 다양한 정보와 문화를 향유할 수 있는 생활밀착형 공공 도서관 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013.

○ 위 치 : 장성군 북이면 사거리

○ 규 모 : 1동1층, 609.3㎡(184평), 어린이열람실, 성인열람실, 문화교실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,340백만원(국비 1,600  군비 740)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,340		2,273		-
국 비	1,600		1,546
시 도 비
시군구비	740		727		-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 북부(북이) 도서관 개관 : 2014. 3.

사업명

문화예술회관 대공연장 내부공사

담당자

문화관광과 이승석(☎390-7225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화예술 공연의 활성화 및 대규모 행사 유치를 위한 문화예술 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1 ~ 2015. 12

○ 위 치 : 장성군 장성읍 기산리 388번지 일원 문화예술회관 내

○ 규 모 : 대공연장 조성(무대기계, 전기음향, 무대조명 설치)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,200백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	25,200	19,800	2,400	0	3,000
국 비	2,000	2,000	-	-	-
시 도 비	200	200	-	-	-
시군구비	21,500	16,100	2,400	-	3,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,500	1,500	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘13. 02. 19 : 지방재정 투융자심사

○ ‘13. 04. 30 : 계약심의위원회 개최

○ ‘13. 5. ~  8 : 대공연장 내부공사 실시설계 추진

○ ‘13. 9. ~ 10 : 대공연장 1차분 내부공사 실시설계 계약심사

○ ‘13. 11.  3 : 대공연장 1차분 내부공사 사업 입찰공고

○ ‘13. 12.  2 : 대공연장 1차분 내부공사 사업 추진

□ 향후계획

○ ‘14.  3월 : 대공연장 1차분 내부공사 준공

○ ‘14. 11월 : 2015년 본예산 확보(30억)

○ ‘15.  1월 : 대공연장 2차분 내부 사업 사업추진

○ ‘15.  5월 : 대공연장 2차분 내부 사업 준공

사업명

국민체육센터 수영장 건립

담당자

문화관광과 배태영(☎ 390-7228)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 건강증진과 여가 선용을 위한 휴식공간 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013. 7. ~ 2014. 11.

❍ 위    치 : 장성읍 기산리 135-1 지내

❍ 시설규모 : 지하1층, 지상 2층, 연면적 2,450㎡

❍ 시설현황 : 수영장(25m × 6레인), 유아풀, 스파풀, 체력단련실

휴게실, 파우더실, 샤워실 등

❍ 사 업 비 : 6,632백만원(기금 3,200, 군비 3,432)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 6,632백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,632	500	3,500	2,632
국 비	3,200	200	2,500	500
시 도 비
시군구비	3,432	300	1,000	2,132
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%

❍ 국민체육진흥기금 생활체육시설 지원사업 확정    : 2012. 2. 24.

❍ 공사계약 및 착공                                  : 2013.  7.  2.

❍ 수영장 운영을 위한 벤치마킹                       : 2014.  2. 21.

❍ 수영장 운영조례 제정                             : 2014.  6. 27.

□ 향후계획

❍ 공사준공 및 시험 운영                         : 2014. 10.

❍ 수영장 개장                               : 2014. 11.

사업명

청소년수련관 건립

담당자

주민복지과 차칠숙(☎390-7052)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년 활동공간 확충으로 청소년들의 건전육성 기반조성과 청소년

전용 정보․문화․휴식공간 마련으로 문화의 질 향상

○ 다양한 욕구표현의 장을 제공하여 정서함양 및 자질배양 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2015. 12.(3개년)

○ 위    치 : 장성읍 영천리1487-10외 1(국민건강보험공단 뒤편)

○ 대지면적 : 3,567㎡,  연건축면적 : 3,024㎡

○ 건축규모 : 지하1층, 지상3층,    건축구조 : 철근콘크리트조

○ 주요시설 : 체육활동장, 실내집회장, 자치활동실, 상담실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,800,  군비 1,200) ※광․특

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,000		1,228		4,772
국 비	4,800		982		3,818
시 도 비
시군구비	1,200		246		954
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 청소년수련관 부지매입	: 2013. 11.

○ 지방재정 투융자 재심사 및 공유재산 관리계획 변경 승인	: 2013. 11.

□ 향후계획

○ 청소년수련관 건축 설계공모	: 2014.  3.

○ 청소년수련관 건립사업 기본 및 실시설계	: 2014.  4.

○ 청소년수련관 기본 및 실시설계 완료	: 2014.  9.

○ 청소년수련관 사업발주	: 2014. 10.

사업명

장애인종합복지관 건립

담당자

주민복지과 고학주(☎390-7047)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인에게 종합재활서비스를 제공하여 장애인의 잠재능력을 개발, 지원

하며, 재활자립과 다양한 프로그램을 제공하여 장애인 복지증진 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 7. ~ 2015. 7.

○ 위    치 : 장성읍 기산리 489-1외 2필지(공립노인요양병원 옆)

○ 규    모 : 부지 5,420㎡(1,640평), 건물 1,504㎡(455평), 지상2층

○ 주요시설 : 물리치료실, 프로그램실, 주간보호실, 직업재활실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,990백만원<원전기금(도비) 2,780  군비 2,210>

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,990		1,100	2,150	1,740
국 비
시 도 비	2,780			1,040	1,740
시군구비	2,210		1,100	1,110
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 건립부지 확정(노인전문병원 부근)	: 2012.  9. 13.

○ 공유재산관리계획 의결승인	: 2012. 11. 10.

○ 건립공사 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2013.  9. 23.

○ 건립부지 매입(5억)	: 2013. 11. 19.

○ 지방재정 투․융자심사 승인(도 심사)	: 2013. 12. 11.

□ 향후계획

○ 건립공사 실시설계 용역 보고회	: 2014. 3.

○ 전남도 공공디자인심의	: 2014. 6.

○ 전남도 계약심사	: 2014. 8.

○ 건립공사 착공	: 2014. 8.

사업명

삼계면사무소 이전 건립

담당자

재무과 정창래(☎390-7274)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼계면민의 오랜 염원인 삼계면사무소의 이전 건립을 통해 지역 공동체

의 구심적 역할 수행

○ 양질의 행정 서비스 제공으로 지역 주민들의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2011 ∼ 2013

○ 위    치 : 삼계면 사창리 427-10

○ 사업규모 : 면사무소 1동 (연면적 : 950.99 ㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,338백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,338	205	3,133	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	2,338	205	2,133
지 방 채	1,000	-	1,000
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도시계획시설결정용역 : 2011.5월 ∼ 2012. 5월

○ 토지매입 및 설계     : 2011.7월 ∼ 2012. 12월

○ 건축공사             : 2012.12월 ∼ 2013. 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

황룡강 생태학습장 조성사업

담당자

환경위생과 정원식(☎390-7345)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생태하천․경관하천으로 조성으로 관광명소 활성화를 통하여 주민소득

증대 및 지역균형발전 등 간접적 수익성 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 6 ~ 2013. 5

○ 위    치 : 장성군 황룡면 지내

○ 시 공 사 : 청호종합건설

○ 사업규모 : 수질개선시설 1식, 탐방로 389m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,100백만원(국비 5,970   군비 4,130)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	1,250	1,000	250	-	-
국 비	750	600	150	-	-
시 도 비
시군구비	500	400	100	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사완료 : 2012. 6. 28 ~ 2013. 5. 28.

□ 사업변경 내역

○ 당초

- 사업규모 : L=13.5km(물억새관찰원, 습지 및 친수공간, 식물관찰공간 조성)

- 총사업비 : 10,100백만원(국비 5,970   군비 4,130)

- 사업기간 : 2009 ~ 2018

○ 변경

- 사업규모 : L=0.2km(수질개선시설, 탐방로 389m)

- 총사업비 : 1,250백만원(국비 750   군비 500)

- 사업기간 : 2009 ~ 2013

⇒ 변경사유 : 2012년 황룡강 생태하천 복원사업(환경부) 확정으로 사업

구간이 중복되어 사업축소

사업명

황룡강 생태하천 복원사업

담당자

환경위생과 정원식(☎390-7345)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방 하천인 황룡강의 치수 및 이수기능을 유지하면서, 자연성 회복으로 수질개선 및 쾌적한 수환경과 하천환경의 조성으로 공공 오픈스페이스로서의 기능 활성화를 도모하고, 친수 기능 회복을 통한 시민에게 친숙하고 쾌적한 생활공간을 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 6 ~ 2017. 12.

○ 위    치 : 장성군 황룡면 옥정리 ~ 장성읍 용강리 일원

○ 시 공 사 : ㈜영무토건

○ 사업규모 : 생태하천 복원 L=9.5km

- 어도 개․보수, 자연형 여울보, 하도정비, 생태탐방로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,700백만원(국비 17,200 군비 11,500)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	28,700	700	2,000	9,500	16,500
국 비	17,200	300	1,500	5,700	9,700
시 도 비
시군구비	11,500	400	500	3,800	6,800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2012. 8. 20 ~ 2014. 2. 14

○ 투․융자 심사 : 2013. 8. 1

□ 향후계획

○ 원가심사 : 2014. 1월

○ 공사 사업수행능력평가 : 2014. 2 ~ 3월

○ 공사 착공 : 2014. 6월

사업명

개천 생태하천 복원사업

담당자

환경위생과 정원식(☎390-7345)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방 하천인 개천의 치수 및 이수기능을 유지하면서, 자연성 회복으로 수질개선 및 쾌적한 수환경과 하천환경의 조성으로 공공 오픈 스페이스로서의 기능 활성화를 도모하고, 친수 기능 회복을 통한 시민에게 친숙하고 쾌적한 생활공간을 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 5 ~ 2017. 12.

○ 위    치 : 장성군 장성읍(황룡강 합류지점) ~ 북이면 원덕리 원덕교(L=19.0km)

○ 사업규모 : 생태하천 복원 L=17.4km

- 어도, 자연형 여울보, 호안정비, 식생복원, 동식물 서식처 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,400백만원(국비 15,200, 군비 10,200)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	25,400		800	7,000	17,600
국 비	15,200		500	4,200	10,500
시 도 비
시군구비	10,200		300	2,800	7,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2013. 5. 6 ~ 2014. 4. 15.

○ 환경영향평가 : 2013. 5. 21 ~ 2014. 7. 30.

□ 향후계획

○ 주민설명회 : 2014. 1월

○ 원가심사 및 사업수행능력평가 : 2014. 4 ~ 5월

○ 공사착공 : 2014. 6월

사업명

북일지구 비점오염 저감사업

담당자

환경위생과 정원식(☎390-7345)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북일면 신흥리, 북이면 사거리에서 강우시 발생하는 비점오염원에 대한

적절한 저감시설이 전무한 실정

○ 비점오염저감 사업의 효과를 극대화하고 수질개선 및 하천 수생태계 건강성 회복을 위해 필요

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 9 ~ 2014. 12.

○ 위    치 : 장성군 북일면 신흥리, 북이면 신월리

○ 사업규모 : 인공습지 조성 2개소(A=21,595㎡) - 북일 4,927 , 북이 16,668

※ 북일, 북이면 소재지의 비점오염원을 1차 처리하기 위한 인공 습지 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,400백만원(국비 15,200   군비 10,200)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,770		1,000	2,770
국 비	1,885		500	1,385
시 도 비
시군구비	1,885		500	1,385
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2013. 2. 19 ~ 8. 19.

○ 공사착공 : 2013. 10. 4.

□ 향후계획

○ 공사 추진(2차분) : 2014. 1 ~ 10월

○ 시운전, 유지관리 : 2014. 7 ~ 10월

사업명

호남권 농협물류센터 진입도로 개설

담당자

경관도시과 이광준(☎061-390-7471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호남권 농협물류센터 건립에 따른 원활한 물류수송과 안전한 통행환경

조성을 위해 진입도로 개설공사를 시행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 7.31. ~ 2014.12.10

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 유탕리 지내(국도1호선~구국도 1호선)

○ 규 모 : 도로개설 L=910m, B=16~22.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,200		280	1,920
국 비
시 도 비	1,100		140	960
시군구비	1,100		140	960
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 토지보상 79% 완료(총 25필지 4,377중, 협의보상 21필지 3,501㎡)

○ 공정율 40%(배수공 및 상수도공 완료, 기층 조성 중)

□ 향후계획

○ 미협의 토지 공탁                        : ‘14.  8. 11.

○ 공사 준공                               : ‘14. 12. 10.

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

축령산휴양타운 조성사업

담당자

산림축산과 배영식(☎390-7069)

□ 사업목적 및 필요성

○ 축령산을 방문하는 산림치유ㆍ휴양객 수요 증가로 부족한 숙박시설 및        편익시설 확충

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011. 12월 ~ 2015. 9월

○ 위  치 : 장성군 서삼면 대덕리 산28번지외 1필

○ 규  모 : 306,843㎡(부지매입, 숙박시설 12동, 진입로개설, 기타 편익시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,900	20	1,340	300	2,240
국 비
시 도 비	3,900	20	1,340	300	2,240
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 부지매입(사유림 306,843㎡)                      : 2013. 11월

□ 향후계획

○ 개발촉진지구 지정변경(안) 승인 신청(전라남도)    : 2014. 7월

○ 개발촉진지구 지정변경 및 개발계획(안) 지형도면 고시 : 2014. 9월

○ 휴양타운조성 사업 실시설계용역 시행               : 2014. 9월

○ 사업 발주 및 준공                                   : 2014. 10 ~2015. 9월

□ 사업변경 내역 : 사업기간 연장 사업규모 확대

○ 당    초

- 사업기간 : 2011~2014(4년간)        - 사업규모 : 숙박시설 10동

○ 변    경

- 사업기간 : 2011 ~ 2015년(5년간)    - 사업규모 : 숙박시설 12동

사업명

친환경 고품질 장성잔디 명품화사업

담당자

산림축산과 변인섭(☎390-7070)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국최대의 잔디생산지인 장성잔디의 품질을 향상시키고

○ 가공, 물류자동화시스템, 테마공원을 조성하여 6차산업화로 소득증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년

○ 위 치 : 장성군 삼서면 수양리, 삼계면 월연리 일원

○ 규 모 : 가공시설 및 물류자동화시스템 1개소, 테마공원 2개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,000		68	1,752	1,180
국 비	1,500		43	757	700
도 비	180		5	91	84
군 비	720		20	434	266
지 방 채
민간자본	600		0	470	130
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 경상보조사업 용역 2건 추진 중, 진도는 약 30%

○ 자본보조사업은 위치선정 완료, 이전절차 추진 중

□ 향후계획

○ 경상보조사업은 계획대로 추진할 계획이며

○ 자본보조사업은 토지 이전 후 설계착수 및 심사 후 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

가축분뇨 공동자원화사업(액비화)

담당자

산림축산과 박종열(☎390-7071)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가축분뇨 해양배출 금지(‘12.1.1), 환경규제 강화 등에 따라 자원화시설

확충, 작목별 맞춤형 고품질 액비 생산․유통․관리체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1 ~ 2013. 12

○ 위 치 : 전남 장성군 삼서면 대도리 산146

○ 규 모 : 70톤/1일(돈분 70톤)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,000	-	3,000	-	-
국 비	1,200	-	1,200	-	-
시 도 비	135	-	135	-	-
시군구비	765	-	765	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(융자)	900	-	900	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 준공 완료

- 액비화 저장탱크 1,478㎡, 주건축물□관리사□소독시설 475㎡

□ 향후계획

○ 사후관리 10년

○ 전담 책임자 지정, 자체 관리카드 작성 관리

○ 연2회 자체점검 실시 등

사업명

가축분뇨 공동자원화사업(퇴비화)

담당자

산림축산과 박종열(☎390-7071)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가축분뇨 해양배출 금지(‘12.1.1), 환경규제 강화 등에 따라 자원화시설

확충, 작목별 맞춤형 고품질 퇴비 생산․유통․관리체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 7. ~ 2014. 12

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 안평리 701-1번지외 11필지

○ 규 모 :  철근콘크리트 철골조(최첨단 밀폐형), 70톤/1일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,000	-	1,050	1,950	-
국 비	1,200	-	342	858	-
시 도 비	135	-	42	93	-
시군구비	765	-	216	549	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기타(융자)	900	-	450	450	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 건축공사 : 90%

○ 기계설비 : 80%

□ 향후계획

○ 사업주와 주민간 제3자를 통한 협의체 구성

○ 주민설명회 개최

사업명

사거리 전통시장 시설현대화

담당자

지역경제과 손진영☎390-7353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시장 및 편의시설이 낙후되어 재래시장 방문객 감소

○ 전통과 현대적 디자인이 결합된 전통시장 현대화 시설로

외부 고객 유치와 이용객의 편의성 제고로 시장 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

○ 위 치 : 장성군 북이면 사거리 697-2

○ 규 모 : 식당 270㎡(5칸), 특산물 및 점포 216㎡(4칸), 사무실 54㎡,

화장실 54㎡, 5일장 장옥(10동 48칸) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,000	1,370	1,596	2,034
국 비	3,200	961	972	1,267
시군구비	1,800	409	624	767

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 시설현대화 연구용역 실시(시장경영진흥원) : 2011. 6. 8. ~ 12. 30.

○ 지방재정 투융자사업 심사(도)             : 2011. 10. 18.

○ 기본 및 실시설계 용역                    : 2013.  4.  8.

○ 도 계약 심사(건축, 토목, 기계)            : 2013.  5. 27.

○ 건축, 토목 등 공사 착공                  : 2013.  6. 24.

○ 국토교통부 사업 인정고시 신청            : 2013. 12. 9.

□ 향후계획

○ 사업 인정 열람 공고(3. 1 ~ 3. 14)          : 2014.  2.

○ 사업인정 고시(국토교통부)                : 2014.  6.

○ 보상 재평가 완료                          : 2014.  7.

○ 보상협의                                  : 2014.  8.

○ 미 협의필지 수용 재결 신청                : 2014.  8.

○ 미 협의필지 수용 후 공사추진              : 2014. 12.

사업명

사가지구 지표수 보강개발사업

담당자

안전건설과 김명욱 (☎390-7445)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설노후 및 저수용량이 부족한 저수지에 대한 보강사업을 통해 안정된

수자원 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1 ~ 2015. 12

○ 위 치 : 장성군 북이면 사거리 일원

○ 규 모 : 저수지 2개소(조산제, 복룡제)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,900	500	2,000	2,000	2,400
국 비	4,830	350	1,400	1,400	1,680
시 도 비
시군구비	2,070	150	600	600	720
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 56%)

○ 조산제 : 제당 성토, 여·수방수로 설치, 복통·사통 설치, 진입도로 설치

□ 향후계획

○ 조산제 : 용수관로 설치

○ 복룡제 : 제당 성토, 여·수방수로 설치, 복통·사통 설치, 진입도로 설치, 양수장 설치

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 감
사 업 규 모	저수지 2개소	저수지 2개소	-
총사업비(백만원)	6,300	6,900	증 600
사 업 기 간	2012. 1 ~ 2014. 12	2012. 1 ~ 2015. 12	증 1년
변 경 사 유	○ 총사업비 : 시행계획 수립시 사업비 변경 승인(전남도) ○ 사업기간 : 국비지원사업으로 지원사업기간 연장에 따른 변경

사업명

서부권(동화,황룡), 읍지역 상수도시설

확충사업

담당자

경관도시과 강홍권(☎390-7525)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 서부권(동화면,황룡면) 및 읍지역(서삼면) 주민들의 식수난 해소

○ 안정적인 생활용수 확보로 농촌주거환경 개선

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011. 3 ~ 2014. 12

○ 위    치 : 장성군 동화면, 황룡면, 서삼면 일원

○ 사업규모 : 배수관로 L=52.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,700백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	8,700	4,840	400	3,460	-
지 방 채	-	-	-	-	-
국 비	6,100	3,400	300	2,400	-
시 도 비	1,337	400	10	360	-
시군구비	1,263	1,040	90	700	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 87%)

○ 배수관로 L=45.0km 완료

- 2014년까지 동화면, 황룡면 완료

○ 현 공정율 : 87%

□ 향후계획

○ 2015년까지 서부권(동화, 황룡, 서삼) 80% 이상 상수도 공급 완료

사업명

유평지구 테마공원 조성

담당자

미래전략과 김건우(☎390-7468)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성사과테마공원을 조성하여 주민과 도시민에게 자연친화적인 휴식‧

레저‧체험공간을 제공하여 도농교류 확대 및 소득원의 거점 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2014

○ 위 치 : 장성군 삼서면 유평리 지내

○ 규 모 : 81,377㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,000	3,030	2,000	970
국 비	3,000	1,515	1,000	485
시 도 비
시군구비	3,000	1,515	1,000	485
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  80%)

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 시행계획 승인 고시  : 2012.  5. 24.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 착공(총괄 및 1차)    : 2012.  4. 30.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 준공(1차)            : 2013.  6. 15.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 착공(2차)            : 2013.  3. 22.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 착공(3차분)          : 2013. 12. 30.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 준공(2차)            : 2013.  6. 10.

□ 향후계획

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 전시시설물 착공    : 2014. 8.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 준공(3차분)         : 2014. 8. 27.

사업명

장성 하수종말 처리시설

고도처리 개선공사

담당자

환경사업소 김정윤(☎390-8548)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주처리공법을 고도처리공법으로 개선하여 강화되는 방류수 수질기준 만족

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 7. ~ 2014. 1. 23.

○ 위 치 : 황룡면 환경사업소 지내

○ 규 모 : 하수처리량 11,000㎥/1일

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,031백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	12,031	5,329	6,702
국 비	8,751	3,069	5,682
시 도 비	449	194	255
시군구비	2,831	2,066	765
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 공사착공(총괄)                                   : 2011. 7.

○ 고도처리 개선사업 1계열 공사완료                 : 2012. 11.

○ 2계열 공사 착공(토목, 기계, 전기)                 : 2013. 3.

○ 2계열 공사 완료                                  : 2013. 10. 24.

○ 종합 시운전(1계열, 2계열)실시                     : 2013. 10. 25.

□ 향후계획

○ 공사 준공                                        : 2014. 1.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

장성 하수종말 처리시설

방류수 재이용사업

담당자

환경사업소 김정윤(☎390-8548)

□ 사업목적 및 필요성

○ 방류수 재이용으로 물 부족지역 한발 대비 및 농업용수 해결

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 5. 9. ~ 2013. 12. 3

○ 위 치 : 황룡면 와룡리, 남면 덕성리 지내

○ 규 모 : 재이용량 4,000㎥/day

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,600	1,259	1,341
국 비	1,656	972	984
시 도 비	201	85	116
시군구비	743	502	241
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 재원협의완료(영상강유역환경청)                  : 2011. 5.

○ 도 계약심사 완료                               : 2011. 11.

○ 공사 착공                                      : 2012. 5.

○ 재이용(토목, 기계, 전기 등)시설공사 완료         : 2013. 11.

○ 시운전 실시                                    : 2013. 11.

○ 방류수 재이용사업 준공                          : 2013. 12. 3.

사업명

나노산단 폐수종말처리시설

설치사업

담당자

환경사업소 김정윤(☎390-8548)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나노기술 일반산업단지에서 발생되는 공장폐수 및 생활오수를 처리하여       방류함으로써 공공수역의 수질보전과 쾌적한 생활환경을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ~ 2015.

○ 위 치 : 전남 장성군 진원면 산동리, 남면 삼태리 일원(산업단지내)

○ 규 모 : 3,000㎥/day(1단계 : 1,500㎥/day, 2단계 : 1,500㎥/day)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,372백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	18,372	302.4	0.5	6,221.1	11,848
국 비	12,037			4,262	7,775
시 도 비
시군구비	6,335	302.4	0.5	1,959.1	4,073
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수                        : 2009. 2.

○ 기본계획 승인 완료(영산강유역환경청)              : 2013. 2.

○ 폐수종말처리시설 공법 선정 완료                   : 2013. 7.

○ 폐수종말처리시설 주요기자재 선정 완료             : 2013. 11.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 재원협의 요청                    : 2014. 1.

○ 기본 및 실시설계 재원협의 완료                    : 2014. 9.

○ 지방건설심의(전라남도)                             : 2014. 9.

○ 기본 및 실시설계 용역 완료                        : 2014. 10.

○ 계약심사(전라남도)                                 : 2014. 10.

○ 사업발주                                          : 2014. 10.

사업명

북하지구 소규모하수도 정비사업

담당자

환경사업소 이동열(☎390-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영산강 상류지역에 위치한 북하면 약수·중평리 일원에 하수처리시설이 설치

되지 않아 마을하수가 북하천으로 방류되어 수질 악화에 따른 사업필요

○ 마을하수 적정 처리로 공공수역의 수질보전 및 토양ㆍ지하수 오염방지로

주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 5. 24 ~ 2013. 4. 25

○ 위 치 : 북하면 약수·중평리 일원

○ 규 모 : 오수처리시설 150㎥/일, 오수관로 L=5.3㎞(D200~250)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,079백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,079	2,636	443
국 비	2,052	1,742	310
시군구비	1,027	894	133

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사업추진 완료 : 2011. 5. 24 ~ 2013. 4. 25(추진율 100%)

사업명

개천지구(북일·조양) 소규모

하수도 정비사업

담당자

환경사업소 이동열(☎390-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영산강 상류지역에 위치한 북일면 신흥·박산리, 북이면 조양리 일원에 하수처리

시설이 설치되지 않아 마을하수가 개천으로 방류되어 수질 악화에 따른 사업필요

○ 마을하수 적정 처리로 공공수역의 수질보전 및 토양ㆍ지하수 오염방지로

주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 11. 20 ~ 2015. 5. 19.

○ 위 치 : 북일면 신흥·박산리, 북이면 조양리

○ 규 모 : 오수처리시설 145㎥/일(북일 110, 조양 35)

오 수  관 로 L=9.5㎞(북일 5.4, 조양 4.1)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,243백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,243		3,286	2,957
국 비	4,370		2,300	2,070
시 도 비
시군구비	1,873		986	887
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도율 : 40%)

○ 2013년 1차분 사업추진 : 2013. 11. 20 ~ 2014. 11. 19(추진비율 45%)

□ 향후계획

○ 2014년 2차분 사업추진 : 2014.  3. 12 ~ 2015.  5. 19(추진비율 35%)

사업명

월평처리구역 하수관거 정비사업

담당자

환경사업소 김양진(☎390-8551)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황룡면 월평리 시가지에 설치되어 있는 합류식 하수관거를 분류식화하여 토양,  지하수 및 하천을 보호함으로써 지역민들에게 쾌적한 생활환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 7. ~ 2015. 12.

○ 위 치 : 황룡면 월평리 일원

○ 규 모 : 하수관거 정비 L=16.7㎞, 배수설비 483가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,733백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	16,733	1,974	2,258	5,120	7,381
국 비	11,713	1,171	1,581	3,584	5,377
군 비	5,020	803	677	1,536	2,004

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  32 %)

○ 2012년도(1차분) 사업 추진 완료 : 2012. 7. ~ 2013.  4.

- 사업량 : 현장사무실 및 자재창고 설치 1식

오수관로(차집관로) 매설 L=740m(D=200~600mm)

○ 2013년도(2차분) 사업 추진 완료 : 2013. 3. ~ 2013. 11.

- 사업량 : 오수관로(차집관로) 매설 L=882m(D=250~600mm)

□ 향후계획

○ 2014년도(3차분) 사업추진        : 2014. 3. ~ 2015. 3.

- 사업량 : 오수관로 L=2.1km (D=100~600㎜)

오수 중계펌프장 1개소, 배수설비 483가구