11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 장성군에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
피톤치드 체험랜드 조성	4,500	3,823	677	-	2015	2011	100%
임권택 시네마테크 조성	4,500	3,660	250	590	2015	2011	90%
장성군 군민체육센터 수영장 건립	6,632	4,000	2,632	-	2014	2012	75%
북부 공공도서관 건립	2,340	1,822	448	70	2014	2012	100%
문화예술회관 대공연장 내부공사	6,500	3,000	3,500	-	2015	2013	70%
공공청소년 수련관 건립	6,000	1,228	-	4,772	2015	2013	30%
장애인 통합사회복지관 건립	4,990	1,100	2,150	1,740	2015	2013	30%
황룡강 생태하천 복원	28,700	1,057	1,721	25,922	2017	2013	35%
개천 생태하천 복원	25,400	833	1,917	22,650	2017	2013	36%
농협물류센터 진입도로 개설	3,000	1,100	1,900	-	2015	2012	100%
축령산 휴양타운 조성	4,200	1,506	264	2,430	2016	2013	50%
친환경고품질 장성잔디 명품화	3,000	27	305	2,668	2015	2013	32%
가축분뇨공동자원화(퇴비화)	3,000	1,500	500	1,000	2014	2013	100%
사거리시장 시설현대화	5,000	2,966	1,683	351	2015	2011	90%
사가지구 지표수 보강개발	6,900	500	2,000	4,400	2015	2012	60%
유평지구 테마공원 조성	6,000	3,030	2,020	950	2015	2010	97%
월평처리구역 하수관거 정비	16,733	4,232	5,120	7,381	2016	2011	73%
나노산단 폐수종말처리 시설설치	17,129	-	-	17,129	2016	2012	15%

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
개천지구(북일,조양) 소규모하수도 정비사업	6,243	3,286	2,957	-	2015	2012	100%
서부권(동화,황룡),읍 지역상수도 시설확충	8,700	5,240	3,460	-	2014	2010	100%
장산처리구역 하수도 정비	5,070	-	214	4,856	2017	2014	20%
거마소하천 정비	3,095	95	1,697	1,398	2016	2014	85%
백암지구 소규모 하수도 정비	2,700	-	714	1,989	2016	2014	15%
북하지구 지방상수도 조성	7,240	-	714	6,526	2017	2014	30%
덕산지구 지표수 보강개발	8,133	-	220	7,913	2018	2014	15%
아곡소하천 정비	2,500	-	-	2,500	2016	2014	85%
이암지구 소규모 하수도 정비	3,110	-	-	3,110	2016	2014	20%