【붙임2】개별 투자 심사사업 추진현황

사업명

피톤치드 체험랜드 조성사업

담당자

문화관광과 진철호(☎390-7252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 홍길동테마파크 및 축령산 휴양림을 찾는 관광객들이 매년 늘어남에

따라 주변에 숙박, 체험 및 휴식공간이 부족함에 따라,

○ 편백나무 피톤치드 및 효소액을 활용한 찜질체험 및 휴식공간을 제공

하고 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2015

○ 위 치 : 장성군 황룡면 아곡리 46-1번지 일원

○ 규 모 : 1차공사 - 교실리모델링공사, 지상1층, 연면적 500㎡

2차공사 - 피톤치드효소액체험장, 지상2층, 연면적 941㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원(국비 2,400  군비 2,100)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,500	3,823	677	-	-
국 비	2,400	2,000	400	-	-
시 도 비
시군구비	2,100	1,823	277	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 1차공사 - 교실리모델링공사(수련,숙박시설 조성) : ‘12. 6. ~ ’13. 3.

○ 2차공사 - 피톤치드효소액체험장(목욕장) : ‘13. 12. ~’15. 2.

□ 향후계획

○ 피톤치드효소액체험장 위수탁계약 : ‘15. 8.

사업명

임권택시네마테크 조성사업

담당자

문화관광과 진철호(☎390-7252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계적인 영화감독 임권택 감독과 연계한 「시네마공원」을 조성하여

장성호관광지의 상징성을 강화하고 영화의 상영·체험·교육 등 다양한

콘텐츠를 개발하여 관광인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. ~ 2015.

○ 위 치 : 장성군 북하면 쌍웅리 산68-1번지 일원(A=14,650㎡)

○ 규 모 : 본관동 - 지상4층, 연면적 1,523㎡

캠프동 - 지상1층, 연면적 306㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원(국비 2,700  군비 1,800)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,500	3,660	250	590	-
국 비	2,700	2,200	150	350	-
시 도 비
시군구비	1,800	1,460	100	240	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 1차공사 : 본관동 - ‘12. 12. ~ ’14. 3.

○ 2차공사 : 캠프동 - ‘13. 12. ~ ’15. 8.

□ 향후계획

○ 임권택시네마테크 캠프동 준공계 제출 : ‘15. 8. 31.

사업명

장성군 군민체육센터 수영장 건립

담당자

문화관광과 최인숙☎390-7228

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 건강증진과 여가 선용을 위한 휴식공간 조성

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2013. 7. ~ 2015. 4

❍ 위    치 : 장성읍 기산리 135-1 지내

❍ 시설규모 : 지하1층, 지상 2층, 연면적 2,450㎡

❍ 시설현황 : 수영장(25m × 6레인), 유아풀, 스파풀, 체력단련실

휴게실, 파우더실, 샤워실 등

❍ 사 업 비 : 6,632백만원(기금 3,200, 군비 3,432)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

❍ 총사업비 : 6,632백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,632	500	3,500	2,632
국 비	3,200	200	2,500	500
시 도 비
시군구비	3,432	300	1,000	2,132
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

❍ 국민체육진흥기금 생활체육시설 지원사업 확정    : 2012. 2. 24.

❍ 공사계약 및 착공                                  : 2013.  7.  2.

❍ 수영장 운영을 위한 벤치마킹                       : 2014.  2. 21.

❍ 수영장 운영조례 제정                             : 2014.  6. 27.

❍ 공사준공 및 시험 운영                         : 2014. 12.

❍ 수영장 개장                               : 2015. 4. 6.

사업명

북부 공공도서관 건립

담당자

문화관광과 손현주(☎390-7226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 도심지역으로부터 원거리에 위치한 북부지역은 교육․문화시설

인프라가 열악함은 물론 문화적 혜택으로부터 소외된 전형적인 농촌지역임

○ 지역 주민과 학생들에게 학습공간 및 다양한 정보와 문화를 향유할 수 있는 생활밀착형 공공 도서관 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1. ~ 2014. 3.

○ 위 치 : 장성군 북이면 사거리 634번지

○ 규 모 : 1동1층, 609.3㎡(184평), 어린이열람실,성인열람실,문화교실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,340백만원(국비 1,600  군비 740)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,340	1,822	448	70	-
국 비	1,600	1,242	303	55
시 도 비
시군구비	740	580	145	15	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 북부(북이) 도서관 개관 : 2014. 3.

사업명

문화예술회관 대공연장 내부공사

담당자

문화관광과 진철호(☎390-7225)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화예술 공연의 활성화 및 대규모 행사 유치를 위한 문화예술 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 1 ~ 2015. 12

○ 위 치 : 장성군 장성읍 기산리 388번지 일원 문화예술회관 내

○ 규 모 : 대공연장 조성(무대기계, 전기음향, 무대조명 설치)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,500	3,000	3,500	-	-
국 비	0		-	-	-
시 도 비	0		-	-	-
시군구비	6,500	3,000	3,500	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	0		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘13. 02. 19. : 지방재정 투융자심사

○ ‘13. 04. 30. : 계약심의위원회 개최

○ ‘13. 05.~08. : 대공연장 내부공사 실시설계 추진

○ ‘13. 09.~10 : 대공연장 1차분 내부공사 실시설계 계약심사

○ ‘13. 11. 03. : 대공연장 1차분 내부공사 사업 입찰공고

○ ‘13. 12. 02. : 대공연장 1차분 내부공사 사업 추진

○ ‘14. 03. 20. : 대공연장 1차분 내부공사 준공

○ ‘14. 09. 30. : 2014년 1회 추경 예산확보(35억)

○ ‘15. 01.    : 대공연장 2차분 내부 사업 사업착공

□ 향후계획

○ ‘15. 12.  : 대공연장 2차분 내부 사업 준공

사업명

청소년수련관 건립

담당자

주민복지과 설재철(☎390-7319)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년 활동공간 확충으로 청소년들의 건전육성 기반조성과 청소년

전용 정보․문화․휴식공간 마련으로 문화의 질 향상

○ 다양한 욕구표현의 장을 제공하여 정서함양 및 자질배양 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2015. 12.(3개년)

○ 위    치 : 장성읍 기산리(문화시설사업소 앞)

○ 대지면적 : 연건축면적 : 2,458㎡

○ 건축규모 : 지하1층, 지상2층,    건축구조 : 철근콘크리트조

○ 주요시설 : 체육활동장, 실내집회장, 자치활동실, 상담실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원(국비 4,800,  군비 1,200) ※광․특

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,000	1,228		4,772
국 비	4,800	982		3,818
시 도 비
시군구비	1,200	246		954
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 청소년수련관 부지매입	: 2013. 11.

○ 지방재정 투융자 재심사 및 공유재산 관리계획 변경 승인	: 2013. 11.

○ 청소년수련관 건축 설계공모	: 2014.  3.

○ 청소년수련관 건립사업 기본 및 실시설계	: 2014.  4.

○ 청소년수련관 기본 및 실시설계 완료	: 2014.  9.

○ 건립공사 착공	: 2015.  1.

□ 향후계획

○ 준    공	: 2015.  12.

사업명

장애인 종합복지관 건립

담당자

주민복지과 고학주(☎390-7047)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인에게 종합재활서비스를 제공하여 장애인의 잠재능력을 개발, 지원

하며, 재활자립과 다양한 프로그램을 제공하여 장애인 복지증진 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 7. ~ 2015. 12.

○ 위    치 : 장성읍 기산리 489-1외 2필지(공립노인요양병원 옆)

○ 규    모 : 부지 5,420㎡(1,640평), 건물 1,504㎡(455평), 지상2층

○ 주요시설 : 물리치료실, 프로그램실, 주간보호실, 직업재활실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,990백만원<원전기금(도비) 2,780  군비 2,210>

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,990	1,100	2,150	1,740
국 비
시 도 비	2,780		1,040	1,740
시군구비	2,210	1,100	1,110
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 건립부지 확정(노인전문병원 부근)	: 2012.  9. 13.

○ 공유재산관리계획 의결승인	: 2012. 11. 10.

○ 건립공사 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2013.  9. 23.

○ 건립부지 매입(5억)	: 2013. 11. 19.

○ 지방재정 투․융자심사 승인(도 심사)	: 2013. 12. 11.

○ 전남도 공공디자인심의	: 2014.  6. 27.

○ 전남도 계약심사	: 2014.  8.

○ 건립공사 착공	: 2015.  1.

□ 향후계획

○ 준    공	: 2015.  12.

사업명

황룡강 생태하천 복원사업

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방 하천인 황룡강의 치수 및 이수기능을 유지하면서, 자연성 회복으로 수질개선 및 쾌적한 수환경과 하천환경의 조성으로 공공 오픈스페이스로서의 기능 활성화를 도모하고, 친수 기능 회복을 통한 시민에게 친숙하고 쾌적한 생활공간을 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 6 ~ 2017. 12.

○ 위    치 : 장성군 황룡면 옥정리 ~ 장성읍 용강리 일원

○ 시 공 사 : ㈜영무토건

○ 사업규모 : 생태하천 복원 L=9.5km

- 어도 개․보수, 자연형 여울보, 하도정비, 생태탐방로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,700백만원(국비 17,200 군비 11,500)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	28,700	1,057	1,721	5,666	20,256
국 비	17,200	600	1,067	3,400	12,133
시 도 비
시군구비	11,500	457	654	2,266	8,123
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2012. 8. 20 ~ 2014. 2. 14

○ 투․융자 심사 : 2013. 8. 1.

○ 공사 착공    : 2014. 6. 17.

○ 공사 추진    : 2014. 9. ~ 2015. 8.

□ 향후계획

○ 공사 추진 : 2015. 8. ~ 2017. 12.

사업명

개천 생태하천 복원사업

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지방 하천인 개천의 치수 및 이수기능을 유지하면서, 자연성 회복으로 수질개선 및 쾌적한 수환경과 하천환경의 조성으로 공공 오픈 스페이스로서의 기능 활성화를 도모하고, 친수 기능 회복을 통한 시민에게 친숙하고 쾌적한 생활공간을 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 5 ~ 2017. 12.

○ 위    치 : 장성군 장성읍(황룡강 합류지점) ~ 북이면 원덕리 원덕교(L=19.0km)

○ 사업규모 : 생태하천 복원 L=17.4km

- 어도, 자연형 여울보, 호안정비, 식생복원, 동식물 서식처 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,400백만원(국비 15,200, 군비 10,200)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	25,400	833	1,917	6,258	16,392
국 비	15,200	500	1,150	3,755	9,795
시 도 비
시군구비	10,200	333	767	2,503	6,597
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 36%)

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2013. 5. 6 ~ 2014. 4. 15.

○ 환경영향평가 : 2013. 5. 21 ~ 2014. 7. 30.

○ 공사 착공    : 2014. 12. 15.

○ 공사 추진    : 2014. 12. ~ 2015. 8.

□ 향후계획

○ 공사 추진 : 2015. 8. ~ 2017. 12.

사업명

호남권 농협물류센터 진입도로 개설

담당자

경관도시과 김문기(☎390-7471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호남권 농협물류센터 건립에 따른 원활한 물류수송과 안전한 통행환경

조성을 위해 진입도로 개설공사를 시행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 12. 11. ~ 2015. 12. 25.

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 유탕리 지내(국도1호선~구국도 1호선)

○ 규 모 : 도로개설 L=910m, B=16~22.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,200		280	1,920
국 비
시 도 비	1,100		140	960
시군구비	1,100		140	960
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 토지보상 100% 완료(총 25필지 4,377㎡)

○ 배수시설등 구조물 설치 95%

○ 보조기층 포설완료

□ 향후계획

○ 배수시설물 마무리                         : ‘15.  8. 31

○ 가로등 및 전기시설 마무리                 : ‘15.  9. 15

○ 아스콘 포장                               : ‘15.  9. 30.

○ 공사준공                                  : ‘15. 10. 10.

□ 사업변경 내역 : 해당 없음

사업명

축령산 휴양타운 조성

담당자

산림편백과 신동혁(☎390-7424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 축령산을 방문하는 산림치유‧휴양객 수요 증가로 부족한 숙박시설 및 편익시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 12. ~ 2016.10

○ 위 치 : 장성군 서삼면 모암리 산96

○ 규 모 : 306,843㎡(부지매입, 숙박시설 12동, 진입로개설, 기타 편익시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년
계	4,200	1,506	264	1,730	700
국 비
시 도 비	4,200	1,506	264	1,730	700
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 사업부지 매입                                 : 2013. 10.

○ 군관리계획 변경 및 개발촉진지구 개발계획 변경 용역 : 2013. 10. ~ 2014. 10.

○ 실시설계 용역                                 : 2014. 10. ~ 2014. 12.

○ 사업발주 및 착공                              : 2014. 12.

○ 사업추진중                                    : 2015.  1. ~

□ 향후계획

○ 사업추진 및 준공 : 2015. 1. ~ 2016. 10.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초 숙박시설 12동 ⇒ 변경 8동

○ 사업기간 : 당초 2011. 12. ~ 2015. 9. ⇒ 변경 2011. 12. ~ 2016. 10.

사업명

친환경고품질 장성잔디 명품화

담당자

산림편백과 강대중(☎390-7070)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 고품질 잔디 생산기반 조기정착 및 경쟁력 확보

○ 고부가가치 잔디 상품개발을 통한 잔디 가공시장 선점 및 신시장 개척

○ 잔디산업육성 협력시스템 구축을 통한 친환경 고품질 잔디 인프라 확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2015

○ 위 치 : 장성군 삼서면 석마리 948, 수양리 산136-1 일대

○ 규 모 : 향토산업 경상사업(추진단운영, 역량강화, 홍보마케팅, 연구개발비 등) 3회, 잔디유통및가공시설 3,527㎡, 잔디테마공원 19,600㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년
계	3,000	27	305	2,668
국 비	1,500	17	192	1,291
시 도 비	180	2	24	154
시군구비	720	8	79	633
지 방 채
민간자본	600		10	590
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

○ 향토산업 경상사업(추진단운영, 역량강화, 홍보마케팅 등) : 사업완료

○ 잔디유통‧가공시설 및 잔디테마공원 : 부지확보 및 인허가 접수

□ 향후계획

○ 친환경고품질 잔디 마케팅 전략 수행에 따라 경상보조 추진

○ 가공설비 확충으로 잔디유통 및 가공시설 사업 완료

○ 잔디테마공원 조성 사업 완료

사업명

가축분뇨공동자원화(퇴비화)

담당자

농업축산과 유동원(☎390-8514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가축분뇨처리 시설·장비 등 지원으로 가축분뇨를 퇴비·액비·에너지 등으       로 자원화 하여 자연순환 농업을 활성화시키고, 적정처리를 통한 수질·       토양 등 환경오염 방지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 7. 25. ~ 2014. 12. 31.

○ 위 치 : 장성군 장성읍 안평리 701-1번지 외 2

○ 규 모 : 가축분뇨 공동자원화시설(퇴비화) 1개소 (22,949.4㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,000	1,500	500	1,000
국 비	1,200	600		600
시 도 비	135			135
시군구비	765		500	265
지 방 채
민간자본
기타(융자)	900	900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 가축분뇨 공동자원화시설 설치 완료

○ 건축물 사용승인, 공장설립완료 수리, 가축분뇨 재활용 수리, 비료생산업

등록 등

□ 향후계획

○ 보조금 관리에 관한 법률 제35조에 의거 민간인이 보조금으로 취득한

재산에 대하여 “근저당권” 설정

○ 사후관리 기간(10년)동안 처분제한기준(목적외사용, 타인에게 양도, 교환

등)을 준수토록 지도

○ 정상 운영되도록 지도 및 관리감독 등

사업명

사거리 전통시장 시설현대화사업

담당자

경제교통과 정철균(☎390-7353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시장 및 편의시설이 낙후되어 재래시장 방문객 감소

○전통시장 현대화 시설로 고객 유치와 이용객 편의성 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. 1 ~ 2015. 12. 31

○ 위 치 : 장성군 북이면 사거리 697-2

○ 규 모 : 식당 270㎡(5칸), 특산물 및 점포 216㎡(4칸), 사무실 54㎡,

화장실 54㎡, 5일장 장옥(10동 48칸) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,000	2,966	1,683	351
국 비	3,200	1,933	1,056	211
시 도 비
시군구비	1,800	1,033	627	140
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 사거리 전통시장 시설현대화사업 지원 신청        : 2011. 2. 16.

○ 국비지원 가능여부 실태조사(중기청, 전남도, 전문가)  : 2011.  4. 14.

○ 시설현대화 연구용역 실시(시장경영진흥원)             : 2011. 6. 8. ~ 12. 30.

○ 지방재정 투융자사업 심사(도)                    : 2011. 10. 18.

○ 도 공공디자인 위원회 심의                       : 2013.  1. 25.

○ 기본 및 실시설계 용역                           : 2013.  4.  8.

○ 도 계약 심사(건축, 토목, 기계)                   : 2013.  5. 27.

○ 건축, 토목 등 공사 착공                         : 2013.  6. 24.

○ 건축, 토목 등 공사 중지                         : 2015.  6. 22.~10.31.

○ 사업 완료                                       : 2015. 12..

사업명

사가지구 지표수 보강개발

담당자

재난안전실 고재훈 (☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설노후 및 저수용량이 부족한 저수지에 대한 보강사업을 통해 안정된

수자원 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1 ~ 2015. 12

○ 위 치 : 장성군 북이면 사거리 일원

○ 규 모 : 저수지 2개소(조산제, 복룡제)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,900	500	2,000	2,000	2,400
국 비	4,830	350	1,400	1,400	1,680
시 도 비
시군구비	2,070	150	600	600	720
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 조산제 : 제당 성토, 여·수방수로 설치, 복통·사통 설치, 진입도로 설치

□ 향후계획

○ 조산제 : 용수관로 설치

○ 복룡제 : 제당 성토, 여·수방수로 설치, 복통·사통 설치, 진입도로 설치, 양수장 설치

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 감
사 업 규 모	저수지 2개소	저수지 2개소	-
총사업비(백만원)	6,300	6,900	증 600
사 업 기 간	2012. 1 ~ 2014. 12	2012. 1 ~ 2015. 12	증 1년
변 경 사 유	○ 총사업비 : 시행계획 수립시 사업비 변경 승인(전남도) ○ 사업기간 : 국비지원사업으로 지원사업기간 연장에 따른 변경

사업명

유평지구 테마공원 조성

담당자

경관도시과 김형수(☎390-7357)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성사과테마공원을 조성하여 주민과 도시민에게 자연친화적인 휴식‧

레저‧체험공간을 제공하여 도농교류 확대 및 소득원의 거점 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2015

○ 위 치 : 장성군 삼서면 유평리 지내

○ 규 모 : 81,377㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,000	3,030	2,020	950
국 비	3,000	1,515	1,010	475
시 도 비
시군구비	3,000	1,515	1,010	475
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  97%)

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 시행계획 승인 고시  : 2012.  5. 24.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 착공(총괄 및 1차)    : 2012.  4. 30.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 준공(1차)            : 2013.  6. 15.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 착공(2차)            : 2013.  3. 22.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 착공(3차분)          : 2013. 12. 30.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 준공(2차)            : 2013.  6. 10.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 준공(3차)            : 2014.  8. 27.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 준공(총괄 및 4차)    : 2015.  6. 17.

□ 향후계획

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 전시시설물 착공     : 2015. 9.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 전시시설물 준공     : 2015. 12.

사업명

월평처리구역 하수관거 정비

담당자

맑은물관리사업소

최민수(☎390-8551)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황룡면(월평) 시가지 내에 설치되어있는 합류식 관거를 분류식화하여 토양오염 보호, 지하수 보호, 하천보호하여 지역민들에게 쾌적한 생활환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 7. ~ 2016. 1.

○ 위 치 : 황룡면 월평리 일원

○ 규 모 : 하수관거 정비 L=16.7㎞, 배수설비 483가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,733백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	16,733	4,232	5,120	7,381
국 비	11,713	2,752	3,584	5,377
시 도 비
시군구비	5,020	1,480	1,536	2,004
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도) :  73%(총공정률)

○ ‘12 ~ 14년분 사업완료      : 2012. 7. ~ 2015. 3.

- 사업량 : 오수관로 L=16.7km 중 9.4km(D=100~600㎜),

배수설비 483가구중 17가구

- 공정률 : 100%(2014년도 3차분)

□ 향후계획

○ 2015년도(4차분) 사업추진계획     : 2015. 3. ~ 2016. 1.

- 사업량 : 오수관로 L=7.3km(D=100~600㎜) 추진

배수설비 466가구 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항없음

사업명

나노산단

폐수종말처리시설설치

담당자

맑은물관리사업소 유영선 (☎390-8548)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나노기술 일반산업단지에서 발생되는 공장폐수 및 생활오수를 처리하여       방류함으로써 공공수역의 수질보전과 쾌적한 생활환경을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2016.

○ 위 치 : 장성군 남면 삼태리 45번지 일원

○ 규 모 : 3,000톤/일(1단계 : 1,500톤/일 2단계 : 1,500톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,129백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	17,129			9,887	7,242
국 비	11,990			6,921	5,069
시 도 비	5,139			2,966	2,173
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 환경부 기본계획 승인 완료                        : 2013. 2. 28

○ 환경부 재원협의및 설치인가                         : 2014. 11.27.

○ 건설기술심의 등 행정절차 완료                      : 2014. 11.28.

○ 사업착공                                           : 2015. 4. 1

□ 향후계획

○ 유량조정조 터파기및 벽체 슬라브 작업              : 2015. 8.

○ 반응조및 수처리동 터파기 작업                     : 2015. 9.

○ 건축물공사                                        : 2015. 10.

○ 기계·전기·통신·소방공사                        : 2016. 1.

○ 준공                                              : 2016. 6.

사업명

개천지구(북일·조양) 소규모

하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소 김형석(☎390-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영산강 상류지역에 위치한 북일면 신흥·박산리, 북이면 조양리 일원에 하수처리

시설이 설치되지 않아 마을하수가 개천으로 방류되어 수질 악화에 따른 사업필요

○ 마을하수 적정 처리로 공공수역의 수질보전 및 토양ㆍ지하수 오염방지로

주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 11. 20 ~ 2015. 5. 19.

○ 위 치 : 북일면 신흥·박산리, 북이면 조양리

○ 규 모 : 오수처리시설 145㎥/일(북일 110, 조양 35)

오 수  관 로 L=9.5㎞(북일 5.4, 조양 4.1)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,243백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,243		3,286	2,957
국 비	4,370		2,300	2,070
시 도 비
시군구비	1,873		986	887
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진완료)

○ 사업추진 완료 : 2013. 11. 20 ~ 2015. 5. 19(추진율 100%)

□ 향후계획

○ 수질관리를 위한 민간위탁 유지관리 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

서부권(동화,황룡),읍 지역(서삼)

상수도 시설확충

담당자

맑은물관리사업소 강홍권(☎390-8561)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 식수난해소 및 생활환경개선 도모로 주민소득 증대

및 지역균형발전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 3 ~ 2014. 12

○ 위 치 : 전남 장성군 동화면, 황룡면, 서삼면 일원

○ 규 모 : 상수관로 L=52.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,700	5,240	3,460	-	-
국 비	6,100	3,700	2,400	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,600	1,540	1,060	-,	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황

○ 공사 준공

□ 향후계획

○ 우리군 북부지역(북일, 북이, 북하) 공급 계획

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장산처리구역 하수관거 정비

담당자

맑은물관리사업소

최민수(☎390-8551)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서삼면 장산, 모암리 일원에 설치되어 있는 합류식 관거를 분류식화하여

토양오염 보호, 지하수 보호등 지역민들에게 쾌적한 생활환경 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 3. ~ 2017. 3.

○ 위 치 : 서삼면 장산, 모암리 일원

○ 규 모 : 하수관거 정비 L=15.9㎞, 배수설비 293가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,070		214	2,179	2,677
국 비	3,549		150	1,525	1,874
시 도 비
시군구비	1,521		64	614	803
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도) : 20%(총공정률)

○ 사업기간 : 2015. 3 ~ 2016. 1

- 사 업 량 : 오수관로 L=6.4km 중 0.4km(D=100~200㎜),

- 공 정 률 : 30%(2015년도 1차분)

- 시공회사 : 에스티건설(주) / 책임감리 : 삼안,한국기술개발

□ 향후계획

○ 2015년도(1차분) 사업추진 / 모암, 장산리

- 사업량 : 오수관로 L=6.0km(D=100~200㎜) 관로매설 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항없음

사업명

거마소하천 정비사업

담당자

재난안전실 김국원(☎390-7483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 북이면 신평리 일원 거마소하천 구간의 토질이 대부분 모래질로 형성되어 적은 강우에도 제방의 유실이 심하여 인근 농경지와 가옥의 침수 등 재해 예방과 주민의 재산을 보호하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 4 ~ 2016. 1.

○ 위    치 : 장성군 북이면 신평리 ~ 달성리 일원

○ 사업규모 : 소하천 정비 L=2.2km(B=7.0~10.0m)

- 호안정비, 낙차공, 교량, 기타 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,095백만원(국비 1,500, 군비 1,595)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,095	95	1,697	1,398
국 비	1,500		848	699
시 도 비
시군구비	1,595	95	849	699
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 실시설계 용역 : 2014. 1. ~ 2014. 4.

○ 공사 착공     : 2014. 5.

○ 공사 추진     : 2014. 4. ~ 2015. 8.

□ 향후계획

○ 공사 추진     : 2015. 8. ~ 2016. 1.

사업명

백암지구 소규모하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소 김형석

(☎390-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영산강 상류지역에 위치한 북하면 백암리 일원에 하수처리시설이 설치되지

않아 마을하수가 백암천으로 방류되어 수질 악화에 따른 사업필요

○ 마을하수 적정 처리로 공공수역의 수질보전 및 토양ㆍ지하수 오염방지로

주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 5. 15. ~ 2016. 5. 08.

○ 위 치 : 북이면 백암리 일원

○ 규 모 : 오수처리시설 50㎥/일, 오수관로 L=5.8㎞(D150~200)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,700	-	714	1,989	-
국 비	1,890	-	500	1,390	-
시 도 비
시군구비	810	-	214	596	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 실시설계 : 2014. 12. 설계완료

○ 사업추진 : 2015. 5. 15. ~ 2016. 05. 08(추진율 15%)

□ 향후계획

○ 사업추진계획 : 2015. 5. ~ 2016. 5.

- 사업량 : 오수관로 L=5.85km(D=150~200㎜) 추진

배수설비 477개소 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

북하지구 지방상수도 조성

담당자

맑은물관리사업소 강홍권(☎390-8561)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 북부권(북이면, 북하면) 주민들의 식수난 해소

○ 안정적인 생활용수 확보로 농촌 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 3 ~ 2017. 12

○ 위 치 : 전남 장성군 북이, 북하면 일원

○ 규 모 : 상수관로 L=45.0km(D200mm～D16mm)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,240백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,240	-	714	1,700	4,826
국 비	5,070	-	500	1,190	3,380
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,170	-	214	510	1,446
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 장성군 수도정비 기본계획 수립 및 변경(‘04, ’11)

○ 수도사업 인가(2011.3)

○ 북하지구 농어촌 지방상수도시설 조성 실시설계용역(‘14.6～‘14.9)

○ 소규모 환경평가(2014.10～2014.11)

○ 사업발주 및 착공(2015. 3)

□ 향후계획

○ 사업준공 : 2017. 12

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

덕산지구 지표수 보강개발사업

담당자

재난안전실 고재훈 (☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설 노후 및 저수용량 부족으로 부족한 덕산제, 삼룡제의 저수용량이

두배가량(196%) 현저히 증가할 것으로 예상(114천톤 →338천톤)되어 안정적

농업용수 공급

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1 ~ 2015. 12

○ 위 치 : 장성군 북이면 사거리 일원

○ 규 모 : 저수지 2개소(조산제, 복룡제)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,900백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,133		220	500	7,413
국 비	5,761			350	5,411
시 도 비
시군구비	2,382		220	150	2,012
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본조사 및 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 사업 발주(총괄, 2015년분 부대공사) 및 사업 시행

○ 편입토지 감정평가 및 분할측량 실시

○ 용지보상 및 실시계획 승인

□ 사업변경 내역

○ 해당 없슴

사업명

아곡소하천 정비사업

담당자

재난안전실 김국원(☎390-7483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황룡면 아곡리 일원 아곡 소하천 구간으로 적은 강우에도 제방의 유실 및 농경지 범람 등 인근 농경지와 가옥의 침수가 빈번하여 하천 정비를 통하여 재해 예방과 주민의 재산을 보호하기 위함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014. 1. ~ 2016. 12.

○ 위    치 : 장성군 황룡면 아곡리 일원

○ 사업규모 : 소하천 정비 L=2.48km(B=7.0~10.0m)

- 호안정비, 낙차공, 교량, 기타 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원(국비 1,250, 군비 1,250)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,500			594	1,906
국 비	1,250			297	953
시 도 비
시군구비	1,250			297	953
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 실시설계 용역 : 2014. 11. ~ 2015. 4.

○ 편입토지 보상협의 추진 : 2014. 4. ~ 2015. 7.

○ 공사 착공              : 2014. 7.

○ 공사 추진              : 2014. 7. ~ 2015. 8.

□ 향후계획

○ 공사 추진     : 2015. 8. ~ 2016. 12.

사업명

이암지구 소규모하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소 김형석

(☎390-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 평림댐 상류지역에 위치한 삼계면 덕산·수산리 일원에 하수처리 시설이 설치

되지 않아 마을하수가 개천으로 방류되어 수질 악화에 따른 사업필요

○ 마을하수 적정 처리로 공공수역의 수질보전 및 토양ㆍ지하수 오염방지로

주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 4. 8. ~ 2016. 9. 28.

○ 위 치 : 삼계면 덕산리·수산리

○ 규 모 : 오수처리시설 35㎥/일, 오 수  관 로 L=5.7㎞(D80~200)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,110백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,110			2,233	877
국 비	2,117			1,563	614
시 도 비
시군구비	933			670	263
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실  시  설  계 : 2013.  3. 설계완료

○ 1차분 사업추진 : 2015.  4.  8. ~ 2016.  2.  1.(추진율 15%)

○ 2차분 사업추진 : 2015.  6. 29. ~ 2016.  6. 28.(추진율  5%)

□ 향후계획

○ 사업추진계획 : 2015. 4. ~ 2016. 6.

- 사업량 : 오수관로 L=5.63km(D=80~200㎜) 추진

배수설비 90개소, 중계펌프장 2개소 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음