【붙임5】개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

유평지구 테마공원 조성

담당자

경관도시과 김형수(☎390-7357)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성사과테마공원을 조성하여 주민과 도시민에게 자연친화적인 휴식‧

레저‧체험공간을 제공하여 도농교류 확대 및 소득원의 거점 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011 ~ 2015

○ 위 치 : 장성군 삼서면 유평리 지내

○ 규 모 : 81,377㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,000	5,050	950
국 비	3,000	2,525	475
시 도 비
시군구비	3,000	2,525	475
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  97%)

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 시행계획 승인 고시  : 2012.  5. 24.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 착공(총괄 및 1차)    : 2012.  4. 30.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 준공(1차)            : 2013.  6. 15.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 착공(2차)            : 2013.  3. 22.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 착공(3차분)          : 2013. 12. 30.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 준공(2차)            : 2013.  6. 10.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 준공(3차)            : 2014.  8. 27.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 준공(총괄 및 4차)    : 2015.  6. 17.

□ 향후계획

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 전시시설물 착공     : 2015. 9.

○ 유평지구 농어촌테마공원 조성사업 전시시설물 준공     : 2015. 12.

사업명

사거리시장 시설현대화사업

담당자

경제교통과 정철균(☎390-7353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통과 현대적 디자인이 결합된 전통시장 현대화 시설로 외부 고객 유치

및 이용객의 편의성 제고로 시장 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 6. ~ 2015. 12.

○ 위 치 : 장성군 북이면 사남북길 22

○ 규 모 : 상설점포 9개소, 5일장 장옥(12동 48칸), 고객 주차장, 화장실,

비가림 시설, 조경 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000	4,635	350
국 비	3,200	2,976	224
시 도 비
시군구비	1,800	1,674	126
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 사거리전통시장 시설현대화사업 지원 신청        : 2011. 2. 16.

○ 지방재정 투자심사(도 심사)완료                  : 2011. 10. 25

○ 공유재산 관리계획 숭인                         : 2011. 11. 14

○ 연구용역 완료(43,000천원)                       : 2011. 12. 26

○ 토지, 지장물, 주거이전비 등 보상금 협의 통지    : 2012. 5.  3.

○ 기본 및 실시설계 등 용역 완료(135,364천원)      : 2013. 5. 30.

○ 토지, 지장물 등 감정재평가 보상금 협의 통지    : 2013. 6. 19

○ 사업인정 고시                                  : 2014. 6. 10.

○ 건축, 전기, 통신공사 추진                       : 2015. 3. ~ 6.

○ 공사 완공                                      : 2015. 12. 30.

사업명

월평처리구역 하수관거 정비

담당자

맑은물관리사업소

최민수(☎390-8551)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 합류식 하수관거를 분류식으로 시공하여 관거 기능회복을 통한       토양 오염 및 지하수 보호와 불명수 유입 차단

○ 오염총량관리 시행계획의 오염부하량 삭감계획을 만족시켜 하수처리 효율       제고 및 위생적인 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012. 3. ~ 2016. 7.

○ 위 치 : 황룡면 월평리 일원

○ 규 모 : 하수관로 정비 L=16.7km , 배수설비 409세대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,733백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	16,733	9,352	7,381
국 비	11,713	6,546	5,167
시 도 비
시군구비	5,020	2,806	2,214
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 우․오수관로 정비 L=16.7km, 배수설비 409세대 설치 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

나노산단 폐수종말처리 시설설치

담당자

맑은물관리사업소

장은철(☎390-8547)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나노일반산업단지 내 기업들의 생산 활동으로 발생되는 오□폐수를 안정적

으로 처리하여 입주업체의 쾌적한 근무여건 조성 및 수질환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 3. 31. ~ 2016. 8. 31.(1단계)

○ 위 치 : 장성군 남면 삼태리 45 일원(산업단지 내)

○ 규 모 : 3,000톤/일(1□2단계 각 1,500톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,129백만원(1단계 12,364백만원, 2단계 4,765백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	17,129	283	6,268	5,813	4,765
국 비	11,989	198	4,387	4,069	3,335
시 도 비
시군구비	5,140	85	1,881	1,744	1,430
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90 %)

○ 건축동(3층) 공사완료

○ 종합 시운전 및 기타 부대공사

□ 향후계획

○  종합시운전 완료 및 1단계 사업 준공   : 2016. 9.

○  2단계 사업 기본 및 실시설계용역 추진 : 2016. 8. ~ 10.

사업명

사가지구 지표수 보강개발

담당자

재난안전실 김건우(☎390-7487)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 농업용수 확보로 농업생산성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 12. ~ 2016. 8.

○ 위 치 : 북이면 사거리 사가지구

○ 규 모 : 조산제 확장, 복룡제 보강

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,999백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,999	4,500	2,400	99	-
국 비	4,899	3,150	1,680	69
시 도 비
시군구비	2,100	1,350	720	30
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 복룡제 : 복통, 사통설치 및 여수토 재설치

□ 향후계획

○ 사업준공 : 2016. 8. 31.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

농협물류센터 진입도로개설

담당자

경관도시과 김문기(☎390-7471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호남권 농협물류센터 건립에 따른 물류수송과 안전한 통행환경 조성을        위해 진입도로 개설공사 시행

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 12. 11 ∼ 2015. 12. 25

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 유탕리 지내(국도1호선∼구국도1호선)

○ 규 모 : 도로개설 L=910m, B=16∼22.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,200	280	1,920
국 비
시 도 비	1,100	140	960
시군구비	1,100	140	960
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 : 준공완료

○ 토지보상 완료(25필지 4,377㎡)

○ 도로개설 L=910m

□ 향후계획

○ 없음

○

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

개천지구(북일,조양) 소규모하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소

김범한(☎390-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개천지구에 발생하는 오수가 미처리 상태로 방류되어 수질오염이 우려되고       있는 실정이므로 하수를 정화 처리하여 공공수역의 수질개선과 지역주민의       공중 위생 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 11. 14. ~ 2015. 05. 19.

○ 위 치 : 전남 장성군 북일면, 북이면 일원

○ 규 모 : 오수관로(D80 ~ 200mm) 10km,

처리장 110톤/일(북일), 35톤/일(조양)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,127백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,127	5,052	1,075
국 비	4,289	3,536	753
시 도 비
시군구비	1,838	1,516	322
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 9. 사업 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

문화예술회관 대공연장 내부공사

담당자

문화시설사업소 이동열(☎390-8483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화예술 공연의 활성화 및 대규모 행사 유치를 위한 문화예술 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 12. ~ 2015. 8.

○ 위 치 : 장성군 장성읍 기산리 388번지 일원 문화예술회관 내

○ 규 모 : 대공연장 조성(무대기계, 전기음향, 무대조명 설치)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,086백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	6,086	3,000	3,086	-	-
국 비	0		-	-	-
시 도 비	0		-	-	-
시군구비	6,086	3,000	3,086	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	0		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘13. 02. 19. : 지방재정 투자심사

○ ‘13. 04. 30. : 계약심의위원회 개최

○ ‘13. 05.~08. : 대공연장 내부공사 실시설계 추진

○ ‘13. 09.~10 : 대공연장 1차분 내부공사 실시설계 계약심사

○ ‘13. 11. 03. : 대공연장 1차분 내부공사 사업 입찰공고

○ ‘13. 12. 02. : 대공연장 1차분 내부공사 사업 추진

○ ‘14. 03. 20. : 대공연장 1차분 내부공사 준공

○ ‘14. 09. 30. : 2014년 1회 추경 예산확보(35억)

○ ‘15. 03. 20  : 대공연장 2차분 내부공사 착공

○ ‘15. 08. 31  : 대공연장 2차분 내부공사 준공

□ 향후계획

○ 문화예술회관 공연 활성화 및 문화예술 인프라 구축 등

사업명

청소년 수련관 건립

담당자

주민복지과 설재철(☎390-7414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년 활동공간 확충으로 청소년들의 건전육성 기반조성과 청소년

전용 정보․문화․휴식공간 마련으로 문화의 질 향상

○ 다양한 욕구표현의 장을 제공하여 정서함양 및 자질배양 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 11. ~ 2016. 9.(3개년)

○ 위    치 : 장성읍 기산리(문화시설사업소 노인복지회관 옆)

○ 대지면적 : 연건축면적 : 2,582㎡

○ 건축규모 : 지상 3층,    건축구조 : 철근콘크리트조

○ 주요시설 : 체육활동장, 다목적강당, 자치활동실, 상담실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,200백만원(국비 4,800,  군비 1,400)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,200	261	3,004	2,935
국 비	4,800	208	1,912	2,680
시 도 비
시군구비	1,400	53	1,092	255
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 청소년수련관 부지매입	: 2013. 11.

○ 지방재정 투자 재심사 및 공유재산 관리계획 변경 승인	: 2013. 11.

○ 청소년수련관 건축 설계공모	: 2014.  3.

○ 청소년수련관 건립사업 기본 및 실시설계	: 2014.  4.

○ 청소년수련관 기본 및 실시설계 완료	: 2014.  9.

○ 건립공사 착공	: 2015.  1.

□ 향후계획

○ 준    공	: 2016.  9월

사업명

장애인 종합복지관 건립

담당자

주민복지과 조지연(☎390-7047)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인에게 종합재활서비스를 제공하여 장애인의 잠재능력을 개발, 지원

하며, 재활자립과 다양한 프로그램을 제공하여 장애인 복지증진 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 7. ~ 2016. 5.

○ 위    치 : 장성읍 기산리 489-1외 2필지(공립노인요양병원 옆)

○ 규    모 : 부지 5,420㎡(1,641평), 건물 1,504㎡(455평), 지상2층

○ 주요시설 : 물리치료실, 프로그램실, 주간보호실, 직업재활실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,120백만원<원전기금(도비) 3,040  군비 2,080>

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,120	1,116	2,748	1,256
국 비
시 도 비	3,040		1,784	1,256
시군구비	2,080	1,116	964
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 건립부지 확정(노인전문병원 부근)	: 2012.  9. 13.

○ 공유재산관리계획 의결승인	: 2012. 11. 10.

○ 건립공사 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2013.  9. 23.

○ 건립부지 매입(5억)	: 2013. 11. 19.

○ 지방재정 투․융자심사 승인(도 심사)	: 2013. 12. 11.

○ 전남도 공공디자인심의	: 2014.  6. 27.

○ 전남도 계약심사	: 2014.  8.

○ 건립공사 착공	: 2015.  1.

○ 준    공	: 2016.  5.

사업명

황룡강 생태하천 복원

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 식생복원, 동식물 서식처 제공으로 하천 수생태계 건강성 회복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012.~ 2017.(6년)

○ 위 치 : 장성읍 상오리(장성댐) ~ 황룡면 월평리(장진보)

○ 규 모 : L=9.5km

- 어도 12개소, 자연형여울 3개소, 가동보 3개소, 하도정비 L=2.7km,

생태조경 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	20,000	2,778	5,667	3,167	8,388
국 비	12,000	1,667	3,400	1,900	5,033
시 도 비	-			-	-
시군구비	8,000	1,111	2,267	1,267	3,355
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 57%)

○ 공사추진

- 2차분 공사준공 : 2016. 4. 26

☞ 자연석쌓기 L=1.3km, 어도 4개소, 자연형여울 1개소

- 3차분 공사추진

☞ 자연석쌓기 L=0.18km, 어도2개소, 징검다리 1개소, 가동보 1개소

□ 향후계획

○ 3차분 공사 추진 : 2016. 7 ~ 12

- 취암천 합류부 유로변경 및 어류서식처 조성

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

개천 생태하천 복원

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 식생복원, 동식물 서식처 제공으로 하천 수생태계 건강성 회복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013.~ 2017(5년)

○ 위 치 : 북이면 원덕교 ~ 황룡강 합류점

○ 규 모 : 17.4km(하천연장 19km)

- 자연형여울 27개소, 가동보1개소, 하도정비 L=4.0km

- 서능복합생물서식처 조성, 하도내 식생복원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	20,000	2,750	6,259	3,334	7,657
국 비	12,000	1,650	3,755	2,000	4,595
시 도 비	-
시군구비	8,000	1,100	2,504	1,334	3,062
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 59%)

○ 공사추진

- 3차분 공사추진

☞ 자연석 쌓기 L=670m, 자연형 여울 8개소, 가동보 1개소

☞ 황룡강 합류부 저수호안 정비

□ 향후계획

○ 3차분 공사 추진 : 2016. 7 ~ 12

- 자연석 쌓기, 개천 데크로드, 여울설치

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

축령산 휴양타운 조성

담당자

산림편백과 신동혁(☎390-7424)

□ 사업목적 및 필요성

○ 축령산을 방문하는 산림치유‧휴양객 수요 증가로 부족한 숙박시설 및 편익시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 12. ~ 2015. 9.

○ 위 치 : 장성군 서삼면 모암리 산96

○ 규 모 : 306,843㎡(부지매입, 숙박시설 12동, 진입로개설, 기타 편익시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2014년	2015년	2016년
계	4,200	1,506	264	1,730	700
국 비
시 도 비	4,200	1,506	264	1,730	700
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 사업부지 매입                                 : 2013. 10.

○ 군관리계획 변경 및 개발촉진지구 개발계획 변경 용역 : 2013. 10. ~ 2014. 10.

○ 실시설계 용역                                 : 2014. 10. ~ 2014. 12.

○ 사업발주 및 착공                              : 2014. 12.

○ 사업추진중                                    : 2015.  1. ~

□ 향후계획

○ 사업추진 및 준공 : 2015. 1. ~ 2016. 10.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 당초 숙박시설 12동 ⇒ 변경 8동

○ 사업기간 : 당초 2011. 12. ~ 2015. 9. ⇒ 변경 2011. 12. ~ 2016. 10.

사업명

친환경고품질 장성잔디 명품화

담당자

산림편백과 윤창환(☎390-7070)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경‧고품질 잔디생산, 가공, 체험의 융‧복합화

○ 고부가가치 잔디상품화 개발을 통한 신시장 개척 및 수요 창출

○ 잔디산업 육성의 협력적 네트워크 구축으로 시너지 효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. ~ 2016.

○ 위 치 : 장성군

○ 규 모 : 사업추진단운영, 역량강화, 컨설팅, 홍보마케팅, R&D,

잔디유통및가공시설, 잔디테마공원조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000	332	2,116	552
국 비	1,500	209	1,062	229
시 도 비	180	26	91	63
시군구비	720	87	373	260
지 방 채
민간자본	600	10	590
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 81%)

○ 2015년 사업추진단 운영, 역량강화사업, 홍보마케팅사업 완료

○ 잔디유통 및 가공시설 완료, 잔디테마공원 조성중

□ 향후계획

○ 2016년 사업추진단 운영, 역량강화사업, 홍보마케팅사업 추진

○ 잔디테마공원 조성완료 및 준공

사업명

장산처리구역 하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소

최민수(☎390-8551)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장산지구 하수 관거를 정비하여 오·우수를 효율적으로 처리함과 방류 하천의       수질보호와 주민보건 위생향상 및 쾌적한 환경조성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 03. 30. ~ 2017. 03. 26.

○ 위 치 : 장성군 서삼면 장산·대덕·모암리 일원

○ 규 모 : 하수관거 연장 15.03km, 배수설비 293개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	6,000	214	4,856	630
국 비	4,200	150	3,399	441
시 도 비
시군구비	1,800	64	1,457	189
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 하수관거 연장 13.07km 완료

□ 향후계획

○ 하수관거 연장 1.96km, 배수설비 293개소 설치(2016. 12. 준공 추진)

사업명

거마소하천 정비

담당자

재난안전실 김국원(☎390-7483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우로 인한 농경지 및 주택침수를 예방함으로써 쾌적한

농촌환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014.~ 2016(3년)

○ 위 치 : 북이면 신평리 일원(거마천)

○ 규 모 : 2.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,095백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,095	1,697	1,398	1,000
국 비	2,047	848	699	500
시 도 비
시군구비	2,048	849	699	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 거마 소하천 정비 추진 : 2014. 5. 19 ~ 2016. 6. 30

□ 향후계획

○ 거마 소하천 준공      : 2016. 6. 30

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

백암지구 소규모 하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소

김범한(☎390-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백암지구 소규모마을하수도 신규시설 확충을 통하여 하수를 효과적으로       처리하여 부근토양 및 수질오염을 예방하고 주민의 안전한 주거 생활과       환경개선으로 보건 위생 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 5. 15. ~ 2016. 8. 31.

○ 위 치 : 장성군 북이면 백암리 일원

○ 규 모 : 오수관로 4.74km, 압송관로 1.1km, 배수설비 117, 처리장 1, 중계펌프장 3

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,700	79	2,621
국 비	1,890	55	1,835
시 도 비
시군구비	810	24	786
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 오수관로(D80~200mm) 5.8km

○ 하수처리장 50톤/일 1개소

□ 향후계획

○ 마을 안길 ASP 포장 및 가정내 Con’c 포장

○ 기계처리시설 가동(시운전) : 2016. 7. ~ 8.

○ 2016. 8. 30. 준공 계획

사업명

북하지구 지방상수도 조성

담당자

맑은물관리사업소

강홍권(☎390-8561)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 북부권(북이면, 북하면) 주민들의 식수난 해소

○ 안정적인 생활용수 확보로 농촌 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 3. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 북이, 북하면 일원

○ 규 모 : 상수관로 L=45.0km(D200mm～D16mm)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,240백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,240	714	1,700	1,943	2,883
국 비	5,070	500	1,190	1,360	2,020
시 도 비	714	64	170	175	305
시군구비	1,456	150	340	408	558
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 장성군 수도정비 기본계획 수립 및 변경(2004, 2011)

○ 수도사업 인가(2011. 3.)

○ 북하지구 농어촌 지방상수도시설 조성 실시설계용역(2014. 6. ～ 9.)

○ 소규모 환경평가(2014. 10.～ 11.)

○ 사업발주 및 착공(2015. 3.)

□ 향후계획

○ 사업준공 : 2017. 12.

사업명

덕산지구 지표수 보강개발

담당자

재난안전실 김건우(☎390-7487)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 농업용수 확보로 농업생산성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 12~ 2018. 12

○ 위 치 : 동화면 구룡리 덕산지구

○ 규 모 : 덕산제 보강, 삼룡제 신설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,230		500	1,160	6,570
국 비	5,761		350	812	4,599
시 도 비
시군구비	2,469		150	348	1,971
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사업추진 : 2015.12 ~ 2018. 12

□ 향후계획

○ 사업추진 : 2015. 12 ~ 2018. 12

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

아곡소하천 정비

담당자

재난안전실 김국원(☎390-7483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우로 인한 농경지 및 주택침수를 예방함으로써 쾌적한 농촌환경

조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015.~ 2016(2년)

○ 위 치 : 황룡면 아곡리 일원(아곡천)

○ 규 모 : 1.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,594백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,594	-	1,594	2,000
국 비	1,797	-	797	1,000
시 도 비
시군구비	1,797	-	797	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 아곡소하천 정비 추진 : 2015. 7. 1 ~ 2016. 12. 21.

□ 향후계획

○ 아곡소하천 준공      : 2016. 7 ~ 2016. 12. 21.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

이암지구 소규모 마을하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소

김범한(☎390-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이암지구 소규모마을하수도 신규시설 확충을 통하여 하수를 효과적으로       처리하여 부근토양 및 수질오염을 예방하고 주민의 안전한 주거 생활과       환경개선으로 보건 위생 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 4. 8. ~ 2016. 12. 4.

○ 위 치 : 장성군 삼계면 덕산리, 수산리 일원(이암, 만화, 반월, 자초마을)

○ 규 모 : 오수관로 4.58km, 압송관로 957m, 배수설비 90, 처리장 1, 중계펌프장 2 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,500	48	1.256	2,196
국 비	2,450	34	879	1,537
시 도 비
시군구비	1,050	14	377	659
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 64%)

○ 하수관거 연장 5.06km, 하수처리장 1개소 등

□ 향후계획

○ 하수관거 0.57km, 배수설비 90개소

○ 하수처리장 전기공사 및 시운전 : 2016. 8. ~ 10.

○ 2016. 11. 30. 준공 계획

사업명

상무 평화공원 축구장 조성

담당자

문화관광과 채양기(☎390-7251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성 서부권 주민들의 생활체육 기반시설을 조성하여 직장, 지역 동호인

및 지역주민들의 여가선용과 체육인 및 관광객에게 편의시설 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017(3년)

○ 위 치 : 장성군 삼계면 주산리 일원

○ 규 모 : 축구장 1개소(105m × 68m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000	1,500	1,500	1,000	500
국 비	450			300	150
시 도 비
시군구비	2,550	1,500	1,500	700	350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 공사착공 : 2016. 6.

□ 향후계획

○ 공사준공 : 2017. 6.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- 당    초 : 2,500백만원

- 변    경 : 3,000백만원(실시설계 용역 결과 500백만원 추가 소요)

사업명

상무 평화공원 조성

담당자

문화관광과 채양기(☎390-7251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 초급간부 양성교육장인 상무대 인근에 주변 경관과 어울리는 상무 평화

공원을 조성하여 상무대 군인 및 지역 주민들이 활용할 수 있는 공간을

제공하여 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2018.(3년)

○ 위 치 : 장성군 삼계면 주산리 일원

○ 규 모 : 61,926㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,800			283	3,517
국 비	2,280			170	2,110
시 도 비
시군구비	1,520			113	1,407
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 용역 착수 : 2016. 3.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 준공 : 2016. 10.

○ 공사추진          : 2016. 11. ~ 2018.12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

축령산 치유의 숲 가는길 정비

담당자

문화관광과 채양기(☎390-7251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 축령산 치유의 숲 가는길이 정비되지 않아 방문객 및 탐방객에게 불편을

초래하고 있어 길에 건강을 더하는 방향으로 정비하여 축령산 치유의 숲을

찾는 관광객의 편의제공 및 관광자원화로 녹색관광 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2017(2년)

○ 위 치 : 장성군 서삼면 모암․추암리 일원

○ 규 모 : 숲길 조성 L=2.0km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000			1,167	1,833
국 비	1,800			700	1,100
시 도 비
시군구비	1,200			467	733
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 공사착공 : 2016. 6.

□ 향후계획

○ 공사준공 : 2017. 12..

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

잔디재배지 객토지원

담당자

산림편백과 윤창환(☎390-7070)

□ 사업목적 및 필요성

○ 잔지재배지 객토를 통한 토양환경 개선 및 양질의 잔디생산기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017

○ 위 치 : 장성군 관내 잔디재배지 일원

○ 규 모 : 108ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000			4,000	1,000
국 비	2,500			2000	500
시 도 비	400			320	80
시군구비	1,600			1,280	320
지 방 채
민간자본	500			400	100
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 보조금 교부결정(장성잔디생산자협회), 사업설계 및 심사 완료

□ 향후계획

○ 2016년 3 ~ 12월 잔디재배지 객토 추진

○ 2017년 객토사업 추진 잔여분 사업 추진

사업명

제2 황룡교 재가설

담당자

재난안전실 김현수(☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후교량 재가설로 통행차량의 안전성 확보에 따른 재해 사전예방,

재가설에 따른 인도설치로 보행자의 안전확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1 ~ 2017. 12

○ 위 치 : 장성군 황룡면 월평리, 장산리 지내

○ 규 모 : 교량재가설 L=250m(B=13.0m), 접속도로 L=300m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,700			6,000	3,700
국 비
시 도 비
시군구비	9,700			6,000	3,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 추진내역

- 실시설계용역 계약심사             : 2016. 2

- PQ평가계획 공고 및 시행의뢰      : 2016. 3

- PQ평가서 제출 및 평가            : 2016. 4

- PQ평가결과 통보 및 이의신청      : 2016. 5

- 입찰 및 낙찰자 결정               : 2016. 5. 20

- 계약 및 착공                      : 2016. 5. 30

□ 향후계획

- 실시설계용역 : 2016. 6. ~ 11.

- 사업추진     : 2016. 12 ~2017. 12

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장성군 상수관망 최적화관리시스템 구축

담당자

맑은물관리사업소

고재훈(☎390-8566)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상수관망의 체계적 정비 및 최적관리시스템 구축으로 누수율을 보다 최소화

하고 효율적인 상수도 운영체제로 안전하고 안정적인 수돗물을 공급하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 장성군 관내 일원

○ 규 모 : (1단계) 누수관망감시시스템 구축, 유량계 10개소 등 설치

(2단계) 가압장(23개소), 배수지 통합감시시스템 구축,

블록구축(17개소) 및 구역별 유량계 설치(10개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원(국비 500, 군비 1,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,000		864	1,136
국 비	500			500
시 도 비
시군구비	1,500		864	636
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 1단계 사업(누수관망감시시스템 구축, 유량계 10개소 설치) 완료

□ 향후계획

○ 상수관망 통합운영관리시스템 구축 실시설계  : 2016. 4.

○ 전라남도 계약심사                          : 2016. 5.

○ 사업시행 및 입찰공고                       : 2016. 5.

○ 2단계 사업 공사시행                        : 2016. 6. ~ 12.

사업명

농업에너지이용 효율화 사업

(지열 냉난방시설)

담당자

농업기술센터

백지연(☎390-8464)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생에너지 이용기술의 농업시설 적용 및 확대보급 기반 구축

○ 국제유가□농자재 가격 상승으로 인한 농가의 경영비 부담 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 황룡면 강변로 253-9

○ 규 모 : 지열냉난방시설 수직밀폐형 16,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원(국비 2,040, 도비 68, 군비612, 자담680)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,400	-	-	3,400	-
국 비	2,040	-	-	2,040	-
시 도 비	68	-	-	68	-
시군구비	612	-	-	612	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	680	-	-	680	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 한국농어촌공사 위수탁 계약 체결 완료 : 2016. 4. 29.

○ 한국농어촌공사(위탁시행자) 보조금 및 자부담 교부 완료 : 2016. 4. 29.

○ 설계도서 제출 및 기술검토회 실시 : 2016. 8. 24.

□ 향후계획

○ 설계도서 보완 및 승인                    : 2016. 8. 31.

○ 입찰 및 업체선정                         : 2016.  9. 10.

○ 착공 및 시공(열교환기, 히트펌프, 제어)     : 2016. 12. 5.

○ 시운전                                   : 2016. 12. 20.

○ 사업 준공 및 정산보고                    : 2016. 12. 31.

사업명

청운고가 보수보강

담당자

재난안전실 김현수(☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 통행차량의 안정성을 확보하여 재해 사전예방 및

노후교량 보수 ․ 보강으로 내화력 증진에 따른 교량 수명연장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 12 ~ 2016. 10.

○ 위 치 : 장성읍 영천리, 기산리 지내

○ 규 모 : 보수보강 1식

- 손상슬래브 보강 A=762㎡, 교좌장치 교체 170EA

- 교면포장 A=3,350㎡ , 표면 및 단면보수 A=1,763㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,000			3,000
국 비
시 도 비
시군구비	3,000			3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 정밀점검 용역 : 2016. 2

○ 실시설계 용역추진 : 2016. 3 ~ 5

- 교면포장, 슬라브패널보강, 교좌장치교체, 교면포장,

단면보수, 표면보수 등

○ 계약심사 : 2016. 7

□ 향후계획

○ 철도청 협의 및 관련부서 협의 : 2016. 8

○ 사업추진 : 2016. 8 ~ 10월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장성호 수변 트레킹길 조성

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수변 트레킹길 조성으로 관광자원 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1 ~ 2016. 12

○ 위 치 : 장성호 지내

○ 규 모 : 출렁다리, 트레킹길 조성 L=2.9km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,900		1,900	3,000
국 비
시 도 비
시군구비	4,900		1,900	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2015년분 : 수변데크길 L=2.1km, 전망대 및 쉼터 7개소

- 공사 계약심사 : 2016. 3. 24

- 계약 및 공사추진 : 2016. 4. 22 ~ 10. 18

○ 2016년분 : 수변 연결데크 3개소

- 용역 계약심사 : 2016. 1. 29

- 계약 및 용역추진 : 2016. 3. 8 ~ 8. 4

□ 향후계획

○ 2015년분 : 수변데크길 L=2.1km, 전망대 및 쉼터 7개소

- 공사추진 : 2016. 7 ~ 10. 18.

○ 2016년분 : 수변 연결데크 3개소

- 설계용역 추진          : 2016. 7~8

- 농어촌공사 시설물협의  : 2016. 8

- 계약심사               : 2016. 8

- 공사계약 및 착공       : 2016. 10

사업명

고려시멘트 앞 도시계획도로개설

담당자

경관도시과 김문기(☎390-7471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 주거환경 개선으로 주민들의 삶의 질 향상을 위하여 도시계획

도로를 정비하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1.  ∼ 2017. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 단광리 지내

○ 규 모 : 도로개설 L=700m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,000			2,500	1,500
국 비
시 도 비
시군구비	4,000			2,500	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계                          : 2016. 1. ∼ 3.

○ 사업시행 인가                     : 2016. 3.

○ 토지보상 50% 완료(25필지 3,152㎡)  : 2016. 4. ∼ 8.

○ 토지수용재결 신청 준비            : 2016. 8.

□ 향후계획

○ 토지수용재결 신청                 : 2016. 10.

○ 공사착수                          : 2017.  3.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

주공아파트 앞 도시계획도로개설

담당자

경관도시과 김문기(☎390-7471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 주거환경 개선으로 주민들의 삶의 질 향상을 위하여 도시계획

도로를 정비하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1.  ∼ 2017. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 영천리 지내

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,500			2,000	2,500
국 비
시 도 비
시군구비	4,500			2,000	2,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계                          : 2016. 1. ∼ 3.

○ 사업시행 인가                     : 2016. 3.

○ 토지보상 76% 완료(14필지 6,540㎡)  : 2016. 4. ∼ 8.

○ 공사착수                          : 2016. 7.∼

○ 토지수용재결 신청 준비            : 2016. 8.

□ 향후계획

○ 토지수용재결 신청                 : 2016. 10.

○ 공사완료                          : 2017. 12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

장성역∼청운고가간 도시계획도로개설

담당자

경관도시과 김문기(☎390-7471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 주거환경 개선으로 주민들의 삶의 질 향상을 위하여 도시계획

도로를 정비하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1.  ∼ 2017. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 영천리 지내

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	5,000			2,000	3,000
국 비
시 도 비
시군구비	5,000			2,000	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계                          : 2016. 1. ∼ 3.

○ 사업시행 인가                     : 2016. 3.

○ 토지보상 83% 완료(19필지 2,501㎡)  : 2016. 4. ∼ 8.

○ 토지수용재결 신청 준비            : 2016. 8.

□ 향후계획

○ 토지수용재결 신청                 : 2016. 10.

○ 공사완료                          : 2017. 12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

향기나는 옐로우시티 조성

담당자

경관도시과 이광준(☎390-7431)

□ 사업목적 및 필요성

○  옐로우시티를 주제로 한 관광자원 활성화

○ 거버넌스(행정+사회단체+유관기관+기업체+지역주민) 구축을 통한 실천적 관광 자원화

□ 사업개요

○ 기 간 :  2016년  1월 ～ 2018년 12월( 3년)

○ 위 치 : 장성군 장성읍, 황룡면 지내

○ 규 모

◦ 재래시장 활성화(주차장조성 A=200㎡)

◦ 옐로우시티 파크조성 (몽마르트 언덕 L=50m)

◦ 장성역 중심로 조성(전시관 1동, 옐로우로드L= 0.8km)

◦ 옐로우 타운 조성(건물벽 색채 30동, 야간경관조성 1식)

◦ 옐로우 리버 조성(A=22,000㎡)

◦ 중심지 녹화(L=0.9km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	30.00			9.92	20.08
국 비	16.01			7.42	8.59
시 도 비
시군구비	13.99			2.50	11.49
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 소규모지역개발사업 지구지정 협의 완료 : ‘16. 5.

○ 디자인 마스터 플랜 용역 완료 : ‘16. 7.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 착수 및 완료 : ‘16. 8.  ~ ’16.11.

○ 사업 착수 및 준공             : ‘16.12. ~ ’18.12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음