황룡강 생태하천 복원사업

❍ 사업기간 : 2012 ~ 2017년(6년)

❍ 사업위치 : 장성읍 상오리(장성댐) ~ 황룡면 월평리(장진보)

❍ 사업개요 : 하도정비 L=4.46km, 어도11개소, 자연형여울3개소, 가동보2개소,

징검다리1개소, 조경식재(갈대, 물억새 등)

❍ 사 업 비 : 20,000백만원(지특 12,000 , 군비 8,000)

❍ 시공회사 : ㈜영무토건, ❍ 감리회사 : ㈜평화엔지니어링외2개사(대호,백산)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2012. ~ 2017. (6년)

❍ 위    치 : 장성읍 상오리(장성댐) ~ 황룡면 월평리(장진보)

❍ 연도별 예산현황

구분	연도별사업비(백만원)			비고
	계	2016년까지	2017년
계	20,000	11,612	8,388
국비	12,000	6,967	5,033
군비	8,000	4,645	3,355

□ 추진실적

❍ 기본 및 실시설계 용역              : 2012. 6. 14. ~ 2013. 12. 5

❍ 공사 착공                          : 2014. 6. 17.

❍ 공사추진(공정율 82%)

- 현재까지 공사추진현황

⇒ 자연석쌓기 4.46km, 어도 10개소, 여울 3개소, 가동보 1개소,

징검다리1개소

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분	연도별 투자현황 및 계획 (단위 : 백만원)
	합 계	‘13년이전	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년
사업비	20,000	1,057	1,721	5,667	3,167	8,388

□ 기대효과

❍ 생태하천 복원사업의 마무리로 축령산과 더불어 우리군을 대표할 수 있는 랜드마크 역할 기대

❍ 인간과 자연이 공존하고 누구나 찾고 싶어 하는 황룡강의 탄생으로 군민들의 자긍심 고취

위  치  도