10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

월평처리구역 하수관거 정비

담당자

맑은물관리사업소

최민수(☎390-8551)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 합류식 하수관거를 분류식으로 시공하여 관거 기능회복을 통한       토양 오염 및 지하수 보호와 불명수 유입 차단

○ 오염총량관리 시행계획의 오염부하량 삭감계획을 만족시켜 하수처리 효율       제고 및 위생적인 도시환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2012. 3. ~ 2016. 7.

○ 위 치 : 장성군 황룡면 월평리 일원

○ 규 모 : 하수관로 정비 L=16.7km , 배수설비 409세대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,733백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	16,733	16,733
국 비	11,713	11,713
시 도 비
시군구비	5,020	5,020
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 우․오수관로 정비 L=16.7km, 배수설비 409세대 설치 완료

○ 2016. 7. 사업 준공

□ 향후계획

○ 우·오수 사후관리

사업명

나노산단 폐수처리시설 설치사업

담당자

맑은물관리사업소

장은철(☎390-8547)

□ 사업목적 및 필요성

○ 나노일반산업단지 내 기업들의 생산 활동으로 발생되는 오□폐수를 안정

적으로 처리하여 입주업체의 쾌적한 근무여건 조성 및 수질환경개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 3. 31. ~ 2017. 7. 7.(1단계)

2017. 6. 22. ~ 2018. 6. 21.(2단계)

○ 위 치 : 장성군 남면 삼태리 880-2(산업단지 내)

○ 규 모 : 3,000톤/일(1□2단계 각 1,500톤/일)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,371백만원(1단계 12,364백만원, 2단계 4,007백만원)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	16,371	6,551	5,813	1,913	2,094
국 비	11,248	4,585	4,069	500	2,094
시 도 비
시군구비	5,123	1,966	1,744	1,413	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 1단계(1,500톤/일) 사업 추진 : 2015. 3. 31. ~ 2017. 7. 7.

□ 향후계획

○ 2단계(1,500톤/일)  사업 추진 및 종합시운전   : 2017. 6. ~ 2018. 6

사업명

사가지구 지표수보강개발사업

담당자

재난안전실 신동혁 (☎390-7487)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 농업용수 확보로 농업생산성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 12. ~ 2016. 10.

○ 위 치 : 북이면 사거리 사가지구

○ 규 모 : 조산제 확장, 복룡제 보강(수혜면적 48.8ha)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,900	6,801	99
국 비	4,830	4,761	69
시 도 비
시군구비	2,070	2,040	30
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○  사업준공 : 2016. 10.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

청소년수련관 건립

담당자

평생교육센터 김태훈(☎390-8574)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년 활동 공간 확충으로 청소년들의 건전한 육성 기반조성과

청소년 전용 정보·문화·휴식공간 마련으로 문화의 질 향상

○ 다양한 욕구표현의 장을 제공하여 정서함양 및 자질배양 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 11. ~ 2016. 10.

○ 위    치 : 전남 장성군 장성읍 문화로 110

○ 대지면적 : 연건축면적 2,582㎡

○ 건축규모 : 지상 3층, 철근콘크리트조

○ 주요시설 : 다목적강당, 체육활동장, 노래방, 밴드·댄스실, 상담실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  6,173백만원(국비 4,793 / 군비 1,380)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,173	3,265	2,908	-	-
국 비	4,793	2,121	2,672
시 도 비
시군구비	1,380	1,144	236
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 청소년수련관 부지매입                                 : 2013. 11.

○ 지방재정 투융자 재심사 및 공유재산 관리계획 변경 승인 : 2013. 11.

○ 청소년수련관 건립사업 기본 및 실시설계 완료           : 2014.  9.

○ 청소년수련관 건립공사 착공                            : 2015.  1.

○ 청소년수련관 개관식 및 청소년문화한마당 행사 개최     : 2016. 10.

□ 향후계획

○ 청소년수련관 위수탁계약 체결 및 공증                  : 2017. 7.

○ 청소년 프로그램 개발 및 여성가족부 등 공모사업 참여   : 연  중

사업명

장애인종합복지관 건립

담당자

주민복지과 김도연(☎390-7317)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애인에게 종합재활서비스를 제공하여 장애인의 잠재능력을 개발·지원

하며, 재활자립과 다양한 프로그램을 제공하여 장애인 복지증진 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013. 7. ~ 2016. 5.

○ 위    치 : 장성읍 기산리 489-1외 2필지(공립노인요양병원 옆)

○ 규    모 : 부지 5,420㎡(1,641평), 건물 1,504㎡(455평), 지상2층

○ 주요시설 : 물리치료실, 프로그램실, 주간보호실, 직업재활실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,120백만원[원전기금(도비) 3,040 / 군비 2,080]

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,120	3,864	1,256
국 비
시 도 비	3,040	1,784	1,256
시군구비	2,080	2,080
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 건립부지 확정(노인전문병원 부근)	: 2012.  9. 13.

○ 공유재산관리계획 의결승인	: 2012. 11. 10.

○ 건립공사 기본 및 실시설계 용역 착수	: 2013.  9. 23.

○ 건립부지 매입(5억)	: 2013. 11. 19.

○ 지방재정 투․융자심사 승인(도 심사)	: 2013. 12. 11.

○ 전남도 공공디자인심의	: 2014.  6. 27.

○ 전남도 계약심사	: 2014.  8.

○ 건립공사 착공	: 2015.  1.

○ 준    공	: 2016.  5.

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

황룡강 생태하천 복원사업

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 식생복원, 동식물 서식처 제공으로 하천 수생태계 건강성 회복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2017(6년)

○ 위 치 : 장성읍 상오리(장성댐) ~ 황룡면 월평리(장진보)

○ 규 모 : L=9.5km

- 어도 12개소, 자연형여울 3개소, 가동보 2개소, 하도정비 L=4.5km,

생태조경 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	20,000	8,445	3,167	8,388
국 비	12,000	5,067	1,900	5,033
시 도 비
시군구비	8,000	3,378	1,267	3,355
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 공사추진

- 4차분 공사추진(추진율 65%)

→ 어도 5개소, 자연석 쌓기 1.3km, 가동보 1개소, 생태 조경공 1식

□ 향후계획

○ 4차분 공사 추진 : 2017. 7. ~ 12.

- 가동보 1개소, 어도1개소 설치

- 어류 서식처 조성

- 생태 조경공 1식

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

개천 생태하천 복원사업

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 식생복원, 동식물 서식처 제공으로 하천 수생태계 건강성 회복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017(5년)

○ 위 치 : 북이면 원덕교 ~ 황룡강 합류점

○ 규 모 : 17.4km(하천연장 19km)

- 자연형여울 27개소, 가동보1개소, 하도정비 L=4.0km

- 서능복합생물서식처 조성, 하도내 식생복원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	20,000	9,009	3,334	7,657
국 비	12,000	5,405	2,000	4,595
시 도 비
시군구비	8,000	3,604	1,334	3,062
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 4차분 공사 추진(추진율 : 50%)

→ 자연석 쌓기 L=1.1km, 자연형 여울 2개소, 수달 서식처 25개소

□ 향후계획

○ 4차분 공사 추진 : 2017. 7. ~ 12.

- 자연석 쌓기 L=1.3km

- 서능복합생물 서식처, 자연형 여울 2개소

- 생태 조경공 1식

사업명

축령산 휴양타운 조성

담당자

경관도시과김형수(☎390-7357)

□ 사업목적 및 필요성

○ 축령산을 방문하는 산림치유‧휴양객 수요 증가로 부족한 숙박시설 및 편익시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011. 12. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 장성군 서삼면 모암리 산96

○ 규 모 : 306,843㎡(부지매입, 숙박시설 12동, 진입로개설, 기타 편익시설)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,200	3,500		700
국 비
시 도 비	4,200	3,500		700
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 사업부지 매입                                 : 2013. 10.

○ 군관리계획 변경 및 개발촉진지구 개발계획 변경 용역 : 2013. 10. ~ 2014. 10.

○ 실시설계 용역                                 : 2014. 10. ~ 2014. 12.

○ 사업발주 및 착공                              : 2014. 12.

○ 사업추진중                                    : 2015.  1. ~

□ 향후계획

○ 사업추진 및 준공 : 2015. 1. ~ 2017. 12.

사업명

친환경고품질 장성잔디명품화

담당자

산림편백과 김성수 (☎390-7070)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경 고품질 잔디 생산기반 조기정착 및 경쟁력 확보

○ 고부가가치 잔디 상품개발을 통한 잔디 가공시장 선점 및 신시장 개척

○ 잔디산업육성 협력시스템 구축을 통한 친환경 고품질 잔디 인프라 확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 장성군 삼서면 석마리 948, 수양리 산136-1 일대

○ 규 모 : 향토산업 경상사업(추진단운영, 역량강화, 홍보마케팅, 연구개발비 등) 4회, 잔디유통및가공시설 3,527㎡, 잔디테마공원 19,600㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3.000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	1.809	537	654	-
국 비	1,500	905	268	327	-
시 도 비	180	108	33	39	-
시군구비	720	434	129	157	-
지 방 채	0	0	0	0	-
민간자본	600	362	107	131	-
기 타	0	0	0	0	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2016년 사업추진단 운영, 역량강화사업, 홍보마케팅 사업 추진

○ 잔디유통 및 가공시설 완료, 잔디테마공원 조성 중

□ 향후계획

○ 2017년 사업추진단 운영, 역량강화 및 홍보마케팅 계속 추진

○ 잔디테마공원 조성완료 및 준공

사업명

장산처리구역 하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소

최민수(☎390-8551)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장산지구 하수 관거를 정비하여 오·우수를 효율적으로 처리함과 방류 하천의       수질보호와 주민보건 위생향상 및 쾌적한 환경조성 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 03. 30. ~ 2017. 03. 26.

○ 위 치 : 장성군 서삼면 장산·대덕·모암리 일원

○ 규 모 : 하수관거 연장 15.1km, 배수설비 293개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,700	714	4,986
국 비	3,990	500	3,490
시 도 비
시군구비	1,710	214	1,496
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 하수관거 연장 15.1km 및 배수설비 293개소 설치

□ 향후계획

○ 사업준공 : 2017. 3.

○ 우·오수 사후관리

사업명

거마소하천 정비

담당자

재난안전실 김국원(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우로 인한 농경지 및 주택침수를 예방함으로써 쾌적한

농촌환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016(3년)

○ 위 치 : 북이면 신평리 일원(거마천)

○ 규 모 : 2.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,095백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,095	4,095
국 비	2,047	2,047
시 도 비
시군구비	2,048	2,048
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 거마소하천 준공 : 2016. 6. 30.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

백암지구 소규모 하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소

김범한(☎390-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 백암지구 소규모마을하수도 신규시설 확충을 통하여 하수를 효과적으로       처리하여 부근토양 및 수질오염을 예방하고 주민의 안전한 주거 생활과       환경개선으로 보건 위생 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 5. 15. ~ 2016. 8. 31.

○ 위 치 : 장성군 북이면 백암리 일원

○ 규 모 : 오수관로 4.74km, 압송관로 1.1km, 배수설비 117, 처리장 1, 중계펌프장 3

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,700	429	2,271
국 비	1,890	300	1,590
시 도 비
시군구비	810	129	681
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 하수관거 연장 5.8km 및 배수설비 117개소 설치완료

○ 2016. 7. 사업 준공

□ 향후계획

○ 우·오수 사후관리

사업명

북하지구 지방상수도 조성

담당자

맑은물관리사업소

강홍권(☎390-8561)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 북부권(북이면, 북하면) 주민들의 식수난 해소

○ 안정적인 생활용수 확보로 농촌 주거환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. 3. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 북이, 북하면 일원

○ 규 모 : 상수관로 L=45.0km(D 200mm～16mm)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,240백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	7,240	2,414	1,943	1,143	1,740
국 비	5,070	1,690	1,360	800	1,220
시 도 비	714	234	175	103	202
시군구비	1,456	490	408	240	318
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 장성군 수도정비 기본계획 수립 및 변경(2004, 2011)

○ 수도사업 인가(2011. 3.)

○ 북하지구 농어촌 지방상수도시설 조성 실시설계용역(2014. 6. ～ 9.)

○ 소규모 환경평가(2014. 10.～ 11.)

○ 사업발주 및 착공(2015. 3.)

□ 향후계획

○ 사업준공 : 2018. 12.

사업명

덕산지구 지표수 보강개발

담당자

재난안전실 신동혁(☎390-7487)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원활한 농업용수 확보로 농업생산성 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 12. ~ 2018. 12

○ 위 치 : 동화면 구룡리 덕산지구

○ 규 모 : 덕산제 보강, 삼룡제 신설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	8,230	500	1,160	1,000	5,570
국 비	5,761	350	812	700	3,899
시 도 비
시군구비	2,469	150	348	300	1,671
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 1~2차분 사업추진 : 2015. 12. ~ 2017. 6.

□ 향후계획

○ 3차분 사업추진 및 완료 : 2017. 6. ~ 2018. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

아곡소하천 정비

담당자

재난안전실 김국원(☎390-7483)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우로 인한 농경지 및 주택침수를 예방함으로써 쾌적한

농촌환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017

○ 위 치 : 황룡면 아곡리 일원(아곡천)

○ 규 모 : 1.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,594백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,594	1,594	2,000
국 비	1,797	797	1,000
시 도 비
시군구비	1,797	797	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 아곡소하천 정비 추진 : 2015. 7. 1. ~ 2017. 5. 19.

□ 향후계획

○ 아곡소하천 준공 : 2017. 5. 19.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

이암지구 소규모 마을하수도 정비

담당자

맑은물관리사업소

김범한(☎390-8553)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이암지구 소규모마을하수도 신규시설 확충을 통하여 하수를 효과적으로       처리하여 부근토양 및 수질오염을 예방하고 주민의 안전한 주거 생활과       환경개선으로 보건 위생 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 4. 8. ~ 2016. 12. 4.

○ 위 치 : 장성군 삼계면 덕산리, 수산리 일원(이암, 만화, 반월, 자초마을)

○ 규 모 : 오수관로 4.58km, 압송관로 957m, 배수설비 90, 처리장 1, 중계펌프장 2 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,110	429	2,681
국 비	2,177	300	1,877
시 도 비
시군구비	933	129	804
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 하수관거 연장 5.5km 및 배수설비 90개소 설치

□ 향후계획

○ 2017. 6. 사업 준공

○ 오수 사후관리

사업명

상무평화공원 내 축구장 조성

담당자

문화관광과 채양기(☎390-7251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서부권 주민들의 여가선용 활성화를 위한 체육시설 설치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017

○ 위 치 : 장성군 삼계면 주산리 일원

○ 규 모 : 축구장(105*68), 트랙, 씨름장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,500	1,000	1,000	500
국 비	450	-	300	150
시 도 비
시군구비	2,050	1,000	700	350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 잔디포설 완료

○ 부대시설(트랙, 조경수 식재 중)

□ 향후계획

○ 준공식 개최 : 2017.

○ 유지관리 철저

□ 사업변경 내역

○ 변경없음

사업명

상무평화공원 조성

담당자

문화관광과 채양기(☎390-7251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서부권 관광인프라구축을 통한 방문객 유입으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018

○ 위 치 : 장성군 삼계면 주산리 일원

○ 규 모 : 평화공원 Ａ=40,183㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,800	-	283	1,333	2,184
국 비	2,280	-	170	800	1,310
시 도 비
시군구비	1,520	-	113	533	874
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기반시설 설치 중(도로Ｌ=618m, 주차장Ａ=8,864㎡)

○ 부대시설(전망대 등)

□ 향후계획

○ 평화공원 조성

○ 유지관리 철저

□ 사업변경 내역

○ 변경없음

사업명

축령산 치유의 숲 가는 길 정비

담당자

문화관광과 채양기(☎390-7251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 축령산을 찾는 방문객의 만족도 향상을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2018

○ 위 치 : 장성군 서삼면 추암리 일원

○ 규 모 : 치유의 숲 정비 Ｌ=2.0㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	-	1,167	833	1,000
국 비	1,800	-	700	500	600
시 도 비
시군구비	1,200	-	467	333	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 치유의 숲 길 정비(Ｌ=1,3㎞)

○ 부대시설(전망대, 화장실 등)

□ 향후계획

○ 치유의 숲 길 정비(Ｌ=0.7㎞)

○ 유지관리 철저

□ 사업변경 내역

○ 변경없음

사업명

잔디재배지 객토지원사업

담당자

산림편백과 김성수 (☎390-7070)

□ 사업목적 및 필요성

○ 그동안 판매된 잔디에 흙이 포함되어 반출됨에 따라, 토양환경 악화로

잔디 품질 저하의 원인이 됨

○ 객토를 실시하여 건강한 토양자원을 보충 고품질 잔디 생산기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2017

○ 위 치 : 장성군(장성읍, 남, 동화, 삼서, 삼계, 황룡면) 잔디재배지 일원

○ 규 모 : 131ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5.000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000	-	3,018	1,982	-
국 비	2,500	-	1,509	991	-
시 도 비	400	-	241	159	-
시군구비	1,600	-	966	634	-
지 방 채	-	-	0	0	-
민간자본	500	-	302	198	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 객토사업 추진완료(잔여사업비 추가 물량 확보 후 사업 완료)

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

제2황룡교 재가설

담당자

재난안전실 김현수(☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후교량 재가설로 통행차량의 안전성 확보에 따른 재해 사전예방,

재가설에 따른 인도설치로 보행자의 안전확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 장성군 황룡면 월평리, 장산리 지내

○ 규 모 : 교량재가설 L=250m(B=13.0m), 접속도로 L=300m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  12,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	12,000		345	8,155	3,500
국 비
시 도 비	900		345	555
시군구비	11,100			7,600	3,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 용역 계약심사    : 2016. 2.

○ 실시설계추진              : 2016. 6. ~ 2017. 4.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 완료 : 2017. 4.

○ 재해위험지구 지정 추진 : 2017. 5.

○ 설계 사전 심의 : 2017. 7. ~ 8.

○ 계약심사 : 2017. 9.

○ 사업추진 : 2017. 10. ~ 2018. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장성군 상수관망 최적화관리시스템 구축

담당자

맑은물관리사업소

고재훈(☎390-8566)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상수관망의 체계적 정비 및 최적관리시스템 구축으로 누수율을 보다 최소화

하고 효율적인 상수도 운영체제로 안전하고 안정적인 수돗물을 공급하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 장성군 관내 일원

○ 규 모 : (1단계) 누수관망감시시스템 구축, 유량계 10개소 등 설치

(2단계) 가압장(23개소), 배수지 통합감시시스템 구축,

블록구축(17개소) 및 구역별 유량계 설치(10개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원(국비 500, 군비 1,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,000	864	1,136
국 비	500		500
시 도 비
시군구비	1,500	864	636
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 준공)

○ 1단계 및 2단계사업(누수관망감시시스템 구축, 유량계 10개소 설치) 완료

- 상수관망 통합운영관리시스템 구축 실시설계  : 2016. 4.

- 전라남도 계약심사                          : 2016. 5.

- 사업시행 및 입찰공고                       : 2016. 5.

- 2단계 공사시행 및 준공                     : 2016. 6. ~ 12.

□ 향후계획

○ 유지관리 철저

사업명

농업에너지이용효율화(지열냉난방시설)

담당자

농업축산과 백지연(☎390-8464)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생에너지 이용기술의 농업시설 적용 및 확대보급 기반 구축, 국제      유가‧농자재 가격 상승으로 인한 농가의 경영비 부담 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 4. ~ 2017. 6.

○ 위 치 : 전남 장성군 황룡면 옥정리 638-1 등 8필지

○ 규 모 : 16,638.2㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,400백만원                                    (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,400	-	3,400	-	-
국 비	2,040	-	2,040	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	68	-	68	-	-
지 방 채	612	-	612	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	680	-	680	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 한국농어촌공사 위(수)탁계약체결 : 2016. 4.

○ 설계도서 검토 및 보완 : 2016. 6. ~ 9.

○ 기계공사 계약 및 사업 착수, 기성검사(2회) 완료 : 2016. 10. ~ 12.

□ 향후계획

○ 보조금으로 취득한 주요재산 사후관리 : 10년

○ 고품질 토마토 생산 및 농산물 수출 확대

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 연장

- 당  초 : 2016. 4. 28. ~ 2016. 12. 31.

- 변  경 : 2016. 4. 28. ~ 2017. 6. 30.

사업명

청운고가 보수보강

담당자

재난안전실 김현수(☎390-7488)

□ 사업목적 및 필요성

○ 통행차량의 안정성을 확보하여 재해 사전예방 및

노후교량 보수 ․ 보강으로 내화력 증진에 따른 교량 수명연장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 12 ~ 2017. 6..

○ 위 치 : 장성읍 영천리, 기산리 지내

○ 규 모 : 보수보강 1식

- 손상슬래브 보강 A=762㎡, 교좌장치 교체 170EA

- 교면포장 A=3,350㎡ , 표면 및 단면보수 A=1,763㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000		1,110	1,890
국 비	500		185	315
시 도 비
시군구비	2,500		925	1,575
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계 용역 : 2016. 3. ~ 5.

○ 철도시설공단 협의 : 2016. 6. ~ 8.

○ 보수보강공사 착공 : 2016. 9. ~ 2017. 6.

□ 향후계획

○ 청운고가보수보강 준공 : 2017. 6.

○ 교량 유지관리

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

황룡시장 주차환경 개선

담당자

경제교통과 박하영 (☎390-7353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서민경제의 한 축인 전통시장의 어려움 극복과 활로 모색을 위한 시장 시설 개선 및 활성화 지원

□ 사업개요

○ 기 간 :  2016. 12. ~ 2017. 12.

○ 위 치 :  전남 장성군 황룡면 월평리 153-3(황룡시장 일원)

○ 규 모 :  주차장 50면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000		1,709	1,291
국 비	1,800		1,025	775
시 도 비
시군구비	1,200		684	516
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50%)

○ 상인 및 이해관계자 설명 및 사업 준비        : 2015. 9. ~

○ 공유재산 관리계획 심의(군의회) 및 투자심사	: 2015. 12.

○ 사업 후보시장 선정	: 2016. 3.

○ 부지 매입 및 보상 완료(12가구/1,612백만원)   : 2016. 12.

□ 향후계획

○ 황룡시장 주차환경개선사업 실시설계 용역	: 2017. 1. 18. ~ 6. 30.

○ 황룡시장 주차환경개선사업 공사 추진	: 2017. 8 ~ 12.

☞ 사업비 : 1,291백만원

- 주차장 조성(793백만원),  부대공사 외(498백만원)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장성호 트레킹길 조성

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수변 트레킹길 조성으로 관광자원 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 장성호 지내

○ 규 모 : 출렁다리, 트레킹길 조성 L=2.3km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,900	1,900	3,000
국 비
시 도 비
시군구비	4,900	1,900	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 수변 트레킹길 조성 공사 추진 : 2016. 4. ~ 2017. 6.

○ 수변 연결데크(3개소) 용역 완료 : 2016. 3. 8. ~ 10. 31.

□ 향후계획

○ 수변 트레킹길 조성사업(L=2.3km) 준공 : 2017. 6.

○ 출렁다리 설치사업 추진 : 2017. 7 ~ 12.

- 자재 운반로 개설 및 출렁다리 설치

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

고려시멘트 앞 도시계획도로개설

담당자

경관도시과 김문기(☎390-7471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 주거환경 개선으로 주민들의 삶의 질 향상을 위하여 도시계획

도로를 정비하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1.  ∼ 2017. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 단광리 지내

○ 규 모 : 도로개설 L=700m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,000		2,500	1,500
국 비
시 도 비
시군구비	4,000		2,500	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 실시설계                          : 2016. 1. ∼ 3.

○ 사업시행 인가                     : 2016. 3.

○ 토지보상 100% 완료                : 2016. 4. ∼ 12.

□ 향후계획

○ 공사추진                          : 2017. 3. ∼ 12.

○ 예비준공검사                      : 2017. 10.

○ 준공완료                          : 2017. 12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

주공아파트 앞 도시계획도로개설

담당자

경관도시과 김문기(☎390-7471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 주거환경 개선으로 주민들의 삶의 질 향상을 위하여 도시계획

도로를 정비하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1.  ∼ 2017. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 영천리 지내

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,500		2,000	1,500
국 비	500		500
시 도 비
시군구비	3,000		1,500	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 실시설계                          : 2016. 1. ∼ 3.

○ 사업시행 인가                     : 2016. 3.

○ 토지보상 100% 완료                : 2016. 4. ∼ 12.

□ 향후계획

○ 공사착수                          : 2017. 3. ∼ 12.

○ 예비준공검사                      : 2017. 10.

○ 준공완료                          : 2017. 12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

장성역∼청운고가간 도시계획도로개설

담당자

경관도시과 김문기(☎390-7471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 주거환경 개선으로 주민들의 삶의 질 향상을 위하여 도시계획

도로를 정비하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1.  ∼ 2017. 12.

○ 위 치 : 전남 장성군 장성읍 영천리 지내

○ 규 모 : 도로개설 L=500m, B=25m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	5,000		2,000	3,000
국 비
시 도 비
시군구비	5,000		2,000	3,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 실시설계                          : 2016. 1. ∼ 3.

○ 사업시행 인가                     : 2016. 3.

○ 토지보상 100% 완료                : 2016. 4. ∼ 12.

□ 향후계획

○ 공사착수                          : 2017. 3. ∼ 12.

○ 예비준공검사                      : 2017. 10.

○ 준공완료                          : 2017. 12.

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

향기나는 옐로우시티 조성

담당자

경관도시과이광준(☎390-7431)

□ 사업목적 및 필요성

○  옐로우시티를 주제로 한 관광자원 활성화

○ 거버넌스(행정+사회단체+유관기관+기업체+지역주민) 구축을 통한 실천적 관광 자원화

□ 사업개요

○ 기 간 :  2016. 1. ～ 2018. 12.(3년)

○ 위 치 : 장성군 장성읍, 황룡면 지내

○ 규 모

- 재래시장 활성화(주차장조성 A=200㎡)

- 옐로우시티 파크조성 (몽마르트 언덕 L=50m)

- 장성역 중심로 조성(전시관 1동, 옐로우로드L= 0.8km)

- 옐로우 타운 조성(건물벽 색채 30동, 야간경관조성 1식)

- 옐로우 리버 조성(A=22,000㎡)

- 중심지 녹화(L=0.9km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000		101	2,420	479
국 비	1,601		61	1,420	120
시 도 비
시군구비	1,399		40	1,000	359
지 방 채

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 소규모지역개발사업 지구지정 협의 완료 : 2016. 5.

○ 디자인 마스터 플랜 용역 완료          : 2016. 7.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 완료                 : 2017. 7.

○ 실시계획인가(전남도)                   : 2017. 7. ~ 8.

○ 사업 착수 및 준공                     : 2017. 8. ~ 2018. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

개천인도교 설치

담당자

재난안전실 정원식(☎390-7496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 황룡강과 지천의 합류부에 재난발생시 인근 주민들이 대피할 수 있는

이동통로를 설치하여 주민편익을 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 10. 10. ~ 2017. 10. 4.

○ 위 치 : 장성읍 장안리

○ 규 모 : B=3.0m L=99m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,600		2,600
국 비
시 도 비	171		171
시군구비	2,429		2,429
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 주탑 및 케이블 설치 완료

○ 진입데크 및 호안공 시공

□ 향후계획

○ 진입데크 및 교통안전시설 정비 : 2017. 7. ~ 9.

○ 공사 준공 : 2017. 10. 4.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

향토산업육성(마을반찬기업공동마케팅)

담당자

농업축산과 손승희(☎390-8512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 향토자원인 마을단위 반찬산업을 통합하여 체계를 구축함으로써

지역경제 활성화 및 농가 안정적 소득원 제공에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017

○ 위 치 : 장성군 남면 마령리 538-17

○ 규 모 : 지상2층, 484.62㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	983	64	1,953
국 비	1,500	328	16	1,156
시 도 비	180	41	10	129
시군구비	720	164	37	519
지 방 채
민간자본
기 타	600	450	1	149

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 87%)

○ HACCP시설, 체험장, 가공유통센터 준공 및 이동판매차량 구입

○ 제품개발, BI․CI개발(맘엔찬), 쇼핑몰 운영, 체험프로그램 운영 등

□ 향후계획

○ 공공 급식용 ․ 도시락 제품개발, 통합패키지 제작, 홈쇼핑용 영상 제작

○ 라디오 ․ SNS홍보, 안테나샵 운영, 참여업체 역량강화 활동(워크숍, 교육 등)

□ 사업변경 내역

○ 없음

사업명

향토산업육성(천연조미료융복합산업화)

담당자

농업축산과 손승희(☎390-8512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장성군 농특산물을 이용한 천연조미료 제품개발, 품질향상 연구, 부문별

연계 시너지 확대를 통한 농가소득 확대 및 고부가가치 산업화 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 장성군 삼서면 우치리 464

○ 규 모 : 지상1층(저온창고, 홍보관), 249㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000		117	1,788	1,095
국 비	1,500		72	828	600
시 도 비	180		17	91	72
시군구비	720		28	404	288
지 방 채
민간자본
기 타	600			465	135

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 저온창고 준공 및 홍보관 설계심사

○ 시제품개발, BI․CI개발(지니多), 카카오페이지 운영, 신세계백화점 입점행사

□ 향후계획

○ 홍보관 준공, 연구실 장비 구입, 가공유통센터 및 저온창고 설치

○ 부산물 활용한 제품개발, 통합패키지 제작, 홈페이지 구축 등

□ 사업변경 내역

○ 없음

사업명

축령산 관광단지 조성

담당자

경관도시과 이광준(☎390-7431)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 성장 잠재력을 개발하고 공공과 민간의 투자를 촉진하여 지역개       발사업이 효율적으로 시행될 수 있도록 종합적·체계적으로 지원함으로써       축령산 관광 활성화 및 지역경제 활성화로 지역 균형발전을 위함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 지역개발사업(축령산 휴양 관광지 조성)

○ 위    치 : 장성군 서삼면 추암리 산24-68번지 일원

○ 사업내용

- 부지 638,482㎡

- 기반시설 구축 (주차장 300면, 진입도로 L=700m)

- 관광휴양시설(숲치유센터 1동, 산림 휴양관 1동, 캠핑장 100면)

○ 사업기간 : 2016 ~ 2020

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,900		2,000	400	1,500
국 비
시 도 비
시군구비	3,900		2,000	400	1,500
지 방 채
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 토지보상 협의 및 매수(1단계)                    : 2016. 6.

□ 향후계획

○ 토지보상 협의 및 매수(2단계)                    : 2017. 12.

○ 민간투자자 모집 및 사업착수                    : 2019. 12.

○ 사업준공                                       : 2020. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장성 공설운동장 건립

담당자

문화관광과 채양기(☎390-7251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육시설 확충을 통한 군민 건강증진 및 삶의 질 향상과 각종 대회 유치를 통한 지역경제 발전 및 군민화합에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2020

○ 위 치 : 장성군 장성읍 기산리 일원

○ 규 모 : 공설운동장 Ａ=76,088㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	22,000	-	500	4,340	17,160
국 비	6,000	-	-	700	5,300
시 도 비
시군구비	16,000	-	500	3,640	11,860
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 장성 공설운동장 설계용역 중

□ 향후계획

○ 운동장 건립

○ 유지관리 철저

□ 사업변경 내역

○ 21,700백만원 ⇒ 22,000백만원(감정평가결과 토지매입비 상승)

사업명

장성 홍길동축제

담당자

문화관광과 류명희(☎390-7242)

□ 사업목적 및 필요성

○ 축제를 통하여 홍길동의 고장이라는 브랜드 이미지 구축과 방문객을 통한 지역경제 활성화 및 군민 화합에 기여

□ 사업개요

○ 주    제 : 헬로우 길동! 옐로우 장성!!

○ 행사기간 : 2016. 5. 6. ~ 5. 8. (3일간)

☞ 개막식 : 2016. 5. 6.(금) 19:00 / 공설운동장 주무대

○ 장    소 : 공설운동장(황룡강변), 홍길동테마파크

○ 주최/주관 : 장성군/장성군축제위원회

○ 후    원 : 전라남도, 전라남도교육청, 한국관광공사, 한국지역진흥재단

○ 주요행사 : 개막식, 경연, 체험, 공연, 부대행사 등

☞ 전라남도 대표축제

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	300		300
국 비
시 도 비	15		15
시군구비	285		285
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제17회 장성 홍길동축제 개최

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장성 백양단풍축제

담당자

문화관광과 류명희(☎390-7242)

□ 사업목적 및 필요성

○ 가을철 백양사 애기단풍을 소재로 축제를 개최하여 아름다운 관광자원을 알림으로써 관광객의 지속적인 방문유도

□ 사업개요

○ 주    제 : 「옐로우시티와 함께하는 오색단풍 여행」

○ 행사기간 : 2016. 10. 28. ~ 10. 30. (3일간)

☞ 군민화합노래자랑 : 2016. 10. 27.(목) 18:00

○ 장    소 : 국립공원 백암산·백양사 일원

○ 주최/주관 : 장성군/장성군축제위원회

○ 후    원 : 전라남도, 한국관광공사

○ 주요행사 : 공연, 체험, 전시, 농·특산물 판매장 운영 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  517백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	157		157
국 비
시 도 비
시군구비	157		157
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제20회 장성 백양단풍축제 개최

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

전국조정경기대회 지원

담당자

문화관광과 이전수(☎390-7228)

□ 사업목적 및 필요성

○ 비인기 종목인 조정의 저변 확대와 수상스포츠 메카로서의 장성군 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 7. 23. ~ 7. 25. (3일간)

○ 위 치 : 장성호 조정경기장

○ 규 모 : 전국 38개팀 500여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	110		110
국 비
시 도 비	10		10
시군구비	100		100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제32회 대통령기전국시도대항조정대회 개최

□ 향후계획

○ 제33회 대통령기전국시도대항조정대회 유치

□ 사업변경 내역

○ 해당없음