정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	제2황룡교 재해위험지구 정비사업 추진
② 추진배경	❍ 1965년 준공된 노후 교량으로 콘트리트 탈락, 철근노출 및 부식이 심하고, 경간장 부족에 따른 부유물 걸림현상 으로 유수 소통이 원활하지 유실 위험이 있던 교량임 - 2017년 5월 재해위험지구로 지정 ❍ 교량 재가설로 노후 교량의 붕괴위험을 해소하고 교량 경간장 확보로 유수소통에 원할을 기하고 접속도로(회전 교차로)를 정비하여 교통사고를 미연에 방지하여 주민의 생명과 재산을 보호하는 재해 예방사업 효과 거양
③ 사업개요	❍ 공 사 명 : 제2황룡교 재해위험지구 정비사업 ❍ 위 치 : 장성군 황룡면 월평리, 장산리 지내 ❍ 사업내용 : 도로 확포장 L=920m, B=11.5~12.5m(회전교차로 2개소) 교량 재가설 L=252m, B=13.0m ❍ 사 업 비 : 8,884백만원(도급액4,864 관급액4,020) ❍ 사업기간 : 2017. 11. 15. ~ 2020. 04. 30.
④ 사업부서	안전건설과		⑤ 담당자	시설 6급 전준봉
⑥ 선정기준	대규모 예산 사업		⑦ 사업기간	2018~2020
<그간 주요 추진내용>
○ 교량 하부공(교대2, 교각6) 설치 완료		2017.11~ 2019. 3.	장관기 안전건설과장 채양기 토목담당 전준봉 주무관
○ 교양 상부공(거더, 슬래브) 설치 완료		2017.11~ 2019. 6.	장관기 안전건설과장 채양기 토목담당 전준봉 주무관
○ 교량 시설물(난간, 인도, 자전거 도로, 가로등 등) 설치완료		2019. 7~ 2019. 12.	장관기 안전건설과장 채양기 토목담당 전준봉 주무관
○ 회전 교차로 2개소(장산, 월평) 설치 중		2019. 7~ 2020. 3.	장관기 안전건설과장 채양기 토목담당 전준봉 주무관