정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	노인회관 신축
② 추진배경	○ 현 노인복지회관의 접근성 문제로 주민 이용률 저조 ○ 노인회의 지속적인 사무실 이전 요구 ○ 읍 소재지에 노인회관 신축으로 주민들의 이용 편익성 증진과 노인회 운영 활성화 유도
③ 사업개요	○ 사업목적 : 노인회 운영활성화로 주민들의 이용 편익성 증진 ○ 사업기간 : 2019. 3. ~ 2022. 7. ○ 사업위치 : 장성군 영천리 899-6번지 외 8필지, 2,214㎡ ○ 규 모 : 1동 지상2층/연면적 744㎡(225평) ○ 주요시설 : 상담실, 강당, 프로그램실, 물리치료실 등 ○ 사 업 비 : 4,496백만원
④ 사업부서	주민복지과		⑤ 담당자	사회복지 6급 박명숙
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2019. 3. ~2022.7.
<그간 주요 추진내용>
○ 노인회관 건립 사업 계획		‘19.03.11.	김영권 부군수 문경배 주민복지과장 이연자 노인복지팀장 류현선 주무관
○ 자체 지방재정 투자심사		‘19.03.11.	이상옥 기획감사담당관 최정순 예산팀장 홍유신 주무관
○ 공유재산관리계획		‘19.07.04.	김명식 주민복지과장 임동섭 노인복지팀장 윤명옥 주무관
○ 노인회관 건립공사 기본 및 실시설계 용역		‘19.10.29.	박홍수 경제건설국장 김선주 도시재생과장 임도현 공사시설지원팀장 김태수 주무관
○ 노인회관 장애물 없는 생활환경(BF) 예비 인증 등록		‘19.12.30.	김선주 도시재생과장 임도현 공사시설지원팀장 김태수 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 노인회관 설계관련 노인회 사전 협의	‘19.12.30.	김선주 도시재생과장 임도현 공사시설지원팀장 김태수 주무관
○ 노인회관 건립공사 지반조사용역	‘20.03.30.	김선주 도시재생과장 임도현 공사시설지원팀장 김태수 주무관
○ 노인회관 건립공사에 따른 디자인 검토 의뢰	‘20.04.17.	김선주 도시재생과장 임도현 공사시설지원팀장 김태수 주무관
○ 외부디자인 협의 완료	‘20.06.23.	김선주 도시재생과장 임도현 공사시설지원팀장 박언정 미래디자인담당관 김태수 주무관
○ 노인회관 신축 성별영향평가 완료	‘20.12.31.	이연자 주민복지과장 임동섭 노인복지팀장 박명숙 주무관
○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비 인증 완료	‘21.01.18.	이태영 미래성장개발과장 황력봉 공공시설지원팀장 김태수 주무관
○ 기본 및 실시설계용역, 군 계약 심사 완료	‘21.02.03.	문경배 기획실장 김수정 기획팀장 신동혁 주무관
○ 공사 계약 (건축,전기,통신,소방)	‘21.05.18.	안광수 재무과장 박재선 경리팀장 김종호 주무관
○ 노인회관 운영 관련 조례 제정	‘22.02.~4.	이연자 주민복지과장 임동섭 노인복지팀장 박명숙 주무관
○ 물품(비품) 구매 계획 및 구입	‘22.05.~6.	이연자 주민복지과장 임동섭 노인복지팀장 박명숙 주무관