정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2025-11) 청운지하차도 개설사업
② 추진배경	호남선 철도로 인해 동서로 분단된 지역 발전의 한계를 극복하고 지역 발전의 기틀을 조성
③ 사업개요	○ 위 치 : 장성군 장성읍 영천리 ○ 사업개요 : 도시계획도로 개설 B=10~35m, L=730m ○ 사 업 비 : 47,000백만원
④ 사업부서	지역개발과		⑤ 담당자	시설7급 백은성
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2021 ~ 2026.
<그간 주요 추진내용>
○ 청운지하차도 개설 기본 및 타당성조사 수립		‘19.01.30.	김종기 부군수 박홍수 경제건설국장 김선주 도시재생과장 박종순 도시계획담당 최민수 주무관
○ 청운지하차도 정밀안전진단		‘19.09.15.	김종기 부군수 박홍수 경제건설국장 김선주 도시재생과장 박종순 도시계획담당 최민수 주무관
○ 청운지하차도 (철도횡단박스) 국비지원 확정		‘20.02.20.	김종기 부군수 박홍수 경제건설국장 김선주 도시재생과장 박종순 도시계획담당 최민수 주무관
○ 청운지하차도 실시설계용역		‘20.04.03.	김종기 부군수 박홍수 경제건설국장 김선주 도시재생과장 박종순 도시계획담당 최민수 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 청운지하차도 확장공사 협약	‘20.07.06.	김종기 부군수 박홍수 경제건설국장 이인섭 도시재생과장 이광준 도시계획팀장 최민수 주무관
○ 보상금확정(1차)	‘20.08.19.	김종기 부군수 박홍수 경제건설국장 이인섭 도시재생과장 이광준 도시계획팀장 최민수 주무관
○ 보상금확정(2차)	‘20.10.14.	김종기 부군수 박홍수 경제건설국장 이인섭 도시재생과장 이광준 도시계획팀장 최민수 주무관
○ 비개착공법 선정 심의	‘20.11.03.	김종기 부군수 박홍수 경제건설국장 이인섭 도시재생과장 이광준 도시계획팀장 최민수 주무관
○ 기본 및 실시설계 경제성 검토 용역	‘20.11.04.	박홍수 경제건설국장 이인섭 도시재생과장 이광준 도시계획팀장 최민수 주무관
○ 자재선정심의	‘21.03.22.	임윤섭 부군수 박홍수 경제건설국장 이인섭 도시재생과장 이광준 도시계획팀장 고형우 주무관
○ 청운지하차도 개설사업 시행	‘21.04.12.	유두석 군수 임윤섭 부군수 박홍수 경제건설국장 이인섭 도시재생과장 이광준 도시계획팀장
○ 건설사업관리용역(감리)	‘21.04.13.	임윤섭 부군수 박홍수 경제건설국장 이인섭 도시재생과장 이광준 도시계획팀장 고형우 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 보상금확정(3차)	‘21.11.25.	임윤섭 부군수 박홍수 경제건설국장 이인섭 도시재생과장 이광준 도시계획팀장 김태주 주무관
○ 지하차도 공법 변경 (OPEN CUT→TOP DOWN)	`22. 3.30.	이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 박창선 주무관
○ 구조물 안전진단 재시행 (철도공사 광주지역관리단)	`22. 6.17.	이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 박창선 주무관
○ 사업중지 (장성읍 철도 지중화 검토 용역)	‘22. 7. 7.	이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 김태주 주무관
○ 장성읍 철도 지중화 사전 타당성 용역 보고	`23. 2.23.	이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 박창선 주무관
○ 사업중지 해제	‘23. 3. 1.	이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 박창선 주무관
○ 실시계획인가고시	‘23. 3.16.	이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 박창선 주무관
○ 지중화사업(한전) 협약체결	‘23. 3.20.	이선형 건설산업국장 이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 박창선 주무관
○ 본선구간 강관벽체 및 H-pile 천공 및 근입 착수	‘23.11.24.	이선형 건설산업국장 이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 박창선 주무관
○ 국가철도공단 위수탁 협약체결	‘24. 1.31.	이선형 건설산업국장 이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 박창선 주무관
○ 본선구간 사업 추진중	‘24. 7. 1.	이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 백은성 주무관

<그간 주요 추진내용>
○ 공정지연에 따른 만회대책 수립	‘24. 9. 1.	이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 백은성 주무관
○ 지중화사업(한전, 통신) 완료	‘24.10. 1.	이선형 건설산업국장 이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 백은성 주무관
○ 호남선(백양사~장성) 청운 지하차도 확장공사 설계심사 (국가철도공단)	`24. 10. 9.	이태영 도시재생과장 채양기 도시계획팀장 백은성 주무관
○ 호남선(백양사~장성) 청운 지하차도 확장공사 일상감사 (국가철도공단)	`25. 2. 6.	이태영 지역개발과장 이광준 도시계획팀장 백은성 주무관
○ 청운지하차도 개설사업 ㈜범양건영 공사포기	‘25. 4.15.	이태영 지역개발과장 이광준 도시계획팀장 백은성 주무관
○ 청운지하차도 개설사업 계약변경(구성원 변경)	‘25. 6. 7.	이태영 지역개발과장 이광준 도시계획팀장 백은성 주무관
○ 호남선(백양사~장성) 청운 지하차도 확장공사 입찰공고 (국가철도공단)	‘25. 7. 1.	곽재영 지역개발과장 이광준 도시계획팀장 백은성 주무관