정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2025-31) 장성군 파크골프장 신규조성
② 추진배경	군민 누구나 연령층에 상관없이 쉽게 접근할 수 있는 다양한 공공체육시설이 요구되고 있으며, 그 중에도 파크골프 체육인구가 늘어남에 따라 파크골프장 신규조성을 통하여 수요에 적극 대응하고자함.
③ 사업개요	○ 대 상 지 : 장성군 일원 ○ 사업내용 : 파크골프장(36홀), 관리사무실 등 부대시설 ○ 사 업 비 : 8,357백만원
④ 사업부서	체육사업소		⑤ 담당자	시설 9급 최경원
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2022. 8 ~ 2026. 6
<그간 주요 추진내용>
○ 기본구상 및 타당성조사 용역 ※ 체육사업소-3402(2023.06.08.)		23.06.12~ 23.10.06	최규원 체육사업소장 나수진 시설운영팀장 박민정 주무관
○ 용역 최종보고회 개최 ※ 체육사업소-5559(2023.09.15.)		23.09.20	최규원 체육사업소장 나수진 시설운영팀장 서강식 주무관
○ 군민평가단 공약 조정·변경 적정여부 심의 승인 ⇒ 사업기간, 예산 변경 (2,000백만원→5,595백만원) ※ 체육사업소-3923(2024.06.26.)		24.06.26	최규원 체육사업소장 나수진 시설운영팀장 서강식 주무관
○ 기본 및 실시설계 용약 계약 및 착수 ※ 체육사업소-3947(2024.06.26.)		24.06.26	최규원 체육사업소장 김건우 시설관리팀장 최경원 주무관
○ 사업부지 감정평가 실시 ※ 체육사업소-4222(2024.07.05.)		24.07.05	최규원 체육사업소장 김건우 시설관리팀장 최경원 주무관
○ 군관리계획 결정(변경) 용역 계약 및 착수 ※ 체육사업소-6179(2024.09.25.)		24.09.25	최규원 체육사업소장 김건우 시설관리팀장 정환호 주무관

○ 소규모 환경영향 평가 용역 계약 및 착수 ※ 체육사업소-6910(2024.10.30.)	24.10.30	최규원 체육사업소장 김건우 시설관리팀장 정환호 주무관
○ 소규모 재해영향 평가 용역 계약 및 착수 ※ 체육사업소-6985(2024.11.1.)	24.11.01	최규원 체육사업소장 김건우 시설관리팀장 정환호 주무관
○ 파크골프장 1차 토지매입 ※ 체육사업소-8502(2024.12.16.)	24.12.16	최규원 체육사업소장 김건우 시설관리팀장 정환호 주무관
○ 파크골프장 2차 토지매입 ※ 체육사업소-3984(2025.05.23.)	25.05.23	최규원 체육사업소장 김건우 시설관리팀장 정환호 주무관
○ 지방재정 투자심사(道) ※ 체육사업소-5821(2025.08.08.)	25.08.08	공태복 체육사업소장 신동혁 시설관리팀장 최경원 주무관